АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, 

<

...> http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-61544/25-141-353

г. Москва

26 июня 2025 года

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шевченко С.В.  

рассмотрел дело по иску ОАО «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>) к ООО «ТрансСигналСтрой» (ИНН 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки, о взыскании 3 611 935руб. 20коп.  

В судебное заседание явились: от истца – ФИО1 по доверенности от 20.03.2025г., ФИО2 по доверенности от 19.09.2024г., от ответчика – ФИО3 по доверенности от 13.03.2025г., 

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСигналСтрой» (ИНН 

<

***>) не позднее 13 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки в работах на объекте «Строительство детского сада в г. Хилок», выполненных по договору № 3641874 от 25.10.2019г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансСигналСтрой» и Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», а именно:  

1.1. Фундаменты, отмостка (Блоки №№ 1, 2, 3) - выполнить основание под отмостку, отмостку, лотки в теле отмостки соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.2. Стены технического подполья Блоки №№ 1, 2, 3: 

1.2.1. Обеспечить несущую способность, геометрическую неизменяемость, нормальную эксплуатацию, соблюдение требований нормативных документов, проектной документации.  

1.2.2. Выполнить отделку стен помещений технического подполья (штукатурка, шпаклевка, финишная отделка) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.2.3. Выполнить пропуск сетей инженерно-технического обеспечения здания через несущие стены подвала, заполнение отверстий соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

Блок № 1: 

1.2.4. Выполнить стенки шахты дымоудаления в уровне подвала в осях 4-5,Ж-К соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

Блок № 2: 

1.2.5. Выполнить стенки шахт ПД в уровне подвала в осях 9-10,Д-Е и 13-16,Е/1-И соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.2.6. Выполнить стенку светового приямка в осях 7-8/Б-В соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, подготовку основания и фундамента согласно проектной документации.  

Блок № 3: 

1.2.7. Выполнить отопление в уровне технического этажа в осях 15-17/Н-Р соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические  

параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.3. Наружные стены (Блоки №№ 1, 2, 3). 

1.3.1. Выполнить антисейсмические пояса на отм. -0,350, +3,300, +6,900 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.3.2. Выполнить монолитные железобетонные сердечники соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.3.3. Выполнить наружные стены здания соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, перевязку несущего и облицовочного слоя, армирование, согласно проектной документации.  

1.3.4. Выполнить монолитные железобетонные перемычки соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации  

1.3.5. Выполнить кирпичную кладку парапетов, по верху кирпичных парапетов монолитный железобетонный обвязочный пояс соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры,  

обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.3.6. Заполнение оконных проемов выполнить оконными блоками соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, оконных блоков, отделку откосов, отливов, согласно проектной документации.  

1.3.7. Выполнить облицовку цокольной части стен здания соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.3.8. Выполнить примыкания навесов над входными группами, световыми приямка и технологическими шахтами к вертикальным поверхностям наружных стен соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.3.9. Выполнить дверные проемы в наружных стенах, отделку откосов, установку дверных блоков соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, дверных блоков согласно проектной документации.  

1.3.10. Выполнить отделку стен (штукатурка, шпаклевка, финишная отделка) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.4. Внутренние стены (Блоки №№ 1, 2, 3). 

1.4.1. Выполнить монолитные железобетонные сердечники соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование согласно проектной документации.  

1.4.2. Выполнить несущие стены здания соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, перевязку рядов, армирование, согласно проектной документации.  

1.4.3. Выполнить антисейсмические пояса внутренних несущих стен на отм. -0,350, +3,300, +6,900 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.4.4. Выполнить заделку технологических отверстий под воздуховоды в несущих стенах соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.4.5. Выполнить монолитные железобетонные перемычки соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.4.6. Выполнить железобетонные сердечники шахт соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации  

1.4.7. Выполнить вентиляционные шахты в несущих стенах соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации  

1.4.8. Выполнить отделку стен (штукатурка, шпаклевка, финишная отделка) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.4.9. Выполнить дверные проемы в стенах, отделку откосов, установку дверных блоков соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, дверных блоков согласно проектной документации  

1.4.10. Выполнить установку дверных блоков, отделку откосов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, дверных блоков, согласно проектной документации.  

Блок № 2 

1.4.11. Выполнить шахту дымоудаления в уровне второго этажа в осях 9-10/ соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.4.12. Выполнить шахту ДУ в осях Г/9-10, нишу ВК в осях 13/Д-И соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

Блок № 3 

1.4.13. Выполнить шахту ПД1 в осях 15-17/Т-Ш в техподполье соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.5. Перегородки Блоки №№ 1, 2, 3 

1.5.1. Выполнить крепление перегородок к перекрытию соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.5.2. Выполнить утепление, отделку кирпичных перегородок вентиляционных камер технического подполья в соответствии с проектом  

1.5.3. Смонтировать железобетонные перемычки соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, согласно проектной документации.  

1.5.4. Выполнить внутреннее утепление, отделку тамбуров 1-го этажа соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, крепление, согласно проектной документации.  

1.5.5. Выполнить внутреннее утепление, отделку тамбуров 1 -го этажа соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, крепление, согласно проектной документации.  

1.5.6. Выполнить заделку технологических отверстий под воздуховоды в перегородках соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала.  

1.5.7. Выполнить установку дверных блоков, отделку откосов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, дверных блоков, согласно проектной документации.  

1.5.8. Выполнить отделку стен (штукатурка, шпаклевка, финишная отделка) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

Блок № 1: 

1.5.9. Выполнить кирпичные перегородки в уровне технического подполья в осях 5-7/Г-Ж и 6-7/С-У соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, перевязку рядов, армирование, согласно проектной документации.  

Блок № 2: 

1.5.10. Заделать пробитые технологические отверстия в кирпичных перегородках технического подполья соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно нормативным документам.  

1.5.11. Выполнить кирпичные перегородки в уровне технического подполья в осях 9-10/Е/1-И и 16/Г-Д соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, перевязку рядов, армирование, согласно проектной документации  

1.5.12. Выполнить проем ОВ в осях 8-9/Е-И согласно проектной документации.  

Блок № 3 

1.5.13. Выполнить кирпичные перегородки в уровне технического подполья в осях 15-19/Э-Ю и 17-19/Ф-Ш соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, перевязку рядов, армирование, согласно проектной документации.  

1.6. Перекрытия Блоки №№ 1, 2, 3 

1.6.1. Выполнить монолитные ж/б участки в перекрытии соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.6.2. Выполнить пароизоляцию по плитам покрытия соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, нахлест, согласно проектной документации.  

1.6.3. Выполнить заделка мест пропуска трубопроводов через перекрытие согласно проектной документации.  

1.6.4. Выполнить отделку потолка (штукатурка, шпаклевка, заделка швов, финишная отделка) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

Блок № 1 

1.6.5. Выполнить межэтажное монолитное перекрытие над первым этажом в осях 6-7/Ж-У соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, армирование, согласно проектной документации.  

1.7. Бассейн Блок № 1 

1.7.1. Выполнить гидроизоляцию, отделку пола, стен, потолка 1 и 2 этажей соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, согласно проектной документации  

1.8. Лестницы Блоки №№ 1, 2, 3 

1.8.1. Выполнить облицовку керамической плиткой низа стены в зоне ступеней лестницы (фартук) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации (Крепление керамической плитки на стены выполнено некачественно, при простукивание зафиксирован характерный глухой звук)  

Блок № 1: 

1.8.2. Выполнить лестницы в осях 1-4/М-П, 4-5/Г-Д/1 с 1-го на 2-ой этаж, отделку лестниц соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

Блок № 2: 

1.8.3. Выполнить лестницы в осях 10-11/Б-В, 16-17/Е-И с 1-го на 2-ой этаж, отделку лестниц соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

Блок № 3: 

1.8.4. Выполнить лестницы в осях 15-17/Ш-Э, 19-20/Ф-Ш с 1-го на 2-ой этаж, отделку лестниц соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.9. Полы 

1.9.1. Выполнить полы техподполья соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, подготовку основания, согласно проектной документации.  

1.9.2. Выполнить полы 1-го, 2-го этажей соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.9.3. Выполнить заполнения, герметизацию технологических отверстий соблюдая технологию производства, согласно проектной документации.  

Блок № 1: 

1.9.4. Выполнить ножные ванны перед чашей бассейна согласно проектной документации.  

1.9.5. Выполнить приямки в полу и уклоны полов технических помещений подвала в осях 5-7/Г-Ж и 6-7/С-У соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

Блок № 2: 

1.9.6. Выполнить приямки в полу и уклоны полов в техническом помещении подвала в осях 15-17/Г-Е, 15-17/И-Л и 9-10/Д-И соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

Блок № 3: 

1.9.7. Выполнить приямки в полу и уклоны полов в техническом помещении подвала в осях 17-19/Ф-Ш и 17-19/Э-Ю соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, армирование, согласно проектной документации.  

1.10. Крыша, кровля 

1.10.1. Выполнить деформационные швы в конструкциях крыши и кровли между блоком, опирание стропильных конструкций, кровлю в зоне деформационного шва соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.2. Выполнить теплоизоляцию в чердаке по плитам покрытия соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.3. Выполнить крепление мауэрлата стропильной системы, стропильные ноги крепить скрутками (на ветровые нагрузки) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.4. Выполнить монолитную обвязку по верху кирпичных парапетов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.5. Выполнить протяжку гаек анкерных шпилек крепления мауэрлата к несущим стенам.  

1.10.6. Выполнить узлы примыкания кровли к вертикальным поверхностям парапетов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.7. Выполнить обрешетку, покрытие кровли здания соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, нахлест, согласно проектной документации.  

1.10.8. Выполнить защитные зонты вентиляционных шахт, шахт дымоудаления согласно проектной документации.  

1.10.9. Выполнить фартук в зоне примыкания кровли к вертикальной поверхности слухового окна соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.10.Выполнить монолитные железобетонные оголовки парапетов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.11.Выполнить водосточную систему соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.12.Выполнить фартук в зоне примыкания кровли к вертикальным поверхностям слуховых окон соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.13.Выполнить металлические стремянки для доступа из чердачного пространства через слуховые окна на кровлю соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.14.Выполнить ходовые трапы от слуховых окон до конька кровли соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.15.Выполнить выпуски фановых стояков и вентиляционных шахт из ПВХ труб соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.16.Выполнить ходовые мостики в чердачном помещении соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.17.Уложить в зоне опирания мауэрлата на кирпичную кладку техноэласт соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, перехдест, согласно проектной документации  

1.10.18. Выполнить ограждение по кровле соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.19.Выполнить снегоудерживающие устройства соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

Блок № 1: 

1.10.20. Выполнить элементы стропильной системы-затяжки, вертикальные связи, деформационные швы соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, опирание, согласно проектной документации.  

1.10.21.Выполнить крепление стропильной ноги на ветровые нагрузки в осях 7,С/1 согласно проектной документации  

1.10.22.Выполнить сопряжение основания ендовой с кирпичным парапетом, в зоне расположения водосточной воронки в осях 7-8/Л-М и 5-6/Г соблюдая  

технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.23.Конструктивное исполнение кровли в зоне расположения водоприемной воронки в осях 7-8/Л-М выполнить соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.24.Выполнить узел примыкания кровли к слуховому окну в осях 3-4/Ж-К, 6-7/П-С и 2-4/П-С соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.25.Выполнить сопряжение скатов кровли в осях 6-7,В/1-Г соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.26.Выполнить примыкание кровли к вертикальным поверхностям вентиляционных шахт в осях 5-7/Ж-К и 4-5/П-С, соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.27. Выполнить конек кровли согласно проектной документации. Блок № 2: 

1.10.28.Выполнить элементы стропильной системы-затяжки, вертикальные связи соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.29. Выполнить стойки, подкосы стропильной системы в осях 8-17/Б-В, 12-16/И-Л, соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.30.Выполнить защитный фартук на пониженном участке кровли в зоне перепада высоты (каскадный водоотвод) в осях 12-16/И согласно проектной документации.  

1.10.31.Выполнить фартуки в узлах примыкания кровли к вертикальным поверхностям шахты лифта и выхода на чердак, соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.32.Выполнить защитный штукатурный слой шахты дымоудаления выше уровня кровли в осях 5/С, 5/П и 15-17/Ф-Ш, примыкание кровли к шахте соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.33.Выполнить штукатурный слой вертикальной поверхности кирпичной кладки парапета в осях 8/К-М соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.34. Выполнить пропуск вентиляционных стояков из труб ПВХ в осях 12- 13/В-Г соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

Блок № 3: 

1.10.35.Выполнить элементы стропильной системы-затяжки, вертикальные связи соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.36.Выполнить стропильная ногу в зоне пропуска кирпичной шахты в осях 17/Ш соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.10.37.Выполнить в осях 21/Т-Ш облицовочный слой кирпичной кладки в уровне фронтонов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, крепление, перевязку, согласно проектной документации.  

1.10.38.Установить стропильные ноги в осях 17/Ф-Ш согласно проектной документации.  

1.10.39.Закрепить стропильные ноги на ветровые нагрузки в осях 15/Р-Т согласно проектной документации.  

1.10.40.Выполнить защитный фартук на пониженном участке кровли в зоне перепада высоты (каскадный водоотвод) в осях 16-18/Е согласно проектной документации.  

1.11. Отопление Блоки №№ 1, 2, 3 

1.11.1. Выполнить систему отопления техподполья, 1 -го, 2-го этажей в Блоках 1, 2, 3 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.11.2. Выполнить установку на отопительных приборах 1 -го, 2-го этажей в Блоках 1, 2, 3 автоматические терморегуляторы соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.11.3. Выполнить систему отопления «теплый пол» 1-го, 2-го этажей в Блоках 1, 2, 3 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.12. Индивидуальный тепловой пункт. Выполнить индивидуальный тепловой пункт соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации:  

1.12.1. Выполнить планировку помещения ИТП (Блок 1) - установить внутренние перегородки в помещении подвала.  

1.12.2. Выполнить планировку помещения ИТП (Блок 2) - установить внутренние перегородки, дверную коробку с дверью.  

1.12.3. Выполнить планировку помещения ИТП (Блок 3) - установить внутренние перегородки, дверную коробку с дверью.  

1.12.4. Выполнить дренажные приямки в помещениях ИТП (Блок 1, Блоки 2, Блок 3).  

1.12.5. Смонтировать оборудование и трубопровы ИТП (Блок 1), смонтировать узел учета тепловой энергии (УУТЭ), клапан перепада давления, водоподогреватель горячего водоснабжения с обвязкой, электронный регулятор температуры, циркуляционный насос ГВС с обвязкой, пластинчатый водоподогреватель ГВС.  

1.12.6. Выполнить распределительные гребенки (Блоки 1, 2, 3). 

1.12.7. Выполнить на трубопроводах ИТП (Блок 1, 2, 3) проектные манометры, закладные конструкции - отборные устройства температуры, гильзы для термометров.  

1.12.8. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов в помещениях ИТП (Блок 1, 2, 3). 

1.12.9. Выполнить антикоррозионное покрытие эмалью термостойкой трубопроводов, распределительные гребенки.  

1.13. Внутренние сети водоснабжения (Блоки 1, 2, 3). 

1.13.1. Выполнить систему водоснабжения техподполья, 1 -го, 2-го этажей в Блоках 1, 2, 3 здания соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.2. Выполнить водомерный узел на вводе в здание, выполнить подключение внутренних сетей водопровода к наружным соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.13.3. Подключить сети горячего водоснабжения к тепловому узлу согласно проектной документации  

1.13.4. Смонтировать оборудование системы резервного горячего водоснабжения соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.13.5. Установить отключающую арматуру на магистральных трубопроводах в подвале согласно проектной документации.  

1.13.6. Выполнить компенсаторы при пересечении трубопроводами деформационных швов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.13.7. Пересечение перекрытий выполнить с установкой гильз на каждый стояк с заделкой пластичным не горючим материалом соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.8. Установить и подключить водоразборную арматуру соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.9. Установить и подключить к магистральному водопроводу пожарные краны соблюдая технологию производства, конструктивные, технические,  

геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.10.Установить и подключить к магистральному водопроводу наружные поливочные краны соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.11.Выполнить кольцевание магистральных трубопроводов холодного водопровода соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.12.Выполнить систему водоподготовки бассейна соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.13.13.Выполнить установку санитарно-технических приборов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.14. Внутренние сети канализации 

1.14.1. Выполнить дренажные приямки, соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.14.2. Вывести вентиляционную часть канализационных стояков за пределы кровли соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.14.3. Выполнить монтаж санитарно-технических приборов соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, оборудования, конструкций, согласно проектной документации.  

1.14.4. Установить противопожарные манжеты в перекрытиях на стояках канализации соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.14.5. Выполнить нормативный уклон магистральных участков, проложенных под потолком подвала, согласно проектной документации  

1.14.6. Подключить магистральные участки сети канализации, проложенных по подвалу к выпускам согласно проектной документации.  

1.14.7. Установить раструбы, отводы соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.14.8. Выполнить люки, предусмотренные в коробах ГВЛ для обеспечения доступ к ревизии на стояках канализации соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15. Вентиляция Блоки №№ 1, 2, 3 

1.15.1. Смонтировать воздуховоды, вентиляционные клапаны, вентиляционное оборудование, в том числе кондиционирование соблюдая  

технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15.2. Смонтировать воздуховоды, вентиляционные клапаны, вентиляционное оборудование, в том числе кондиционирование соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15.3. Смонтировать воздуховоды, выполнить вентиляционные каналы соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15.4. Выполнить огнезащитное покрытие воздуховодов противодымной вентиляции, транзитных участков общеобменных систем вентиляции соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15.5. Выполнить теплоизоляцию воздуховодов с последующим покрытием стеклопластиком рулонным в техподполье, чердаке соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15.6. Выполнить заделку отверстий (герметично с уплотнением из негорючих материалов с обеспечением нормируемого предела огнестойкости) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.15.7. Выполнить заделку отверстий (герметично с уплотнением из негорючих материалов с обеспечением нормируемого предела огнестойкости) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.16. Внутренние электрические сети силового электрооборудования и электрического освещения Блоки №№ 1, 2, 3  

1.16.1. Выполнить внутренние электрические сети силового электрооборудования и электрического освещения соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, оборудования, согласно проектной документации.  

1.16.2. Установить хризотилцементные трубы для ввода кабелей электроснабжения в техподполье в соответствии с проектом.  

1.16.3. Установить светильники в техподполье соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.16.4. Выполнить монтаж молниезащиты соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры,  

обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.16.5. Выполнить монтаж электрообогрева кровли соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17. Наружная отделка Блоки №№ 1, 2, 3 

1.17.1. Выполнить узел примыкания навеса к вертикальной поверхности стены выполнен некачественно, не обеспечивается надежная защита ниже расположенных конструкций от атмосферных осадков в осях 2-3/Г, 6-7/Г, У-С/1-2, В-Б/8 согласно проектной документации.  

1.17.2. Выполнить бетонные ступени крыльца в осях 4-5/В/1, 10-12/А соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.3. Выполнить штукатурный слой бетонного крыльца в осях 4-5 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.4. Выполнить оштукатуривание откосов оконного проема в осях 13-16/Б, М-К/1 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.5. Установить подоконные отливы (фасонные элементы) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно нормативной документации, проектной документации.  

1.17.6. Выполнить штукатурный слой откоса над оконными проемами в осях 2-3/Г, Н-Т/20, Ш-Э/20 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.7. Выполнить навес над входом в техподполье в осях 2-3/Г соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.17.8. Выполнить бетонное крыльцо в осях Е-И/18 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.9. Выполнить отделочный слой крыльца в осях Т-Ш соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.10.Выполнить бетонное крыльцо в осях Ф-Ш согласно проектной документации.  

1.17.11.Выполнить отделочный слой цокольной части стены отделочного слоя кирпичной кладки в осях Ш-Э/20, Э-Ю/20 соблюдая технологию производства,  

конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.12.Выполнить пандус в осях Ш-Ю/21 в соответствии с проектом. 

1.17.13.Убрать приток атмосферных осадков в помещение подвала через отверстие существующих лотков в осях 15/Ю.  

1.17.14.Выполнить крыльца с навесом в осях 10-15/Л соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.15.Выполнить навес над световыми приямками соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.16. Устранить замачивание кирпичных стен шахты и цокольной части стены в осях 8-9/Л, Ю-Э/15, Т-Р/15.  

1.17.17.Выполнить уплотнение грунтового основания в осях 5-4/Ф/1, Э-Ш/14 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.18. Выполнить свес профлиста кровли навеса над крыльцом в осях 5-4/Ф/1, Э-Ш/14, М-К/1, 10-12/А, Е-И/18, Т-Ф/21 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.17.19.Выполнить отделочный слой цокольной части воздухозаборной шахты в осях Ю-Э/15 согласно проектной документации.  

1.17.20.Выполнить световой приямок в осях Ф-Т/15 согласно проектной документации.  

1.17.21.Выполнить бетонный пандус в осях С/1 -П/1-2 согласно проектной документации.  

1.17.22.Выполнить ступени бетонного крыльца в осях К-Ж/1 -2 согласно проектной документации.  

1.17.23. Выполнить шахту в осях К-Ж/1 согласно проектной документации. 1.18. Наружные сети теплоснабжения 

1.18.1. Выполнить транзитный участок тепловой сети (от ТК6а для подключения НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Хилок», Хилокский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж.д. транспорту» и гаражей) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.18.2. Выполнить прокладку участка тепловой сети для подключения строящегося здания детского сада (от ТК6а до здания детского сада) соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.18.3. Выполнить гидроизоляции каналов тепловой сети соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические  

параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.19. Наружные сети водоснабжения 

1.19.1. Выполнить вынос водопровода с тепловым спутником соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры,  

обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.19.2. Выполнить согласно проектной документации сеть водопровода.  

1.19.3. Выполнить в колодце № 2 подключение существующего водопровода соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.19.4. Выполнить в колодце № 4 слив в дренажный колодец соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.19.5. Выполнить колодец ДК1 и участок сети опорожнения от колодца № 4 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.19.6. Выполнить в соответствии с проектом пожарный гидрант в колодце 1сПГ, разделительную задвижку на магистральной линии. Подключить нитку водопровода на которой предусмотрен ПГ.  

1.20. Наружные сети канализации 

1.20.1. Выполнить колодцы сети К1 согласно проектной документации.  

1.20.2. Выполнить ливневую канализацию соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации  

1.21. Внешняя система электроснабжения 

1.21.1. Выполнить подключение проектируемой 2КТП-1000/6/0,4 к электрическим сетям 6кВ, в том числе монтаж кабельной линии 6кВ, концевой опоры № 2 ВЛ-6кВ в точке подключения к ВЛ-6кВ «Ф8 ввод с ЭЧЭ» соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.21.2. Выполнить установку опор № 1 ВЛ-6кВ фидера «Ф8 ввод с ЦРП», опор № 1 ВЛ-0,4кВ Ф11, Ф15 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации  

1.21.3. Выполнить установку опор № 15, 15а ВЛ-0,4кВ фидера Ф6.2, монтаж кабельной линии 0,4кВ от проектируемой КТП до опоры № 15, установку опор № 19а ВЛ-0,4кВ Ф6.1 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.21.4. Выполнить монтаж проектируемой КТП на площадке соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.21.5. Установить на опорах ВЛ-0,4кВ, ВЛЗ-6кВ знаки безопасности, оперативных наименований, нумерация согласно проектной документации.  

1.21.6. Установить опоры № 74 и № 75 освещения площадки проектируемой КТП соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.21.7. Выполнить защиту кабельных линий 0,4кВ, 6кВ при подъеме на опоры соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.21.8. Установить опоры № 3 ВЛ-6кВ фидера «Ф8 на ТП-15» соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.21.9. Выполнить установку и подключение РЩ1, РЩ2 для электропитания зданий поликлиники соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.21.10.Выполнить кабельный колодец соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.21.11.Выполнить освещения на территории детского сада соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.21.12.Выполнить сети 0,4кВ соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.22. Подпорные стены ПС-1, ПС-2 

1.22.1. Выполнить деформационные швы в конструкциях подпорных стен соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации  

1.22.2. Устранить негативное влияние трещин в теле стены, обеспечить нормальную эксплуатацию стены.  

1.22.3. Выполнить монолитную железобетонную лестницу в зоне распашных ворот выезда на ул. Комсомольская соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации.  

1.22.4. Выполнить штукатурный слой подпорной стены в зоне сопряжения с ограждением по ул. Калинина, со стороны ул. Комсомольская соблюдая  

технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкция, согласно проектной документации.  

1.23. Ограждение Тип-1 

1.23.1. Устранить негативное влияние трещин в теле стены, обеспечить нормальную эксплуатацию.  

1.23.2. Выполнить фундаменты ограждения, ограждение соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации.  

1.23.3. Выполнить металлическое ограждение соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, согласно проектной документации.  

1.23.4. Выполнить ограждения в районе поликлиники согласно проекта. 

1.23.5. Выполнить антикоррозионное покрытие металлоконструкций согласно проектной документации.  

1.23.6. Выполнить деформационный шов в зоне примыкания к конструкциям подпорной стены, выполненной параллельно ул. Нагорная, согласно проектной документации.  

1.24. Ограждение Тип-2, Тип-3 

1.24.1. Выполнить ограждение соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации.  

1.25. Пешеходный мост № 1, Пешеходный мост № 2 

1.25.1. Выполнить пешеходный мост № 1 соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации.  

1.26. Русло ручья 

1.26.1. Выполнить русло ручья соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации.  

1.26.2. Выполнить ограждение русла соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.27. Трансформаторная подстанция 

1.27.1. Площадку трансформаторной подстанции, размещение здания КТП выполнить соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации  

1.28. Автомобильная площадка для разгрузки и погрузки инвентаря 

1.28.1. Устранить негативное влияние трещин в теле стены, обеспечить нормальную эксплуатацию стены.  

1.28.2. Выполнить деформационный шов в узле примыкания к фундаменту ограждения территории соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.28.3. Выполнить лестницу соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, армирование, согласно проектной документации.  

1.29. Генеральный план 

1.29.1. Выполнить покрытие проезда у здания детского сада соблюдая технологию производства, конструктивные, технические, геометрические параметры, обеспечивая применение требуемого материала, конструкций, согласно проектной документации.  

1.29.2. Выполнить крыльцо по оси 1, крыльцо по оси В/1, центральный вход по оси Б, входные группы по оси Л, вход по оси 18.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТрансСигналСтрой» (ИНН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 10 000руб. 00коп. за каждый календарный день неисполнения решения по делу № А40-61544/25-141-353 в части устранения выявленных замечаний / недостатков в выполненных работах, начиная с даты истечения установленного судом срока (13 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу) по день фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТрансСигналСтрой» (ИНН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>) 3 611 935руб. 20коп. убытков и 183 358руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья А.Г. Авагимян