АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600005, 

<

...> 

тел. 

<

***>, факс 

<

***> е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________  

 РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А11-3597/2024

г. Владимир

11 июня 2025 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомедовым Ш.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А11-3597/2024 по исковому заявлению Управления архитектуры и строительства администрации города Владимира (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СВО-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об устранении недостатков выполненных по муниципальному контракту от 21.08.2019 № 32-62/63 работ (с учетом уточнения),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Детский сад № 4 компенсирующего вида» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 17, 49, 65, 71, 101, 110, 112, 121, 123, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СВО-Строй» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных по муниципальному контракту от 21.08.2019 № 32-62/63 работ, а именно:  

1) в целях устранения повреждения отмостки в виде провалов в асфальтобетонном покрытии по периметру здания выполнить замену отмостки с устройством уплотненного основания из щебня;  

2) в целях устранения имеющихся повреждений устройств снегозадержания и исключения повторного образования повреждений выполнить:  

- замену поврежденных устройств снегозадержания, которые имеют деформацию (кронштейны и трубчатые элементы);  

- установку дополнительных кронштейнов по всему периметру кровли с шагом не более 750 мм;  

- произвести демонтаж всех кронштейнов устройств снегозадержания и монтаж их вновь с применением двух резиновых прокладок и одной пластиковой втулки на каждый кронштейн в соответствии с инструкцией по монтажу трубчатых снегозадержателей системы ROOFSYSTEMS.RU;  

- произвести замену листа металлочерепицы, который имеет повреждение в виде сквозных отверстий;  

3) в целях устранения дефекта устройства вертикальной гидроизоляции и устранения протечек в техническом подполье выполнить следующие работы:  

- выполнить раскопку обратной засыпки вдоль наружных стен по оси А и по оси 1;  

- выполнить ремонт вертикальной гидроизоляции по оси А и по оси 1 с устройством ее до верхней части отмостки;  

- выполнить обратную засыпку грунтом с уплотнением по оси А и по оси 1; - восстановить отмостку по оси А и по оси 1; 

4) в целях устранения трещины в цементно-песчаной стяжке технического подполья  

в осях 5-6 выполнить следующие работы: 

- выполнить расшивку и заделку трещины ремонтным составом в осях 5-6;  

- выполнить нарезку температурно-усадочных швов в цементно-песчаной стяжке в  

осях 5-6 с формированием карт размерами не более 6*6 м; 

5) в целях устранения пролития в помещении № 27 выполнить следующие работы: - произвести замену кровельных проходок у вентиляционных труб;  

6) в целях устранения пятен грибковой плесени на цементно-песчаной стяжке под  

линолеумом в проеме аварийного выхода из игровой № 2 выполнить следующие работы:  

- произвести демонтаж плиточного покрытия на входной площадке аварийного  

выхода из игровой № 2 с укладкой его вновь с уклоном от дверного проема; 

- произвести герметизацию нижнего монтажного шва дверного блока цементно-песчаным раствором;  

- произвести обработку пятен грибковой плесени антисептирующим составом;  

7) в целях устранения трещин в откосах дверных проемов наружных стен выполнить  

следующие работы: 

- выполнить ремонт штукатурки откосов дверных проемов в наружных стенах; - выполнить шпаклевку и окраску откосов дверных проемов в наружных стенах;  

8) в целях устранения трещины на наружной стене над оконным проемом в  

помещении № 3 выполнить следующие работы: 

- выполнить демонтаж облицовки верхнего откоса и устройство его вновь; - выполнить шпаклевку и покраску откосов оконного блока.  

9) устранить трещины в перегородках, трещины в местах сопряжения перегородок с  

несущими стенами; 

10) устранить неисправность металлических дверных блоков в помещениях  

 № 27,45,7,38; 11) устранить провал в асфальтобетонном покрытии проезжей части; 

12) устранить трещины на отделочном покрытии пола из керамической плитки;  

13) устранить повреждение входных групп № 4, 5, 7 (наклон лестничных ступеней и  

площадок, трещины на керамической плитке); 

14) устранить трещины на керамической плитке в кухонном блоке.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СВО-Строй» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.  

Исполнительные листы выдать в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  

Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его  

вынесения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную  

силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения  

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья Е.В. Смагина