АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, 

<

...>; тел./факс 

<

***>/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-25026/2025

03 апреля 2026 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2026 года

В полном объеме решение изготовлено 03 апреля 2026 года

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ребрий Л.А., рассмотрев

в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации – 10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СтройТраст» (ИНН 

<

***>,

ОГРН 

<

***>) о взыскании 22 654 857 руб. 33 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 01.08.2024 (паспорт, диплом);

от ответчика: Церковная Н.А. по доверенности от 01.01.2026 (паспорт, диплом); ФИО2 по доверенности от 12.03.2026 (паспорт, диплом);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации – 10» (далее – ООО «Управление механизации – 10», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СтройТраст» (далее – ООО «СтройТраст», ответчик) о взыскании 22 654 857 руб. 33 коп. задолженности по договорам подряда от 22.04.2024 № 22/04/24-4, от 30.06.2025 № 30/06/25, от 22.07.2025 № 22/07/25.

Определением от 14.01.2026 исковое заявление принято к производству суда, назначено предварительное судебное заседание.

Протокольным определением суда от 12.02.2026 дело назначено к судебному разбирательству.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представители ответчика просили в их удовлетворении отказать.

Представитель ответчика просил в удовлетворении иска отказать, поддержал ранее заявленное ходатайство об уменьшении неустойки.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Между ООО «Управление механизации – 10» (подрядчик) и ООО «Стройтраст» (заказчик) заключены договоры подряда от 22.04.2024 № 22/04/24-4 (далее – договор 1), от 30.06.2025 № 30/06/25 (далее – договор 2), от 22.07.2025 № 22/07/25 (далее – договор 3).

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 3.1-3.3 договора 1 в редакции дополнительного соглашения от 02.07.2025 № 2 подрядчик обязуется выполнить работы по нанесению дорожной разметки (далее – «работы(а)») на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети)» (далее – «объект») в срок, установленный договорами сдать результат работ заказчику, а заказчик принять результат работ и оплатить в порядке и на условиях договора.

Виды и объём работ, выполняемые по настоящему договору, определяются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (приложение №1), прилагаемым к настоящему договору и являющимся неотъемлемой его частью. Объем работ, подлежащий оплате, конкретизируется актами и справками формы КС – 2, КС-3, счет фактурой.

Цена работ по договору составляет 16 175 758,38 (шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2 695 959,73 руб. В указанную сумму включается стоимость работ, причитающееся вознаграждение, транспортные расходы, стоимость материалов, использование оборудования и иные затраты подрядчика в связи с проведением работ на объекте, а также компенсацию издержек подрядчика. Цена выполняемых подрядчиком работ включает все налоги, сборы и взносы.

Подрядчик производит оплату выполненных работ не позднее 15 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

Заказчик производит расчеты с подрядчиком на основании стоимости выполненных работ за вычетом стоимости генподрядных, которые составляют 10 % от стоимости выполненных работ.

Согласно пунктам 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 договора 2 подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению дорожной разметки (далее – «Работы(а)») на объекте: «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ФИО3 УЛИЦЕ ДЕРГАЧЕВА ОТ УЛИЦЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ДО УЛИЦЫ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ (С УСТРОЙСТВОМ КОНТАКТНОЙ ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ СЕТИ И РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ)» (далее – «объект») в срок, установленный договорами сдать результат работ заказчику, а заказчик принять результат работ и оплатить в порядке и на условиях договора.

Виды и объём работ, выполняемые по настоящему договору, определяются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (приложение №1), прилагаемым к настоящему договору и являющимся неотъемлемой его частью. Объем работ, подлежащий оплате, конкретизируется актами и справками формы КС – 2, КС-3, счет фактурой.

Цена работ по договору составляет 3 757 104,71 (три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч сто четыре) рубля 71 копейка, в том числе НДС 20% в размере 626 184,12 руб. В указанную сумму включается стоимость работ, причитающееся вознаграждение, транспортные расходы, стоимость материалов, использование оборудования и иные затраты подрядчика в связи с проведением работ на объекте, а также компенсацию издержек подрядчика. Цена выполняемых подрядчиком работ включает все налоги, сборы и взносы.

Подрядчик производит оплату выполненных работ не позднее 15 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 договора 3 в редакции дополнительного соглашения от 13.10.2025 № 1

Подрядчик в соответствии с условиями договора обязуется выполнить работы по нанесению дорожной разметки (далее работы) на автомобильной дороге по ул. Воровского в городе Омске (далее – «объект»).

Работы выполняются подрядчиком в соответствии с договором, рабочей и проектной документацией, с локально-сметным расчетом (приложение № 1).

Цена работ по договору составляет 4 108 833 (четыре миллиона сто восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 44 копейки, в том числе НДС 20% в размере 684 805,57 руб. В указанную сумму включается стоимость работ, причитающееся вознаграждение, транспортные расходы, стоимость материалов, использование оборудования и иные затраты подрядчика в связи с проведением работ на объекте, а также компенсацию издержек подрядчика. Цена выполняемых подрядчиком работ включает все налоги, сборы и взносы.»

Оплата работ по договору производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

Заказчик производит расчеты с подрядчиком на основании стоимости выполненных работ за вычетом стоимости генподрядных, которые составляют 15 % от стоимости выполненных работ.

Как указывает истец, подрядчик свои обязательства по договорам выполнил в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 26.08.2025 № 1 (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 26.08.2025 № 1 и счетом-фактурой от 26.08.2025 № 120, актом о приемке выполненных работ от 09.07.2025 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 09.07.2025 № 1, счетом-фактурой от 09.07.2025 № 101., актом о приемке выполненных работ от 30.10.2025 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.10.2025 № 1, счетом-фактурой от 30.10.2025 № 207.

Стоимость выполненных работ по договору 1 составила 17 443 016 руб. 72 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2 907 169 руб. 45 коп., по договору 2 - 1 373 942 руб. 97 коп., в том числе НДС – 20 % в размере 228 990 руб. 50 коп., по договору 3 - 3 837 897 руб. 64 коп., в том числе НДС 20 % в размере 639 649 руб. 61 коп.

В установленный договорами срок оплата работ ответчиком не произведена, претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, руководствуясь следующим.

По смыслу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданско-правовые обязательства могут возникать из заключения договора.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В пункте 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (пункт 1 статьи 709 ГК РФ).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 ГК РФ по договору строительного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

В обоснование исковых требований истцом представлены акты приемки выполненных работ, подписанные сторонами в двустороннем порядке.

Соответственно, подписание актов свидетельствует о факте выполнения работ, потребительской ценности.

Ответчиком возражения относительно качества, объема, цены работ не заявлены, доказательства оплаты не представлены.

Следовательно, в отсутствие доказательств оплаты работ исковые требования предъявлены правомерно.

Таким образом, требование о взыскании задолженности подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, 451 549 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины подлежат возмещению истцу ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации – 10» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройТраст»

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации – 10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 22 654 857 руб. 33 коп. основного долга, а также 451 549 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

Решение в полном объеме изготавливается в течение десяти дней, выполняется в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Судья Г.В. Шмаков