28/2017-148357(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 03 июля 2017 года 

по делу № А33-11904/2017 Красноярск

03 июля 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ПБ Вертикаль" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 24.12.2013)  удовлетворить.  

Внести следующие изменения в условия контракта № 205-ОК/44-2016 от 07.11.2016 на  выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации с получением  положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция  комплекса зданий и сооружений стадиона «Спутник» в г. Дивногорске», в объеме согласно  техническому заданию, утвержденному заказчиком (для субъектов малого  предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций),  заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "ПБ Вертикаль" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 24.12.2013) и Краевым  государственным автономным профессиональным образовательным учреждением  "Дивногорский колледж – интернат олимпийского резерва" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, Красноярский край, г. Дивногорск, дата регистрации - 30.12.1993) в  редакции Дополнительного соглашения № 1 от 16.11.2016:  

- пункт 2.1 контракта изложить в следующей редакции: «2.1. Сроки выполнения работ.  Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта. Срок завершения работ: 31  августа 2017 года»;  

- пункт 12.3 контракта изложить в следующей редакции: «12.3. Настоящий контракт  вступает в силу со дня подписания его сторонами действует по 31.12.2017 (в случае, если до  

указанной даты обязательства сторон не будут исполнены, срок действия продлевается до  полного исполнения ими своих обязательств) либо до расторжения контракта»;  

- разделы 5-10 Графика выполнения работ (Приложение № 2 к контракту (в редакции  Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 16.11.2016)) изложить в  следующей редакции:  

5 

Проектная документация (в полном  объеме)  

15.11.2016  

30.06.2017  

5 110 000,00  

6 

Согласование проектной документации с  Заказчиком  

20.05.2017  

30.06.2017  

7 

Государственная экспертиза проектной  документации с получением  

положительного заключения (включая  НДС 18%)  

01.06.2017  

31.07.2017  

2 100 000,00  

8 

Рабочая документация (в полном объеме)  

01.07.2017  

31.08.2017  

3 400 000,00  

9 

Согласование рабочей документации с  организациями, выдавшими технические  

условия на инженерное обеспечение  объекта  

15.07.2017  

31.08.2017  

10  

Итого: 

09.11.2016  

31.08.2017  

13 900 000,00 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Л.О. Петракевич