АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-17708/22

г. Уфа

07 марта 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по  иску  

Администрации городского поселения город Благовещенск Муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании:  

- в тридцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда  безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту  от 02.08.2021 г. № 68 на приобретение жилых помещений (квартир) путем участия в  долевом строительстве многоквартирного дома в г. Благовещенск Республики  Башкортостан в рамках реализации Адресной программы Республики Башкортостан по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.03.2014 г. № 136 (5 этап)  а именно устранить  

- нарушения технологии производства работ при устройстве кровельного покрытия  происходит проникновение осадков через чердачное помещение многоквартирного дома   № 11/1 по ул. Щорса г. Благовещенск Республики Башкортостан. Имеет место неточная  «пригонка» элементов кровли, некачественное скрепление профнастила, что приводит к  образованию конденсата и проникновению осадков в чердачное помещение, с  последующим намоканием теплоизоляционного слоя и протечке в квартиры. Также в  связи с отхождением стен тамбура от несущих стен жилого дома через возникшие  трещины происходит проникновение осадков, намокание стен с отслоением штукатурки,  затопление тамбура. В связи с чем идет промерзание фасада зданий и образование  

плесени в жилых помещениях. Деформированы отмостки вокруг МКД. Вокруг сливной  трубы отсутствует уплотнение, в результате которого попадают осадки. Ограждение на  крыше закреплены ненадлежащим образом, в результате погодных условий: сильного  ветра, снежного покрова привело к их обрушению. Отверстия в стене фасада на торцевой  части МКД;  

- нарушения технологии производства работ при устройстве кровельного покрытия  происходит проникновение осадков через чердачное помещение многоквартирного дома   № 13/1 по ул. Щорса г. Благовещенск Республики Башкортостан. Имеет место неточная  «пригонка» элементов кровли, некачественное скрепление профнастила, что приводит к  образованию конденсата и проникновению осадков в чердачное помещение, с  последующим намоканием теплоизоляционного слоя и протечке в квартиры. Также в  связи с отхождением стен тамбура от несущих стен жилого дома через возникшие  трещины происходит проникновение осадков, намокание стен с отслоением штукатурки,  затопление тамбура. В связи с чем идет промерзание фасада зданий и образование  плесени в жилых помещениях. Деформированы отмостки вокруг МКД. Вокруг сливной  трубы отсутствует уплотнение, в результате которого попадают осадки. Ограждение на  крыше закреплены ненадлежащим образом, в результате погодных условий: сильного  ветра, снежного покрова привело к их обрушению. Отверстия в стене фасада на торцевой  части МКД ( по последним уточнениям).  

Третье лицо – ООО управляющая организация "КОМСТРОЙСЕРВИС" город  Благовещенск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ № 8" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязать в  тридцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда безвозмездно  устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту от 02.08.2021 г.   № 68 на приобретение жилых помещений (квартир) путем участия в долевом  строительстве многоквартирного дома в г. Благовещенск Республики Башкортостан в  рамках реализации Адресной программы Республики Башкортостан по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.03.2014 г. № 136 (5 этап)  а именно устранить:  

- нарушения технологии производства работ при устройстве кровельного покрытия.  Устранить проникновение осадков через чердачное помещение многоквартирного дома  

 № 11/1 по ул. Щорса г. Благовещенск Республики Башкортостан. Устранить неточную  «пригонку» элементов кровли, некачественное скрепление профнастила. Устранить  образование конденсата и проникновение осадков в чердачное помещение, вызывающее  намокание теплоизоляционного слоя и протечку в квартиры. Устранить отхождение стен  тамбура от несущих стен жилого дома через возникшие трещины, устранить  проникновение осадков, намокание стен с отслоением штукатурки, затопление тамбура,  вызывающие промерзание фасада зданий и образование плесени в жилых помещениях.  Устранить деформирование отмостки вокруг МКД. Уплотнить сливную трубу. Закрепить  надлежащим образом ограждение на крыше, во избежании его обрушения от погодных  условий: сильного ветра, снежного покрова. Устранить отверстия в стене фасада на  торцевой части МКД. В остальной части требований отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход 

федерального бюджета 6 000 руб. сумму государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Г. Фазлыева