Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)  

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-6541/2025

14 октября 2025 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гоголевой М.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Жерготовой В.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 17.07.2025 к обществу с ограниченной ответственностью «Байем Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании подрядчика выполнить гарантийные обязательства по договору подряда.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общества с ограниченной ответственностью «Байем Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца с даты вступления в силу решения суда устранить выявленные нарушения по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

...> по договору подряда № РТС214А220035 (Д) от 06.05.2022 года, а именно:  

1) Согласно требованию Проекта РТС214АГ190202- 05-ОВ (Листы №№ 1, 7, 8, 9 и 12) в жилых помещениях должны быть заменены стояки полотенцесушителей и отводящие трубы от полотенцесушителей, соединяемых к стоякам системы отопления.  

2) Согласно листу 12 Проекта, спускные краны в помещениях квартиры № 35 должны быть установлены между отсекающим краном (общего стояка) до первого отопительного прибора. А именно, согласно требования Узла 1 и Узла 6, указанного в листе 12 Проекта, между спускным краном и отсекающим краном (отключающего крана  

общего стояка) не должно быть отопительного прибора, т.к. согласно требованию пункта 6.3.8 СП 60.13330.2020, следует, что спускные краны должны устанавливаться во всех низших точках трубопроводов;  

3) В соответствии с 6.1.5 СП 73.13330.2016 устранить значительные отклонения от вертикали заменённых вертикальных трубопроводов системы отопления во всех помещениях квартиры № 35;  

4) Заменить старый стояк системы отопления в помещении квартиры № 35, указанного в листе 8 Проекта с обозначением ст. 18.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Байем Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины 50 000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья М.Н. Гоголева