9_1617588  

 

 Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-7663/2023

17 января 2024 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  предварительном судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью строительно-коммерческая фирма «Спецстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о возложении обязанности исполнить гарантийные обязательства по  муниципальному контракту № 027-014-21 от 25.05.2021, о взыскании денежных средств на случай  неисполнения решения суда,  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 20.11.2023 года, личность удостоверена,  копия диплома представлена,  

от ответчика – не явился, уведомлен, 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять уточнение истцом иска в части указания срока устранения недостатков – до 10  июня 2024 года.  

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма  «СПЕЦСТРОЙ» в срок до 10 июня 2024 года исполнить принятые на себя обязательства по  муниципальному контракту № 027-014-21 от 25.05.2021 и произвести все необходимые работы по  устранению выявленных недостатков на объекте в рамках гарантийных обязательств, а именно:  

устранить отсутствие всходов газонной травы (локально, по всей площади);  

устранить отсутствие USB розеток остановочных павильонов в количестве 5 единиц;  

устранить повреждение откоса газонного покрытия, отсутствие всходов (по всей площади);  устранить продольную трещину а/б покрытия велодорожки на протяженностью 10 м.п.;  

устранить отсутствие газонного покрытия в местах установки опор освещения, стоек  

дорожных знаков (по всей площади); устранить провал плиточного покрытия тротуаров (локально, по всей площади). 

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма  

«СПЕЦСТРОЙ» в срок до 10 июня 2024 года исполнить принятые на себя обязательства но  

муниципальному контракту № 027-033-20 от 08.06.2020 и произвести все необходимые работы но  

устранению выявленных недостатков на объекте в рамках гарантийных обязательств, а именно: 

устранить коррозию ограждения моста через руч. Пригородный (по всей площади);  устранить провал а/б покрытия проезда, скопление воды на участке площадью 6 м2;  устранить провал плиточного покрытия тротуара на участке площадью 5 м2;  

устранить отсутствие всходов газонных трав на участке рекультивации строительного  

городка (на всей площади); 

устранить поперечные трещины а/б покрытия примыканий протяженностью 8 м.п.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма  

«СПЕЦСТРОЙ» денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 5 000  

рублей в день за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со  

следующего дня после истечения 2- двухдневного срока со дня вступления его в законную силу;  

10 000 рублей в день в течение следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта; 30  

000 рублей в день за все последующие дни неисполнения судебного акта. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма  

«СПЕЦСТРОЙ» в федеральный бюджет 6 000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в  

полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской  

области. Копию решения направить ответчику. 

Судья О.А. Портнова