Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-3204/2023

16 августа 2023 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 августа 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 16 августа 2023 года.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Васильевой А.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Символ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Аленс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 009 975 рублей,

при участии представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности;

от ответчика: ФИО3 по доверенности; 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Символ" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аленс"  о взыскании 1 009 975 рублей по договору субподряда на выполнение работ от 04.10.2021 № 1.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для заключения мирового соглашения. 

Представитель истца заявил ходатайство о перерыве в судебном заседании.

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв. Информация о времени и месте судебного разбирательства размещена арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.

От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя ответчика.

Посовещавшись на месте, суд пришел к выводу о возможности проведения судебного заседания в отсутствие надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Символ" (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Аленс" (генподрядчик) заключен договор субподряда на выполнение работ от 04.10.2021 № 1, по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок исполнить по заданию генподрядчика своими силами и средствами, работы по очистке снесенных жилых домов от строительного мусора в городском округе «Жатай», в соответствии с технической документацией, в установленный договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В графе 2 договора стороны предусмотрели цену работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по договору составляет 1 209 975 руб. 84 коп. В цену договора включены стоимость рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги (в редакции соглашения об изменении цены контракта от 12.10.2021).

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия договора и может быть изменена только путем подписания сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных субподрядчиком работ производится по факту выполненных работ на основании:

- акта о сдаче выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- акта сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления генподрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика.

Согласно пункту 3.1. календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ – 04.10.2021, окончание работ – 15.10.2021.

В соответствии с пунктом 4.1.1. факт выполнения субподрядчиком работ и их стоимость подтверждаются актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В силу пункта 4.1.2. генподрядчик в течение десяти рабочих дней с даты предоставления субподрядчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, проверяет и, в случае отсутствия возражений, подписывает акты и справки или направляет субподрядчику мотивированный отказ.

В подтверждение выполнения работ по спорному договору представлены подписанные сторонами акт приемки выполненных работ от 14.10.2021 № 1, справка формы КС-3 от 14.10.2021 № 1, акты формы КС-2 от 14.10.2021 №№ 1, 2.

Как следует из искового заявления и не оспаривается сторонами обязательство по оплате выполненных работ произведено на сумму 200 000 руб.

На основании изложенных обстоятельств субподрядчик направил в адрес генподрядчика претензию от 20.10.2022 № 01/2022.

Претензия осталась без удовлетворения в связи, с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Ответчик отзыв по существу заявленных требований в материалы дела не представил в связи, с чем суд в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что спорные правоотношения сторон возникли из государственных контрактов, являющихся по своей правовой природе договорами подряда, и подлежащие регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ в соответствии с заданием заказчика и передача их результата заказчику.

Факт выполнения работ по договору субподряда на выполнение работ от 04.10.2021 № 1 на сумму 1 209 975 руб. 84 коп. подтверждается подписанными сторонами актом приемки выполненных работ от 14.10.2021 № 1, справкой формы КС-3 от 14.10.2021 № 1, актами формы КС-2 от 14.10.2021 №№ 1, 2.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик доказательства, опровергающие доводы истца, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. 

При таких обстоятельствах, поскольку факт выполнения работ подтверждается материалами дела, требование о взыскании 1 009 975 руб. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 23 100 руб. платежным поручением от 05.04.2023 № 3.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате госпошлины подлежат возмещению ответчиком.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия судебного акта на бумажном носителе может быть направлена им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аленс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Символ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 009 975 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 23 100 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

 

Судья

А.Б. Васильева