Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-28207/2024

25 октября 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  25 октября 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сухаревской Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сусловой В.И. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Санкт-Петербургского Государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" к обществу с ограниченной ответственностью "Сардис-Дорстрой" 

о взыскании,

при участии

от истца: ФИО1 по доверенности от 22.12.2023;

установил:

Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сардис-Дорстрой" о взыскании 5 321 890,67 руб. неустойки.

Определением суда от 27.03.2024 исковое заявление принято к производству в общем порядке искового производство, назначено предварительное судебное заседание и судебное заседание.

В судебном заседании 11.07.2024 присутствовал представитель истца.

В судебное заседание ответчик, надлежащим образом уведомленный  о времени и месте судебного разбирательства, не явился, направил в суд ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до результата рассмотрения дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Сардис-Дорстрой" банкротом.

Суд счел необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего ФИО2 (ИНН 

<

***>,  СНИЛС 

<

***>; адрес для корреспонденции        236008, г. Калининград, а/я 1635; СРО АУ     ААУ "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>; адрес СРО АУ       107031, 

<

...>).

Ходатайство о приостановлении, заявленное ООО "Сардис-Дорстрой" рассмотрено.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

По смыслу названной нормы права арбитражный суд обязан приостановить производство по делу при наличии в совокупности двух условий: если в производстве соответствующего суда находится дело, связанное с тем, которое рассматривает арбитражный суд, и если это дело имеет существенное значение для выяснения обстоятельств, устанавливаемых арбитражным судом по отношению к лицам, участвующим в настоящем деле.

Вместе с тем частью 2 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в иных предусмотренных федеральным законом случаях.

Возбуждение  производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, само по себе не является в настоящем случае основанием для приостановления производства по делу, в связи с чем ходатайство ООО «Сардис-Строй» подлежит отклонению.

Представитель истца поддержал требования.

Представитель ответчика и временного управляющего, извещенные судом по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, в судебное заседание не явились, что в силу статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в настоящем судебном заседании. 

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершив предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), рассмотрел исковое заявление по существу. 

Исследовав материалы дела, арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

Между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Дирекция, Заказчик) и ООО «САРДИС-ДОРСТРОЙ» (Подрядчик) заключен государственный контракт от 22.03.2022 № ОСТ-13 на выполнение работ по объекту «Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта во Фрунзенском районе (Лот 2)» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга (далее - Объект).

В соответствии с п. 1.1. Контракта, Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы по Объекту в соответствии с передаваемой Заказчиком утвержденной проектной документацией, Графиком выполнения работ и сдать Объект Заказчику по Акту приемки законченного объекта приемочной комиссией в установленный Контрактом срок.

Согласно п. 2.1. Контракта, сроки начала pi окончания работ по Объекту устанавливаются Графиком выполнения работ.

Согласно дополнительному соглашению от 29.04.2022 № 1-ОСТ-34 стороны по Контракту согласовали и утвердили График выполнения работ по Объекту.

По состоянию на 04.08.2023 Подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств, а именно нарушены сроки завершения работ, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению от 29.04.2022 № 1-ОСТ-34) по следующим этапам:

Малая Балканская ул., напротив д. 60 (от Бухарестской ул.)

№ 2 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 3 подготовительные работы. Срок окончания работ-22.05.2022;

№ 4 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -05.07.2022;

№ 5 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 6 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 7 наружное освещение. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 8 благоустройство. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 9 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 10 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 05.07.2022.

Белградская ул., напротив д. 32 (к пр. Славы)

№ 12 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 13 подготовительные работы. Срок окончания работ - 12.06.2022;

№ 14 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -05.07.2022;

№ 15 земляные работы. Срок окончания работ - 15.06.2022;

№ 16 дорожные работы. Срок окончания работ - 20.06.2022;

№ 17 наружное освещение. Срок окончания работ - 24.06.2022;

№ 18 дождевая канализация. Срок окончания работ-21.06.2022;

№ 19 благоустройство. Срок окончания работ - 04.07.2022;

№ 20 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 04.07.2022;

№ 21 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 05.07.2022.

Белградская ул., д. 32 (от пр. Славы)

№ 23 проектные работы. Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 24 подготовительные работы. Срок окончания работ-25.05.2022;

№ 25 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -05.07.2022;

№ 26 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022; № 27 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022; № 28 наружное освещение. Срок окончания работ - 05.07.2022; № 29 благоустройство. Срок окончания работ - 05.07.2022; № 30 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 31 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 05.07.2022.

Белградская ул., напротив д. 26 (к пр. Славы) № 33 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022; № 34 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022; № 35 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -05.07.2022;

№ 36 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 37 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 38 наружное освещение. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 39 благоустройство. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№   40   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 41 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 05.07.2022.

Белградская ул., д. 26 (от пр. Славы)

№ 43 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 44 подготовительные работы. Срок окончания работ - 06.07.2022;

№ 45 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -15.08.2022;

№ 46 земляные работы. Срок окончания работ - 12.07.2022;

№ 47 дорожные работы. Срок окончания работ - 20.07.2022;

№ 48 наружное освещение. Срок окончания работ - 31.07.2022;

№ 49 дождевая канализация. Срок окончания работ - 06.08.2022;

№ 50 благоустройство. Срок окончания работ - 14.08.2022;

№   51   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ — 15.08.2022;

№ 52 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 15.08.2022.

Белградская ул., нечетная сторона у ул. Турку (к пр. Славы)

№ 54 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 55 подготовительные работы. Срок окончания работ - 06.07.2022;

№ 56 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -15.08.2022;

№ 57 земляные работы. Срок окончания работ - 12.07.2022;

№ 58 дорожные работы. Срок окончания работ - 20.07.2022;

№ 59 наружное освещение. Срок окончания работ - 31.07.2022;

№ 60 дождевая канализация. Срок окончания работ - 06.08.2022;

№ 61 благоустройство. Срок окончания работ - 14.08.2022;

№   62   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ - 15.08.2022;

№ 63 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 15.08.2022. ФИО3 ул., напротив д. 23 (от ФИО4 ул. к ул. О. Дундича)

№ 65 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 66 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022;

№ 67 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -05.07.2022;

№ 68 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 69 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 70 наружное освещение. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 71 благоустройство. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№   72   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ - 05.07.2022;

№ 73 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 05.07.2022.

Софийская ул., напротив д. 93 (от Дунайского пр. к КАД)

№ 75 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 76 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022;

№ 77 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -03.07.2022;

№ 78 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 79 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 80 наружное освещение. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 81 благоустройство. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№   82   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 83 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 03.07.2022.

Софийская ул., д. 93 (от КАД к Дунайскому пр.)

№ 85 проектные работы (РД). Срок окончания работ -22.05.2022;

№ 86 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022;

№ 87 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -03.07.2022;

№ 88 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 89 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 90 наружное освещение. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 91 благоустройство. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№   92   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 93 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 03.07.2022.

Грузовой проезд, д. 13 (от станции метро «Обухово»)

№ 95 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 96 подготовительные работы. Срок окончания работ - 12.08.2022;

№ 97 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -15.09.2022;

№ 98 земляные работы. Срок окончания работ - 15.09.2022; № 99 дорожные работы. Срок окончания работ - 12.08.2022; № 100 наружное освещение. Срок окончания работ - 20.08.2022; № 101 благоустройство. Срок окончания работ - 14.09.2022; №   102   утилизация,   размещение   грунта   и   строительного   мусора. Срок окончания работ - 14.09.2022;

№ 103 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 15.09.2022.

Ул. Олеко Дундича, д. 10 № 105 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022; № 106 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022;

№ 107 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -03.07.2022;

№ 108 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 109 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 110 наружное освещение. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 111 дождевая канализация. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 112 благоустройство. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 113 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 114 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 03.07.2022.

Ул. Олеко Дундича, напротив д. 10

№ 116 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 117 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022;

№ 118 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -03.07.2022;

№ 119 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 120 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 121 наружное освещение. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 122 благоустройство. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 123 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 124 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 03.07.2022. Ул.

ФИО5 угол Бухарестской (остановка трамвая)

№ 126 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 127 подготовительные работы. Срок окончания работ - 20.09.2022;

№ 128 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -14.10.2022;

№ 129 земляные работы. Срок окончания работ - 25.09.2022;

№ 130 дорожные работы. Срок окончания работ- 28.09.2022;

№ 131 наружное освещение. Срок окончания работ - 30.09.2022;

№ 132 благоустройство. Срок окончания работ - 14.10.2022;

№ 133 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 14.10.2022;

№ 134 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 14.10.2022.

Малая Балканская ул., д. 4 (к ул. Димитрова)

№ 136 проектные работы. Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 137 подготовительные работы. Срок окончания работ - 20.09.2022;

№ 138 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -14.10.2022;

№ 139 земляные работы. Срок окончания работ- 25.09.2022; № 140 дорожные работы. Срок окончания работ - 28.09.2022;  № 141 наружное освещение. Срок окончания работ - 30.09.2022; № 142 благоустройство. Срок окончания работ - 14.10.2022; №   143   утилизация,   размещение   грунта  и   строительного   мусора. Срок окончания работ- 14.10.2022;

№ 144 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ- 14.10.2022.

Софийская ул., д. 9 № 146 проектные работы (РД). Срок окончания работ - 22.05.2022; № 147 подготовительные работы. Срок окончания работ - 25.05.2022; № 148 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ-03.07.2022;

№ 149 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 150 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 151 наружное освещение. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 152 благоустройство. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 153 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 154 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 03.07.2022.

Будапештская ул., д. 93 (к ул. О. Дундича)

№ 156 проектные работы (РД. Срок окончания работ - 22.05.2022;

№ 157 подготовительные работы. Срок окончания работ- 25.05.2022;

№ 158 ТСОДД на период производства работ. Срок окончания работ -03.07.2022;

№ 159 земляные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 160 дорожные работы. Срок окончания работ - 17.06.2022;

№ 161 наружное освещение. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 162 благоустройство. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 163 утилизация, размещение грунта и строительного мусора. Срок окончания работ - 03.07.2022;

№ 164 ТСОДД на период эксплуатации. Срок окончания работ - 03.07.2022.

По состоянию на 04.08.2023 просрочка исполнения обязательств по завершению работ составила по этапам: № 2 - 33, № 3 - 436, № 4 - 395, № 5 - 413, № 6 - 413, № 7 - 395, № 8 - 395, № 9 - 395, № 10 - 395, № 12 - 33, № 13 - 418, № 14 - 395, № 15 - 415, № 16 - 410, № 17 - 406, № 18 - 409, № 19 - 396, № 20 - 396, № 21 - 395, № 23 - 33, № 24 - 436, № 25 - 395, № 26 - 413, № 27 - 413, № 28 - 395, № 29 - 395, № 30 - 395, № 31 - 395, № 33 - 33, № 34 - 436, № 35 - 395, № 36 - 413, № 37 - 413, № 38 - 395, № 39 - 395, № 40 - 395, № 41 - 395, № 43 - 33, № 44 - 394, № 45 - 354, № 46 - 388, № 47 - 380, № 48 - 369, № 49 - 363, № 50 - 355, № 51 - 354, № 52 - 354, № 54 - 67, № 55 - 394, № 56 - 354, № 57 - 388, № 58 - 380, № 59 - 369, № 60 - 363, № 61 - 355, № 62 - 354, № 63 - 354, № 65 - 33, № 66 - 436, № 67 - 395, № 68 - 413, № 69 - 413, № 70 - 395, № 71 - 395, № 72 - 395, № 73 _ 395, № 75 - 67, № 76 - 436, № 77 - 397, № 78 - 413, №79-413, № 80 - 397, № 81 - 397, № 82 - 397, № 83 - 397, № 85 - 67, № 86 - 436, № 87 - 397, № 88 - 413, № 89 - 413, № 90 - 397, № 91 - 397, № 92 - 397, № 93 - 397, № 95 - 67, № 96 - 357, № 97 - 323, № 98 - 323, № 99 - 357, № 100 - 349, № Ю1 - 324, № 102 - 324, № 103 - 323, № 105 - 67, № 106 - 436, № 107 - 397, № 108- 413, № 109-413, № 110 - 397, № 111 - 397, № 112 - 397, № 113 - 397, № 114 - 397, № 116-67, № 117 - 436, № 118 - 397, № 119-413, № 120 - 413, № 121 - 397, № 122 - 397, № 123 - 397, № 124 - 397, № 126 - 67, № 127-318, № 128 - 294, № 129-313, № 130-310, № 131 - 308, № 132 - 294, № 133 - 294, № 134 - 294, № 136 - 67, № 137 - 318, № 138 - 294, № 139 - 313, № 140 - 310, № 141 _ 308, № 142 - 294, № 143 - 294, № 144 - 294, № 146 - 67, № 147 - 436, № 148 - 397, № 149 - 413, № 150 - 413, № 151 - 397, № 152 - 397, № 153 - 397, № 154 - 397, № 156 - 67, № 157 - 436, № 158 - 397, № 159 - 413, № 160-413,№ 161-397, № 162-397, № 163-397, № 164-397 календарных дней.

Поскольку Ответчик нарушил срок завершения работ, предусмотренный Графиком выполнения работ, Учреждение обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев требования, суд полагает их подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ, по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 7.1. Контракта, Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за свою деятельность по Контракту, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с п. 7.3. Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно п. 7.3.1. Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (в том числе обязательства предусмотренного пунктом 3.9.1 и 5.2.35.1 Контракта), и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за просрочку Подрядчиком исполнения Графика выполнения работ, в том числе за просрочку окончания работ по Объекту, за просрочку Подрядчиком исполнения Перечня этапов исполнения Контракта.

Факт неисполнения ответчиком обязательства, период просрочки подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами.

Проверив представленный истцом расчет неустойки за просрочку исполнения Графика выполнения работ, рассчитанной в соответствии с п. 7.3.1. Контракта по состоянию на 04.08.2023 суд, признал его верным, таким образом, требование о взыскании неустойки на сумму 5 321 890 руб. 67 коп. надлежит удовлетворить.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Каких-либо возражений относительно заявленных требований ответчик не представил.

В силу закрепленного в части 2 статьи 9 АПК РФ принципа состязательности арбитражного судопроизводства, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истец освобожден уплаты государственной пошлины и заявленные требования удовлетворены в полном объеме, государственную пошлину надлежит взыскать с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сардис-Дорстрой" в пользу Санкт-Петербургского Государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" 5 321 890,67 руб. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сардис-Дорстрой" в доход федерального бюджета 49 609 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сухаревская Т.С.