РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-19016/20-110-143

22 мая 2020 года

город Москва

Резолютивная часть решения от 28 апреля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Федерального казенного предприятия "ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ" (141142, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК БИОКОМБИНАТА, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" (129281, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ОЛОНЕЦКИЙ, ДОМ 18, КОРПУС 1, Э/ПМ/КМ/РМ 1/III/5/6, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 204 930 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательства по выполнению работ по Договору №497ст от 12.09.2018 за период с 23.11.2018 по 12.03.2019, 12 711,10 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.03.2019 по 31.01.2020

без проведения судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Федеральное казенное предприятие "ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" о взыскании 204 930 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательства по выполнению работ по Договору №497ст от 12.09.2018 за период с 23.11.2018 по 12.03.2019, 12 711,10 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.03.2019 по 31.01.2020.

Определением суда от 27.02.2020 было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

Сторонам  было предложено  представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок до 23.03.2020.

Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 13.04.2020. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не оспорил, отзыв не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Федеральным казенным предприятием «Щелковский биокомбинат» (истец, предприятие, заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Генстройэксперт» (ответчик, общество, исполнитель) был заключен договор № 497ст от 12.09.2018.

Согласно п. 1.1 договора заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной, рабочей и сметной документации по реконструкции существующих помещений части здания материально-технического склада инв. № 20-1974 для нужд ФКП «Щелковский биокомбинат», расположенных по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Биокомбината, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

Согласно 3.2 договора начало выполнения работ - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора. Срок окончания работ - в течении 50 рабочих дней с даты подписания договора (до 22.11.2018).

Стоимость работ составила 2 530 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%) (п. 4.1. договора); срок действия договора-до 31.12.2018 (п. 3.1.).

12.02.2019 стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Таким образом, просрочка выполнения работ исполнителем составила 81 день.

Руководствуясь п. 7.2 договора, заказчик начислил исполнителю неустойку в размере 204 930,00 руб. (2 530 000,00 *0,1% * 81) и заявил иную к уплате претензионным уведомлением № 26П от 19.02.2019.

В свою очередь общество, письмом за исх. № 33 от 19.02.2019 признало задолженность и приняло на себя обязательство уплатить в пользу предприятия неустойку в размере 204 930,00 руб., в течение 30 дней, начиная с 19.02.2019.

В силу ст. 309, 310, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Учитывая, что ответчик задолженность признал, но не оплатил, со дня, следующего за последним днем тридцатидневного срока (общество, письмом за исх. № 33 от 19.02.2019 признало задолженность и принял на себя обязательство уплатить в пользу предприятия неустойку в размере 204 930,00 руб., в течение 30 дней, начиная с 19.02.2019), ответчику подлежат начислению проценты по ч. 1 ст. 395 ГК РФ в размере 12 711,10 руб.

При указанных обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 169-171,229 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" в пользу Федерального казенного предприятия "ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ" 204 930 (Двести четыре тысячи девятьсот тридцать) руб. неустойки, 12 711 (Двенадцать тысяч семьсот одиннадцать) руб. 10 коп. процентов, 7 353 (Семь тысяч триста пятьдесят три) руб. возмещение расходов по госпошлине.

Решение подлежит немедленному исполнению  и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  пятнадцати  дней с даты его принятия,  а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:               А.В. Мищенко