АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-4853/2022

город  Вологда

28 июня  2022 года

 

Резолютивная часть решения  объявлена 27 июня    2022  года.

Текст решения в полном объеме изготовлен 28 июня  2022  года. 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Дегтяревой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании  материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ремстройинвест» к государственному казенному учреждению Вологодской области «Служба  единого заказчика» о внесении изменений в государственный контракт от 26.04.2021 №0830500000221000592,

при участии от ответчика – ФИО2 по доверенности от 10.01.2022, 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Ремстройинвест»  (ОГРН 

<

***>, далее – Общество)  обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к государственному казенному учреждению Вологодской области «Служба  единого заказчика» (ОГРН 

<

***>, далее – Учреждение) о внесении изменений в государственный контракт от 26.04.2021 №0830500000221000592 в части продления сроков выполнения работ  до 01.09.2022. 

Исковые требования указаны с учетом уточнения иска, которое в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  принято судом. 

В обоснование исковых требований Общество сослалось на возникновение в процессе исполнения контракта обстоятельств, которые не позволили выполнить работу в предусмотренный контрактом  срок, а также статьи 450, 451, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, представителей не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 136, 137, 156 АПК РФ в отсутствие сторон. 

В связи с отсутствием возражений сторон суд в порядке статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл основное судебное заседание в первой инстанции. 

В судебном заседании 21.06.2022  в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом объявлялся перерыв до 14 часов 00 минут 27.06.2022. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу: http://vologda.arbitr.ru. 

Представитель Учреждения в судебном заседании не возражал против внесения изменений в контракт. 

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела после перерыва, представителей не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие истца. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 11.05.2021 между истцом (Подрядчик) и ответчиком        (Заказчик)        заключен        государственный        контракт    № 0830500000221000592 на проведение капитального ремонта здания лечебного корпуса БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница» (далее - Контракт).

В пункте 3.1 Контракта указаны сроки выполнения работ: с даты заключения Договора, окончание выполнение работ: до 30 ноября 2021 года.

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 04 февраля 2022 года по делу № А13-15061/2021 внесены изменения в контракт в части сроков выполнения работ до 31.03.2022. 

Общество указало, что в процессе исполнения обязательств по контракту возникли обстоятельства, которые не позволили выполнить работу в установленный срок. Истец указывает на  выявление дополнительного объема работ, неучтенного локально-сметной документацией, которая утверждена 30.03.2022, в связи с чем  в срок завершить работы не представлялось возможным. В частности, отметило, что письмом от  04.04.2022 уведомило заказчика о невозможности выполнения работ в срок по причине сложившейся обстановки.  

В связи с тем, что Учреждение указало  на невозможность внести изменения в контракт в части продления срока выполнения работ, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Обязательства сторон в рассматриваемом случае установлены договором, правовое регулирование которого определяется главой 37 ГК РФ и Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения муниципальных нужд, осуществляются на основе муниципального контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд.

В силу пункта 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 767 ГК РФ, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ по общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Статья 451 ГК РФ устанавливает возможность изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. При этом под существенным изменением обстоятельств понимается их изменение настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Изменение договора по таким причинам допускается, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

В части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей и статьей 95 названного Закона.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Материалами дела подтверждается, что изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру и условиям оборота. Невозможность выполнения  работ в срок в связи с выявлением и   согласованием дополнительного объема работ, необходимости внесения изменений в проектную документацию не отрицается ответчиком. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (пункт 4 статьи 451 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела, расторжение контракта противоречит общественным интересам, поскольку работы являются социально значимыми.

С учетом обоснованных  обстоятельств невозможности завершения работ в срок, суд приходит к выводу   о наличии правовых оснований для удовлетворения требований истца. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ.

Досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

Ответчик возражений относительно удовлетворения исковых требований не представил.

Таким образом, исковые требования подлежит удовлетворению. 

Поскольку истец в заявлении   просил понесенные им судебные расходы по уплате государственной пошлины по итогам рассмотрения дела не распределять, соответственно, оснований отнесения на ответчика расходов истца по уплате государственной пошлины не имеется.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

внести       в    государственный       контракт       от       11.05.2021                     № 0830500000221000592 «Проведение капитального ремонта здания лечебного корпуса БУЗ «Никольская центральная районная больница», заключенный  между государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» и обществом с ограниченной ответственностью «Ремстройинвест», следующие изменения:

пункт 3.1 Контракта изложить в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: Начало: с даты заключения договора. Окончание: 01.09.2022».

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                      Е.В. Дегтярева