1692/2019-344(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-19736/2018

г. Казань

09 января 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи  Прокофьева В.В., при ведении и составлении протокола судебного заседания помощником  судьи Филипповой К.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с  ограниченной ответственностью "БРИЗ", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании ответчика устранить недостатки  выполненных работ на объекте «Жилой комплекс Казансу по ул. Комсомольской, Кировского  р-на г. Казани», а именно: устранить протекания деформационных швов примыкания к  эвакуационным выходам во всех пожарных отсеках подземной автопарковке, устранить  протечки по наружным стенам ПО3, ПО4,ПО5, Пандуса; устранить намокание потолка и  наружной утеплительной стены в электрощитовой ПО4,  

с участием: от истца – не явился, извещен, от ответчика – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 109, 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить. 

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Казань  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течении одного месяца после вступления  решения суда в законную силу выполнить следующий перечень работ на объекте «Жилой  комплекс Казансу» по ул. Комсомольской, Кировского р-на г. Казани», а именно:  

- Устройство защитных фартуков и гидроизоляции парапетов стена автопарковки  пожарных отсеков ПО 5; ПО 8 в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 п.51.23 (СП  17.13330.2011 п. 7.9) «Кровли» п.7.9;  

-Устройство воронки наружного водостока пожарного отсека П05 по чертежу проекта  ОООМПК «Альфа-СтройПроект» 13-06-10-АР-24. На чертеже лист АР24 запроектировано две  воронки водостока, в Акте КС-2также указано выполнение в количестве 2 шт.;  

-Устройство защитных фартуков и гидроизоляции парапетов стен выходов с  автопарковки и спусков в технические этажи жилых Блок-секций в соответствии с  требованиями СП 17.13330.2017 п.5.1.23 (СП 17.13330.2011 п. 7.9) «Кровли» п.7.9;  

-Устройство защитных фартуков и гидроизоляции парапета Въезда (выезда) № 1 из  автопарковки СП 17.13330.2017 п.5.1.23 (СП 17.13330.2011 п. 7.9) «Кровли» п.7.9;  

-Устранить трещины и отслоение штукатурного слоя в стенах Блок-секции БС-2;  

-Выполнить ремонт деформационных швов в местах протечек кровли в стенах и плитах  покрытия автопарковки в соответствии с требованиями СП 229.1325800.2014 п.9;  

-Выполнить ремонт деформационных швов в месте примыкания автопарковки П01;  П02 к Блок-секции БС1; БС2 в соответствии с требованиями СП 229.1325800.2014 п.9;  

-Ремонт деформационных швов кровли выполнить по узлам, разработанным  проектной организацией, с установкой в узлах ремонтных гидрошпонок и других  современных уплотнителей в соответствии с требованиями нормативных документов:  

СП 229.1325800.2014 «Железобетонные конструкции» п.9; СП 17.13330.2017 (СП 17.13330.2011) «Кровли»; 

Руководство по проектированию эксплуатируемых и «зеленых» кровель из  битумных материалов компании «Технониколь»;  

Пособия по озеленению и благоустройству эксплуатируемых крыш жилых и  общественных зданий, подземных гаражей, объектов гражданской обороны и других  сооружений» (Москомархитектура. ОАО МОСПРОЕКТ, Москва 2001 г.),  

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1, г.  Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "БРИЗ", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 130 000 руб.  расходов по судебной экспертизе, 6 000 руб. расходов по госпошлине.  

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан Обществу с  ограниченной ответственностью «Центральная аналитическая лаборатория по  энергоснабжению в строительном комплексе» на основании счета № 158 от 0211.2018г.  денежную сумму в размере 130 000 руб., перечисленную на депозитный счет Арбитражного  суда Республики Татарстан истцом по платежному поручению № 003828 от 30.07.2018г.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья В.В. Прокофьев