1189/2017-42275(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 21 февраля 2017 года 

по делу А33-26077/2016 Красноярск 

21 февраля 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Красноярский Домостроительный  Комплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) устранить дефекты,  обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта и препятствующие его  нормальной эксплуатации в срок не позднее 14 календарных дней с даты вступления в  законную силу решения суда, а именно:  

- устранить повреждения вентиляционной трубы (400*700мм.) длиной 4 м., поскольку в  результате сильного порыва ветра часть вентиляционной трубы (400*700мм.) длиной 4 м.  сорвало, конструкция крепилась к стене с помощью одного анкера;  

- восстановить целостность водосточной системы путем устранения протечек по всей  длине водосточных желобов в местах их сопряжения, выдержать уклон. Устранить  образовавшееся в результате данного нарушения разрушение бетонной отмостки;  

- устранить протечки в батареях отопления (8 шт. - коридор 1 и 2 этажей, на лестнице,  каб. 117, 106, 110,212,213);  

- устранить видимые сколы и трещины керамогранита на главном крыльце, отставание  плитки от бетонного основания;  

- устранить выявленные в некоторых кабинетах вспучиваемость, волнистость линолеума  ( № 106, 114, 117, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 214 - общей площадью 202 кв.м.).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Красноярский  Домостроительный Комплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в  пользу Государственного учреждения - отделение пенсионного фонда Российской  Федерации по Красноярскому краю (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  40 000 руб. убытков в виде расходов на досудебную экспертизу, 13 600 руб. штрафа за  некачественное выполнение работ, а также 8 144 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская