34/2019-21917(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-14096/2017

г. Хабаровск

14 февраля 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Лесниковой О.Н.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, секретарем судебного заседания ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Товарищества  собственников жилья «Войкова 8» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; место нахождения: 680021, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик - «Управление инвестиционных программ города Хабаровска»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 680000,  

<

...>)  

об устранении недостатков выполненных работ, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, Тюфекчи Муаммер,  

руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик - «Управление инвестиционных  программ города Хабаровска» в течение одного месяца со дня вступления в  законную силу решения суда:  

- Выполнить финишную стяжку площадок межэтажных лестничных  маршей в подъездах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 многоквартирного дома в  соответствии с требованиями проектной документации и строительными  нормами.  

- Выполнить заделку зазора деформационного шва в районе 4 подъезда  по всем этажам многоквартирного дома.  

- Установить внутри подъезда № 4 многоквартирного дома на площади  0,54 кв. м. (6x0,09) декоративную плитку в количестве 6 штук.  

- Заделать в подъездах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 многоквартирного дома, на  этажах с 1 по 10 этажи районе примыкания стены к лестничному маршу  провалы примыкания плинтуса.  

- Выполнить работы по примыканию плит к стене здания в 1,2,3,4,5  подъездах с 1 по 10 этажи.  

- Устранить усадку асфальта вокруг кольца канализационного  (тепловизационного) люка напротив 5 подъезда и с торца дома возле 1  подъезда с заменой кольца.  

- Устранить строительное загрязнение снаружи канализационных труб  внутри 1,2,3,4,5 подъездов с 1 по 10 этажи.  

- Привести в соответствие со СНИП пандусы дома. 

- Выполнить отделку откосов машинного (аварийного) люка на 10 этаже  в 4 подъезде.  

- Устранить недостатки по стоку жидкости на крыше дома.  - Устранить трещины и растрескивание полов на техническом этаже.  

Прекратить производство по делу в части следующих исковых  требований:  

- Окрасить в соответствии с требованиями проектной документации и  строительными нормами, в подъездах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5  многоквартирного дома стены на площади 3 779,7 кв. м;  

- Восстановить побелочно-покрасочные слои в 1,2,3,4,5 подъездах с 1  по 10 этажи с соблюдением цветовой гаммы;  

- Выполнить работы по примыканию лестничных маршей в месте  крепления к стене в 1,2,3,4,5 подъездах с 1 по 10 этажи.  

- Выполнить восстановление в местах растрескивания ступеней на  лестничных маршах.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик - «Управление инвестиционных  программ города Хабаровска» в пользу товарищества собственников жилья  «Войкова 8» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000  рублей, расходы на оплату экспертизы в размере 130 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья О.Н. Лесникова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 06.12.2017 2:14:00

Кому выдана Лесникова Ольга Николаевна