АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-5549/2019

г. Тюмень

19 июня 2019 года

Резолютивная часть решения оглашена 11 июня 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 19 июня 2019 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании исковое заявление 

акционерного общества «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 01.06.2017, место нахождения: 625023, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Инстек» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 28.10.2009, место нахождения: 603062, 

<

...>, каб. 301) 

о расторжении договоров № 0363 от 28.06.2018, № 0380 от 02.07.2018, № 0362 от 02.07.2018,

при ведении протокола помощником судьи Данильченко Т.А.

при участии представителей:

от истца: ФИО1 - на основании доверенности от 16.02.2019,

от ответчика: не явились, извещены, 

установил:

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (далее – истец, АО «УСТЭК») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Инстек» (далее – ответчик, ООО «Инстек») о расторжении договоров подряда. 

Требования истца со ссылкой на статьи 309, 310, 401, 450, 452, 701, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договорам № 0363 от 28.06.2018, № 0380 от 02.07.2018, № 0362 от 02.07.2018. В обоснование требований истец указывает, что в установленные договорами сроки ответчик к выполнению работ не приступил. Более того, после заключения указанных выше договоров в адрес АО «УСТЭК» поступило уведомление от ООО «Инстек» № 2/1207 от 12.07.2018, в котором подрядчик сообщил об отсутствии возможности своевременно приступить к выполнению работ и завершить их в установленные сроки. Ответчик просил расторгнуть договоры подряда по соглашению сторон. По мнению ответчика причины неисполнения обязательств по выполнению работ в рамках заключенных договоров подряда со стороны ООО «Инстек» не могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы и приняты во внимание, как исключающие ответственность подрядчика, у подрядчика отсутствовали объективные препятствия для выполнения работ по договорам подряда. Бездействие подрядчика является существенным нарушением с его стороны условий заключенных договоров, что влечет за собой право заказчика требовать расторжения данных договоров в судебном порядке. 

Ответчик представил отзыв на иск, в котором проси отказать истцу в удовлетворении заявленных требований. Ссылаясь на пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что заказчик воспользовался своим правом на односторонний отказ от исполнения договоров. Считает договоры расторгнутыми.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования по основаниям иска.

Ответчик явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, заслушав пояснения истца, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 28.06.2018 между АО «УСТЭК» (заказчик) и ООО «Инстек» (подрядчик) заключен договор  №0363 (далее – договор), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с проектом шифр 09-03-18 выполнить работы по реконструкции объекта «Капитальный ремонт тепловой сети от 4К23-18 до ул. Пугачева, 18а» в соответствии с техническим заданием, сводным сметным расчетом, локальными сметными расчетами и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 31 июля 2018 года. Промежуточные сроки выполнения работ указаны в графике выполнения работ (пункт 2.3 договора).

Согласно пункту 2.4 договора подрядчик обязуется завершить работы и сдать их результат, готовый к эксплуатации, в сроки, последовательности и порядке, установленные договором и графиком выполнения работ. 

Цена работ по договору составляет 3 000 436,56 рублей, в том числе НДС 18% - 457 693,71 рубль. Окончательная стоимость выполненных подрядчиком работ определяется на основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

02.07.2018 между АО «УСТЭК» (заказчик) и ООО «Инстек» (подрядчик) заключен договор  №0380 (далее – договор), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с проектом шифр 879.17 выполнить работы по реконструкции объекта «Капитальный ремонт тепловой сети от 4К9-5/5 до ул. Пархоменко, 50,52» в соответствии с техническим заданием, сводным сметным расчетом, локальными сметными расчетами и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Пунктом 2.1 договора установлены сроки выполнения работ: начало работ:02 июля 2018, окончание 06 августа 2018 года. Промежуточные сроки выполнения работ указаны в графике выполнения работ (пункт 2.3 договора).

Согласно пункту 2.4 договора подрядчик обязуется завершить работы и сдать их результат, готовый к эксплуатации, в сроки, последовательности и порядке, установленные договором и графиком выполнения работ. 

Цена работ по договору составляет 3 128 600 рублей, в том числе НДС 18% - 477 244,07 рублей. Окончательная стоимость выполненных подрядчиком работ определяется на основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

02.07.2018 между АО «УСТЭК» (заказчик) и ООО «Инстек» (подрядчик) заключен договор  №0363 (далее – договор), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии с проектом шифр 877.17 выполнить работы по «Капитальный ремонт тепловой сети от 10П1-7 до ул. 30 лет Победы, 115» в соответствии с техническим заданием, сводным сметным расчетом, локальными сметными расчетами и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Срок выполнения работ: начало работ: с момента подписания договора, окончание  -06 августа 2018. Промежуточные сроки выполнения работ указаны в графике выполнения работ (пункт 2.3 договора).

Согласно пункту 2.4 договора подрядчик обязуется завершить работы и сдать их результат, готовый к эксплуатации, в сроки, последовательности и порядке, установленные договором и графиком выполнения работ. 

Цена работ по договору составляет 2 094 690 рублей, в том числе НДС 18% - 319 528 рублей. Окончательная стоимость выполненных подрядчиком работ определяется на основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В соответствии с пунктом 12.4 договоров они могут быть расторгнуты в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению заказчика:

- если подрядчик не приступил к исполнению договора в сроки в соответствии с графиком выполнения работ и срок такой просрочки составляет более чем 5 рабочих дней;

- в случае нарушения сроков выполнения работ по графику выполнения работ на срок более 15 рабочих дней;

- в случае невыполнения подрядчиком либо лицом, привлеченным подрядчиком для выполнения  работ, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии.

Об отказе от исполнения договора заказчик направляет подрядчику уведомление, в котором указывается срок, с которого договор считается  прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, то договор считается расторгнутым с даты получения подрядчиком такого уведомления (пункт 12.6 договора). 

12.07.2018 ООО «Инстек» направил в адрес заказчика письмо, в котором  сообщило о невозможности своевременно приступить к выполнению договоров, так же подрядчик отказался от выполнения работ, просил рассмотреть вопрос о расторжении договоров по соглашению сторон.

28.08.2018 заказчик направил соглашения о расторжении договоров, подрядчиком данные соглашения получены 20.09.2018.

 Отношения сторон по заключенному сторонами договору регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Ответчик, в отзыве на исковое заявление ссылается, что договоры расторгнуты, указал, что уведомление  с предложением о расторжении договора получено заказчиком, после получения заказчиком указанного уведомления им были заключены  договоры на выполнение данных работ с иными подрядчиками. Как считает подрядчик, данное обстоятельство позволяет  сделать вывод, что заказчик воспользовался своим правом, предусмотренным статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации и отказался от исполнения договоров, поручив выполнение работ иным подрядчикам.

Пунктом 12.4 договора предусмотрено, что договор, может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению заказчика, в случае если подрядчик не приступил к исполнению договора в сроки в соответствии с графиком выполнения работ и срок такой просрочки составляет более чем 5 рабочих дней.

В соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации  изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашение сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон (абзац 2 пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 №54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»).

Согласно пункту 2 названной нормы в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Из анализа вышеизложенных правовых норм следует, что при реализации заказчиком права на односторонний отказ от исполнения договора подряда, которое влечет за собой изменение либо расторжение договора, не требуется обращения в суд, достаточно направить уведомление об отказе от исполнения договора по причине нарушения его другой стороной. 

Направление письмом от  28.08.2018 № 5814 соглашений о расторжении договоров, суд рассматривает в качестве уведомления заказчика о расторжении договоров № 0363 от 28.06.2018, № 380 от 02.07.2018, № 0362 от 02.07.2018. Направленные в адрес ответчика соглашения свидетельствуют о воле заказчика на прекращение договорных отношений. Текст сопроводительного письма и соглашений позволяют установить причины, послужившие основанием для расторжения договоров – в связи с существенным нарушений условий договоров подрядчиком. Данное письмо получено ответчиком 20.09.2018.

Следовательно, договоры № 0363 от 28.06.2018, № 380 от 02.07.2018, № 0362 от 02.07.2018 являются расторгнутыми.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении исковых требований.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья           Михалева Е.В.