4100/2023-87374(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-181/2023

г. Архангельск

10 августа 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 августа 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 10 августа 2023 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Распопина М.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Квадрат" (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>; адрес: Россия 163002, 

<

...>)  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Аркава" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: 163069, 

<

...>); федеральное автономное образовательное учреждение высшего  образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.  Ломоносова" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: 163002, 

<

...>)  

о взыскании 309 847 руб. 82 коп. (с учётом уточнения) при участии в судебном заседании представителей: не явились, извещены, 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2  (далее - истец, Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Архангельской  области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  "Квадрат" (далее - ответчик) о взыскании 50 000 руб. части неосновательного  обогащения в виде оплаты за выполненные истцом работы на шестом этаже  общежития, расположенного по адресу: 

<

...>.  

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 17.01.2023  указанное исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного  производства.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета иска, привлечены общество с ограниченной  ответственностью "Аркава", федеральное автономное образовательное учреждение  высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени  М.В. Ломоносова" (далее - Университет, САФУ).  

В связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств по делу,  суд определением от 02.03.2023 перешел к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства.  

Истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации увеличил размер заявленных исковых требований до 309 847  руб. 82 коп. Уточнение принято судом.  

Дело рассмотрено после перерыва, объявленного в судебном заседании 03  августа 2023 года.  

Истец представителя в судебное заседание не направил, ходатайствует о  рассмотрении дела без его участия. Ранее заявленные требования поддерживал.  

Ответчик представителя в судебное заседание не направил, с иском не согласен  по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему. Заявил об отсутствии  между сторонами каких-либо правоотношений и пропуске срока исковой давности.  

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил  следующие обстоятельства.  

Предприниматель по поручению ООО "Аркава" в период с января по февраль  2019 года им были выполнены отделочные работы на общую сумму 799 030 руб. 00  коп. на 6-ом этаже принадлежащего Университету объекта по адресу: 

<

...> (далее – Объект). В марте 2019 года устранялись  замечания и недостатки. Работы выполнялись в соответствии с договором оказания  услуг от 05.01.2019, который обществом "Аркава" не подписан, но скреплен печатью.  

Акт о приемке работ был направлен в адрес ООО "Аркава" 12.05.2019 и  получен последним 11.06.2019. Однако письмом от 11.06.2019 № 77 ООО "Аркава"  возвратило акт выполненных работ от 10.03.2019 Предпринимателю со ссылкой на  отсутствие договорных отношений с ним.  

Поскольку работы фактически были выполнены на Объекте, но обществом  "Аркава" не оплачены Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании долга и  процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 07.07.2021 по делу   № А05-15089/2019, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого  арбитражного апелляционного суда от 24.08.2021 требования истца удовлетворены  частично. С ООО "Аркава" в пользу предпринимателя взыскано 145 520 руб. долга,  4 665 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В  удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.  

Основанием для отказа в удовлетворении иска послужило то обстоятельство,  что согласно материалам дела, помимо ООО "Аркава", в отношении части помещений,  в которых Предпринимателем выполнялись работы, Университетом договоры на  выполнение работ были заключены с иными лицами, в том числе с ООО "Квадрат".  

Как установлено судом в решении по делу № А05-15089/2019 фактически  работы на объекте выполнялись в период с декабря 2018 года по март/апрель 2019  года (включая устранение недостатков в работах) на основании гарантийных писем  САФУ, однако договоры на их выполнение были заключены с ООО "Аркава", ООО  "ВЕГА-С", "Кронмаркет", ООО "Квадрат" уже после проведения работ.  

В частности, между Университетом и ООО "Квадрат" заключен договор  подряда № Д-816.2019 от 18.09.2019, в соответствии с которым ООО "Квадрат"  обязалось выполнить отделочные работы на шестом этаже Объекта в помещениях №  13, 14. Срок выполнения работ – в течение 15 календарных дней с момента  подписания договора (пункт 1.2 договора). В силу пункта 1.4 договора № Д-816.2019  от 18.09.2019 работы проводятся силами подрядчика, его инструментами,  

механизмами и материалами. Издержки на заготовительно-складские и транспортные  расходы подрядчик несет сам, не предъявляя их заказчику. Общая цена договора  предусмотрена в пункте 2.1 и составляет 672 691 руб. 45 коп. Объемы и виды работ по  договору Д-816.2019 от 18.09.2019 указаны в техническом задании (приложение № 1 к  договору).  

Стоимость работ по договору № Д-816.2019 от 18.09.2019 взыскана с  Университета в пользу ООО "Квадрат" решением Арбитражного суда Архангельской  области от 13.03.2020 по делу № А05-15553/2019.  

Поскольку, как полагает истец, ООО "Квадрат" получило плату за выполнение  работ в части помещений, работы в которых фактически выполнены истцом, однако с  Предпринимателем за выполненные им работы не рассчиталось, в связи с чем на его  стороне возникло неосновательное обогащение, истец обратился в суд с настоящим  иском.  

В силу статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором  срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные  строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия  для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных  законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло  имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить  последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей  1109 настоящего Кодекса.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным  актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при  рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

Как указывалось выше, спорные правоотношения ранее рассматривались в  рамках дела № А05-15089/2019 по иску Предпринимателя к ООО "Аркава" о  взыскании задолженности за фактически выполненные работы, в том числе работы об  оплате которых заявлено в настоящем деле.  

Суд отмечает, что основанием для отказа в удовлетворении заявленных  требований в полном объеме явился не тот факт, что в рамках дела № А05-15089/2019  истец не доказал факт выполнения работ в полном объеме, а то, что в последствии  договоры на выполнение спорных работ в последующем были заключены  Университетом не только с ООО "Аркава", но и с иными лицами. В том числе с  ответчиком по настоящему делу.  

Из решения по делу № А05-15089/2019 явственно следует, что на момент  выполнения работ Предпринимателем в январе - феврале 2019 года на шестом этаже  Объекта работала только бригада, привлеченная истцом.  

Решением от 07.07.2021 по делу № А05-15089/2019 установлено, что  Предприниматель, выполняя спорные работы полагал, что действует в интересах ООО  "Аркава", по поручению ФИО3.  

При этом, как установлено судом, ФИО3 во взаимоотношениях с истцом  представлял интересы не только ООО "Аркава", но и всех иных организаций,  выступавших подрядчиками во взаимоотношениях с Университетом при ремонте  помещений шестого этажа, давая соответствующие указания Предпринимателю.  

Судом при рассмотрении дела № А05-15089/2019 установлено, что переписка  между Предпринимателем и ФИО4 велась относительно всего объема работ  на 6-ом этаже, часть из которых выполнялась не ООО "Аркава", а иными  подрядчиками. При этом разделение работ в зависимость от того, какой их  организаций выполнялись соответствующие работы, ФИО3 не  производилось.  

При таких обстоятельствах суд признает доказанным факт выполнения  Предпринимателем работ на Объекте в интересах ООО "Квадрат", поскольку данное  обстоятельство установлено вступившим в законную силу решением суда.  

Вместе с тем, в исковом заявлении истец приводит следующий перечень работ,  выполненных им в помещениях № 613 и № 614: грунтовка стен, расшивка и заделка  швов ротбаном, шпаклевка стен, окраска стен, грунтовка потолка, окраска потолка,  демонтаж/монтаж обналички, ремонт замков, монтаж уголка, монтаж порожков,  затирка швов, герметизация швов откосов и обналички, устройство короба в туалете с  укладкой кафеля, окраска труб, демонтаж/монтаж плинтусов, монтаж заглушек  подоконников, крышек коробок.  

В тоже время согласно заключенному между Университетом и ООО "Квадрат"  договору подряда № Д-816.2019 от 18.09.2019, и подписанным в его исполнение актом  о приемке выполненных работ от 02.10.2019 № 1 ООО "Квадрат" выполнило, а  Университет принял работы по штукатурке поверхности потолков (900 кв.м); третьей  шпаклевке при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям  потолков, подготовленных под окраску (240 кв.м); покрытию поверхности стен  грунтовкой глубокого проникновения потолков (240 кв.м), окраске  поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенной по сборным  конструкциям потолков, подготовленным под окраску (790 кв.м), гладкая облицовка  столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее и  сухих смесей по кирпичу и бетону (59 кв.м).  

Иные работы университетом ответчику не оплачивались. Соответственно, в  рамках требований о взыскании с ответчика неосновательного обогащения истец  вправе взыскать лишь стоимость тех из выполненных Предпринимателем работ, за  которые плата ответчиком была фактически получена.  

В рассматриваемом случае это указанные в иске работы по грунтовке потолков  184 кв.м на 5520 руб., окраске потолков 102 кв.м на 8 160 руб. Всего на сумму: 13 680  руб.  

Суд отклоняет довод Предпринимателя, что поскольку истец выполнил все  работы в указанных помещениях он вправе претендовать на взыскание всей суммы  полученной ответчиком от Университета за весь объем, указанный в акте о приемке  выполненных работ от 02.10.2019 № 1, включая денежные средства фонда оплаты  труда.  

Истец не является стороной договора, заключенного между  ответчиком и Университетом, соответственно согласованное сторонами договора  условие о цене работ и ее составляющих на истца не распространяется. Истец  фактически привлечен к выполнению работ в качестве субподрядчика.  

В связи с этим сумма, фактически выплаченная ответчику Университетом в  качестве оплаты по договору, не равноценна размеру неосновательного обогащения  ответчика, полученному за счет истца.  

В рассматриваемом случае при оценке размера неосновательного обогащения  суд исходит из суммы, которую истец рассчитывал получить за каждый вид работ, при  их выполнении, заключая договор с ООО "Аркава". То обстоятельство, что договор  непосредственно между истцом и ответчиком не заключался в рассматриваемом  случае не имеет значения и не позволяет Предпринимателю произвольно увеличивать  стоимость выполненных работ.  

Суд также указывает, что объемы работ, указанные в договоре между  Университетом и ответчиком и предъявленные истцом в рамках настоящего дела не  совпадают, что также объясняет разницу в стоимости.  

Суд отмечает, что исковые требования увеличены истцом до 309 847 руб. 82  коп.  лишь после ознакомления с материалами, представленными Университетом, До  указанного момента истец исходил из собственной оценки объемов и стоимости работ.  

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только  при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если  усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от  добросовестного поведения.  

Действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не  допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного  поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной  коммерческой честности (правило эстоппель).  

Принцип эстоппеля заключается в утрате лицом права ссылаться на какие-либо  обстоятельства в рамках гражданско-правового спора, если данная позиция  существенно противоречит его предшествующему поведению, а также правилу venire  contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему  поведению).  

Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее  предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая  сторона в своих действиях разумно полагалась на них.  

В рассматриваемом случае поведение истца, выразившееся в изменении ранее  заявленной позиции относительно размера неосновательного обогащения, не  соответствует вышеназванному принципу.  

Суд также отмечает, что в первоначальном иске ответчик указывает цену за  единицу каждого вида работы не разбивая ее на составляющие, учитываемые в  программе ГРАНД-смета, как то машины и механизмы, сметная прибыль, фонд  оплаты труда, накладные расходы, налоги, из чего следует, что все указанные  составляющие уже включены в стоимость единицы работ. Локальный сметный расчет  при заключении договора с ООО "Аркава" истцом также не составлялся.  

При таких обстоятельствах суд признает необоснованным требования  истца в части включения в состав неосновательного обогащения перечисленной  Университетом ответчику суммы оплаты фонда оплаты труда.  

В тоже время, суд отклоняет довод ответчика о пропуске ответчиком срока  исковой давности.  

В силу статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права  по иску лица, право которого нарушено.  

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет  три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 АПК РФ.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено  иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или  должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим  ответчиком по иску о защите этого права.  

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий  день после календарной даты или наступления события, которыми определено его  начало (статья 191 ГК РФ).  

Согласно статье 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по  заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение  срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является  основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

Оценивая довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, суд  отмечает, что выполняя работы на Объекте истец исходил из того, что все работы  выполняются им во исполнение заключенного с ООО "Аркава" договора от  05.01.2019. О том, что проведение работ по части помещений 6-ом этаже общежития  по адресу: 

<

...> поручено другим лицам  истец не знал, что следует из решения Арбитражного суда Архангельской области от  07.07.2021 по делу № А05-15089/2019.  

Более того, тем же решением установлено, что спорные работы проводились в  январе-феврале 2019 года, в то время как договор на их выполнение между ответчиком  и Университетом заключен только 18.09.2019, когда работы на Объекте были  фактически выполнены. Соответственно в момент выполнения и сдачи работ  Предприниматель не обладал информацией о том, что работы выполняются в  интересах ответчика.  

ООО "Квадрат" привлечено к участию в деле № А05-15089/2019 в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований определением от  02.10.2020.  

Таким образом, истец до указанного момента не мог знать об участии ответчика  в выполнении спорных работ. Решение же из которого истцу стало известно о  невозможности взыскания стоимости спорных работ с ООО "Аркава" по делу  принято 07.07.2021.  

Настоящее исковое заявление поступило в суд 12.01.2023, то есть до истечения  трехлетнего срока как с 02.10.2020, когда истец мог узнать об участии ответчика в  выполнении работ, так и 07.07.2021, когда истец узнал о невозможности взыскания  спорной суммы с ООО "Аркава".  

В связи с изложенным суд признает обоснованным и подлежащим  удовлетворению требование о взыскании с ответчика в пользу истца 13 680 руб.  

неосновательного обогащения. В удовлетворении оставшейся части  требований отказывает.  

По результатам рассмотрения спора, в соответствии с частью 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по  государственной пошлине относятся на стороны пропорционально размеру  удовлетворенных требований. Недостающая часть государственной пошлины  взыскивается с них в доход федерального бюджета.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску  относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.  Недостающая ее часть взыскивается в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Квадрат" (ОГРН  

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>) 13 680 руб. неосновательного  обогащения.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Квадрат" в доход  федерального бюджета 406 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета 6791 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.В. Распопин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 5:15:00

Кому выдана Распопин Максим Владимирович