АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело №А84-576/2022

15 июля 2022 года

город Севастополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 14.07.2022.

Решение в полном объеме изготовлено 15.07.2022.

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело 

по первоначальному иску Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Краснодарский край) 

о взыскании штрафа и пени в сумме 806 904,09 рублей

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ»

к Государственному унитарному предприятию города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз»

о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 3 960 520,12 рублей

при участии в судебном заседании:

от ГУП города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз»: ФИО2 – представитель по доверенности;

от ООО «Факел-Юг»: ФИО3 – представитель по доверенности; ФИО4 – руководитель;

установил:

Государственное унитарное предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (далее - ГУП «Севастопольгаз», заказчик) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» (далее - ООО «Факел-ЮГ», исполнитель) о взыскании штрафа и пени 806 904,09 руб.

Определением от 21.03.2022 назначено предварительное судебное заседание.

11.04.2022 ответчик представил встречное исковое заявление о взыскании 3 960 520,12 руб., которое принято судом к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

Определением от 21.04.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен Департамент городского хозяйства города Севастополя.

Определением от 02.06.2022 дело назначено к судебному разбирательству.

Определением от 28.06.2022 суд отложил судебное разбирательство на 14.07.2022.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

28.12.2019 между ГУП «Севастопольгаз» и ООО «Факел-Юг» (Исполнитель) заключен контракт № 0400700017219000001 (далее - Контракт), согласно условиям которого Исполнитель обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство подводящего газопровода к жилому кварталу (земельных участков ИЖС по ул. Евгения Реброва, ул. Генерала Привалова, ул. Генерала Богдановича, ул. Генерала Рихтера, ул. Почетная) с кадастровым номером квартала: 91:04:002014, район Лабораторного шоссе, L=1700 м; Ду=100 мм»;. «Строительство подводящего газопровода к жилому кварталу РООИВ «Союз Чернобыль» Севастополя (земельных участков ИЖС по ул. А.Гущина, ул. Предместная, пер. Тюменский) L=1700 м; Ду=100 мм»; «Строительство подводящего газопровода от ГРП до с. Фронтового в рамках проектируемого газопровода для подвода газа к школе»; «Реконструкция действующей системы газоснабжения в районе м. Хрустального с подключением проектируемой котельной и «Вечного огня» скульптурной композиции «Солдат и матрос» на условиях настоящего Контракта (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы (п. 1.1. раздела 1 .Контракта).

Состав, объем работ и требования к работам определены в Техническом задании (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) к настоящему Контракту (пункт 1.2. раздела 1. Контракта).

Цена Контракта составляет 6 908 400 рублей, НДС не облагается (пункт 2.3. раздела 2. Контракта).

В соответствии с п. 3.1. контракта - обеспечение исполнения контакта предоставляется заказчику до заключения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 345 420 рублей

Согласно п. 4.1 условиям указанного Контракта Исполнитель приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта.

Пунктом 4.2 Контракта Работы должны быть закончены Исполнителем до 30.06.2020.

В соответствии с п. 5.13. Контракта, Акт о приемке выполненных работ подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Заказчиком положительных заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, и передачи Заказчику Исполнителем проектной документации в окончательном виде и разработанной рабочей документации в объеме, необходимом для обеспечения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном п. 5.3. настоящего Контракта.

Согласно п. 5.14. Контракта, в случае выявления недостатков проектной документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания итогового акта, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приемки выполненных Работ. После устранения недостатков Стороны повторно возвращаются к процедуре подписания акта.

Работы по настоящему Контракту считаются выполненными после получения в отношении результата работы по Контракту положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ и передачи Заказчику проектной и рабочей документации в полном объеме (п. 5.15 раздела 5. Контракта).

Датой надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по Контракту в целом является факт передачи Заказчику проектной и рабочей документации в полном объеме, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, подтвержденный итоговым Актом о приемке выполненных работ (без претензий) (п. 5.16 раздела 5. Контракта).

21.10.2020 и 21.05.2021 в связи с исполнением работ по контракту не в полном объеме, ГУП «Севастопольгаз» в адрес исполнителя направлены претензии № 1930 и № 546 соответственно. Претензии получены исполнителем, однако оставлены им без ответа.

Пунктом 8.20. Контракта предусмотрено, что в случае возникновения претензий относительно ненадлежащего исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту, другая сторона направляет претензию в письменной форме по почте или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении другой стороне.

В отношении всех претензий, направленных по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание стороной требований, изложенных в претензии.

30.06.2020 ООО «Факел-ЮГ» в адрес ГУП «Севастопольгаз» направлено письмо № 2020-06/23, в которым Обществом признаются не выполненными обязательства согласно условиям Контракта.

Исполнителем в адрес ГУП «Севастопольгаз» предоставлено письмо от 14.10.2020 № 2020-10/03, которым подтверждает неисполнение условий Контракта, в том числе предоставлением отчета, который не подписан должностным лицом.

Так в соответствии с п.п. б) п. 8.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих Правил): 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). В связи с чем, заказчиком начислена сумма штрафа в размере 191 370 рублей.

В соответствии с п. 13.5 Контракта, в случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна сторона письменно извещает об этом другую сторону в течении 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения.

Согласно условиям пп. б) п. 8.7 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта  не превышает 3 млн. рублей.

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) - сумма штрафа составляет 5 000 рублей.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, указанные изменения произошли у Исполнителя, которые были внесены 16 ноября 2021 года. Об изменениях ООО «Факел-ЮГ» известил ГУП «Севастопольгаз» 19 ноября 2021 года. За ненадлежащее исполнение условий Контракта Заявителем направлена Претензия об уплате штрафов и пени.

После получения положительных заключений государственной экспертизы, Исполнитель 29 декабря 2021 года, сопроводительным письмом № 262 передал Заказчику:

проектную документацию, результаты инженерных изысканий, положительные заключения государственной экспертизы по объекту: «Строительство подводящего газопровода к жилому кварталу (земельных участков ИЖС по ул. Евгения Реброва, ул. Генерала Провалова, ул. Генерала Богдановича, ул. Генерала Рихтера, ул. Почетная) с кадастровым номером квартала: 91:04:002014, район Лабораторного шоссе, L=1700 м; Ду=100 мм» и «Строительство подводящего газопровода к жилому кварталу РООИВ «Союз Чернобыль» Севастополя (земельных участков ИЖС по ул. А.Гущина, ул. Предместная, пер. Тюменский) L=1700 м; Ду-100 мм»; на бумажном носителе в 6-ти экземплярах и 2-х экземплярах з электронном виде (флеш-накопитель), согласно Акту приема-передачи документов № 1 от 29 декабря 2021 г.;

Акт выполненных работ № 54 от 29 декабря 2021 на сумму 3 827 400 рублей;

Счет на оплату № 54 от 29 декабря 2021 г в размере 3 827 400 рублей. 

При приемке по составу и объему работ заказчиком выявлены недостатки, которые отражены в промежуточном акте приема-передачи документов от 11.01.2022 и передан представителю ООО «Факел-ЮГ».

14.01.2022 в адрес ГУП «Севастопольгаз» предоставлено сопроводительное письмо с актом приема-передачи документов.

В рамках досудебного урегулирования спора ГУП «Севастопольгаз» направлена претензия об уплате штрафов и пени от 17.01.2022 № 1960, которая получена исполнителем 18.01.2022 года.

За несвоевременное исполнение условий Контракта от 28.12.2019 № 0400700017219000001 ГУП «Севастопольгаз» начислены пени в размере 593 183,21 рублей за период с 01.07.2020 по 29.12.2021. По состоянию на 01.02.2022 сумма пени исчислена заказчиком в размере 610 534,09 рублей.

26.01.2022 ООО «Факел-Юг», не согласившись с претензией, предоставило отказ об уплате пени и штрафов в добровольном порядке, что послужило основанием обращения ГУП «Севастопольгаз» в арбитражный суд.

В представленном отзыве ООО «Факел-Юг» указывает, что 11.01.2022 Исполнителем от Заказчика получены замечания в виде Промежуточного Акта приема-передачи документов от 11.01.2022 года. При этом, все замечания Заказчика касались не самой проектной документации и результатов инженерных изысканий, а относились исключительно к оформлению актов и счета на оплату.

После устранения замечаний, ООО «Факел-Юг» письмом от 14.01.2022 направило в адрес ГУП «Севастопольгаз» откорректированный акт приема-передачи документов № 1 от 14.01.2022 года, акт выполненных работ от 14.01.2022 года № 5 и Счет на оплату от 14.01.2022 года № 5, для подписания и оплаты. Не получив ответ, 21.01.2022 года Исполнителем повторно направлены вышеуказанные документы.

Поскольку ГУП «Севастопольгаз» уклонился от оплаты выполненных работ согласно выставленному счету, Исполнитель обратился в суд со встречным исковым заявлением, в котором просит взыскать с ГУП «Севастопольгаз» в пользу ООО «Факел-Юг» задолженность в размере 3 827 400 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.02.2022 по 21.04.2022 в размере 133 120,12 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.04.2022 по дату фактической оплаты.

Исследовав представленные доказательства, выслушав пояснения представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Исходя из существа заявленных требований и правовой природы отношений сторон, вытекающих из муниципального контракта контракт от 28.12.2019 № 0400700017219000001 к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о договоре подряда, главы 25 ГК РФ об ответственности за неисполнение обязательств, а также Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. 

В соответствии с абзацем первым статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

ГУП «Севастопольгаз» заявлено требование о взыскании 610 534, 09 руб. неустойки за период с 01.07.2020 по 14.01.2022, 191 370 рублей сумму штрафа за не предоставление в адрес заказчика ответов на претензии, а также 5000 рублей штрафа за несвоевременное предоставление сведений о смене юридического адреса исполнителя.

Согласно пункту 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

В силу части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Поскольку, на стороне исполнителя усматривается просрочка выполнения обязательства, что не оспаривается ООО «Факел-Юг», требования истца о взыскании неустойки заявлены правомерно.

Проверив представленный расчет неустойки, суд установил, что истцом верно определена база начисления неустойки, количество дней составляющих период просрочки, размер неустойки находится в пределах возможной к взысканию. 

При этом, истцом по первоначальному иску, при расчете нестойки, применена ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации в размере 8,5%.

Согласно пункту 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017, при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения.

По смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Следовательно, ставка рефинансирования определяется датой оплаты самой неустойки (вынесения решения о взыскании неустойки), в связи с чем, представленный ООО «Факел-Юг» расчет неустойки с применением ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, является неверным.

По состоянию на 14.07.2022 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации составляет 9,5 %. Истцом по первоначальному иску расчет неустойки произведен с применением ставки 8,5 %, то есть в меньшем размере.

Поскольку формирование исковых требований, определение размера предъявляемых ко взысканию сумм, является правом истца, исковые требования ГУП «Севастопольгаз» о взыскании с ООО «Факел-Юг» пени за просрочку выполнения работ, расчитанные с применением ставки 8,5 % подлежит удовлетворению.

Таким образом, исковые требования о взыскании пени в размере 610 534, 09 рублей являются обоснованными.

ООО «Факел-Юг» представлено ходатайство о снижении неустойки на основании положений ст. 333 ГК РФ, которое отклонено судом ввиду того, что сторонами при заключении Контракта был установлен размер ответственности, сопоставимый с размером неустойки, установленной положениями п. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указанный размер законодательно определен как соразмерный последствиям нарушения обязательства, что исключает довод о несоразмерности.

Учитывая положения закона, иных правовых актов, а также обстоятельства настоящего дела, суд находит исковые требования ГУП «Севастопольгаз» о взыскании с ООО «Факел-Юг» штрафа в сумме 191 370 руб. необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку ввиду того, что, порядок рассмотрения претензий, не входит в круг обязанностей исполнителя, непосредственно относящихся к предмету контракта, следовательно, не направление ответа на претензию не влечет за собой порождение какой-либо правовой ответственности.

19.11.2021, согласно выписке из ЕГРЮЛ, внесены изменения в адрес ООО «Факел-Юг». Судом установлено, что данная информация предоставлена заказчику 19.11.2021, в связи с чем, взыскание штрафа за несвоевременное предоставление сведений об изменении юридического адреса не подлежит удовлетворению.

При таких обстоятельствах, требование ГУП «Севастопольгаз» о взыскании с ООО «Факел-Юг» штрафов в размере 191 370 рублей и 5 000 рублей удовлетворению не подлежит.

В соответствии с пунктом 2.5 Контракта, оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

Заказчик производит оплату за выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) и выставленного Исполнителем счета на сумму, указанную в Акте сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ), но не более 50 % от стоимости работ по Контракту.

Окончательный расчет производится после получения Заказчиком положительных заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ и передачи Исполнителем Заказчику проектной документации в окончательном виде и разработанной рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного Исполнителем счета, счет-фактуры (если облагается НДС) (подпункт 2.5.4. пункта 2.5. раздела 2. Контракта).

Как установлено судом, от Заказчика на расчетный счет Исполнителя поступила оплата работ в размере 3 081 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 893760 от 15.05.2020, №22787 от 29.05.2020, № 175590 от 05.08.2020 и № 175591 от 05.08.2020 с отметками банка, что подтверждается также актом сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2019-31.03.2022.

В связи с неоплатой оставшейся суммы по контракту в размере 3 827 400 рублей ООО «Факел-Юг» в адрес ГУП «Севастопольгаз» направлена претензия от 05.03.2022 № 05/03/22.

Претензия получена ГУП «Севастопольгаз» 15.03.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 35001044650448 и уведомлением о вручении претензии, представленным в материалы дела.

В соответствии с пунктом 8.20. Контракта, в отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десять) дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной требований, изложенных в претензии.

Информация о результатах рассмотрения претензии ООО «Факел-Юг» не поступала. Доказательств погашение задолженность в сумме 3 827 400 рублей в материалы дела не представлено.

Суд критически относится к доводу ГУП «Севастопольгаз», указанному в отзыве на встречное исковое заявление, о приостановлении рассмотрения акта о приемке выполненных работ в связи с истечением срока действия банковской гарантии, поскольку предоставление банковской гарантии являлось необходимым требованием для заключения контракта, отсутствие банковской гарантии после истечения ее срока, само по себе не свидетельствует о ненадлежащем исполнении государственного контракта, в связи с чем, не может быть основанием приостановления рассмотрения акта о приемке выполненных работ.

После оставления письма от 14.01.2022 без ответа, 21.01.2022 ООО «Факел-Юг» в адрес ГУП «Севастопольгаз» письмом № 025 направлены акт приема - передачи документов № 1 от 14 января 2022 г., Акт выполненных работ № 5 от 14 января 2022 г. и Счет на оплату № 5 от 14 января 2022 г., для подписания и оплаты. Поскольку ответа от заказчика не поступило, равно как и не поступило оплаты задолженности, ООО «Факел-Юг» насчитало проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.02.2022 по 21.04.2022 и также заявило требование о взыскании процентов по день фактической оплаты долга.

В соответствии с пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон об ОСАГО).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.

Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его моратория действие моратория не распространяется на такое лицо, в отношении его самого и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не применяются.

Срок действия моратория может быть продлен по решению Правительства Российской Федерации, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

В случае продления Правительством Российской Федерации действия моратория ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в отношении его моратория, предусмотренное абзацем третьим настоящего пункта, утрачивает силу. При этом любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном абзацем третьим настоящего пункта.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется: наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве, с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году» до 1 января 2023 г. начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами, осуществляются в порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 г.

Таким образом, требование о взыскании процентов по день фактической оплаты подлежит удовлетворению в части – по 31.03.2022.

Исходя из вышеизложенного, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в части исходя из следующего расчета:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

 

с

по

дней

 

3 827 400,00 р.

05.02.2022

13.02.2022

9

8,50

3 827 400,00 × 9 × 8.5% / 365

8 021,81 р.

3 827 400,00 р.

14.02.2022

27.02.2022

14

9,50

3 827 400,00 × 14 × 9.5% / 365

13 946,42 р.

3 827 400,00 р.

28.02.2022

31.03.2022

32

20,00

3 827 400,00 × 32 × 20% / 365

67 110,58 р.

Сумма основного долга: 3 827 400,00 р.

Сумма процентов: 89 078,81 р.

 

В соответствии со статьей 168 АПК РФ при вынесении решения суд распределяет судебные расходы.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом, по первоначальным требованиям, при обращении в арбитражный суд уплачена государственная пошлина в размере 19 138 рублей исходя из цены иска 806 904,09 рублей, что подтверждается платежным поручением от 03.02.2022 № 110.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены судом частично в сумме 610 534,09 рублей, что составляет 75.66% от цены иска, суд распределяет расходы по уплате государственной пошлины в соответствующей пропорции и относит на ответчика, по первоначальным требованиям, обязанность по возмещению истцу указанных расходов в размере 14 480 рублей.

Поскольку при предъявлении встречного иска предоставлялась отсрочка по оплате государственной пошлины, то государственная пошлина подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета пропорционально, исходя из суммы удовлетворенных требований.

Поскольку встречные исковые требования были заявлены в размере 3 960 520,12 рублей, оплате подлежала госпошлина в размере 42 803 рубля. Поскольку встречные исковые требования удовлетворены частично (98,88 %), с ООО «Факел-ЮГ» в доход федерального бюджета подлежит взысканию 479 рублей госпошлины, с ГУП города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» в доход федерального бюджета подлежит взысканию 42 324 рубля госпошлины.

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» в пользу Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» пеню за несвоевременное исполнение условий контракта в размере 610 534,09 рублей, а также 14 480 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» задолженность в размере 3 827 400 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.02.2022 по 31.03.2022 в размере 89 078,81 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В результате произведенного зачета, взыскать с Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Краснодарский край) задолженность в размере 3 305 944,72 рубля.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Краснодарский край) в пользу Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) расходы на уплату государственной пошлины в размере 14 480 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Факел-ЮГ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Краснодарский край) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 479 рублей.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 42 324 рубля.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя. 

Судья                                                                                           А.С. Погребняк