АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-7115/2016

01 февраля 2018 года

г. Улан-Удэ

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670031, микрорайон 119-й, д. 62, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670013, ул. Онохойская, д. 1, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) о взыскании 1 780 419 руб. 31 коп – суммы  долга,

третье лицо  - Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Атриум»;

 

при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен, 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» о взыскании 1 780 419 руб. 31 коп. – задолженности по договорам субподряда №В-35/15 от 17.10.2015, №В-53/15 от 05.11.2015.

В обоснование исковых требований истец указал, что между ООО СК «Атриум» и ООО «Строительное управление-3» заключены договор субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2016 на сумму 16 626 852 руб. 54 коп. и договор субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2016 на сумму 7 216 817 руб. 42 коп.

ООО СК «Атриум» выполнены работы в полном объеме.

Согласно акту сверки по договору субподряда №В-35/15 задолженность ООО «Строительное управление -3» составила 831 342 руб. 63 коп. Согласно акту сверки по договору субподряда №В-53/15 задолженность ООО «Строительное управление -3» составила 949 076 руб. 68 коп. Сумма общей задолженности составила 1 780 419 руб. 31 коп.

ООО СК «Атриум» уступило истцу по договору цессии от 29.09.2016 право требования оплаты по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 и договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015.

Истец направил ответчику претензию об оплате задолженности с приложением договора цессии от 29.09.2016, однако оплаты не поступило, что и послужило основанием обращения в суд.

В качестве правового обоснования истец сослался на статьи 309, 310, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 27 января 2017 года по иску Общества с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» о взыскании 1 780 419 руб. 31 коп – суммы долга, взыскано с ответчика пользу истца 1 780 419 руб. 31 коп. - сумма долга.

Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 01 июня 2017 года решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 30 января 2017 года оставлено без изменения.

По результатам кассационного обжалования постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.09.2017 принятое арбитражным судом первой инстанции решение от 27.01.2017 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2017 по делу №А10-7115/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

При  новом  рассмотрении  дела истец  в судебное заседание не явился, считается извещенным надлежащим образом в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определения, направленные истцу заказными судебными письмами №67000816889856, 67000817905210, возвращены отделением почтовой связи за истечением срока хранения.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о начавшемся судебном процессе в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается почтовым уведомлением №67000816889870.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено о начавшемся судебном процессе в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается почтовым уведомлением №67000818908791.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена судом на официальных сайтах Арбитражного суда Республики Бурятия и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации.

Ответчик и третье лицо отзывы на исковое заявление, заявлений, ходатайств не представили.

Согласно части 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

В соответствии с договором субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 ООО СК «Атриум» (субподрядчик) принимает на себя выполнение работ по строительству наружных сетей водоотведения и сдачу инженерных сетей ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачу функционирующей инженерной системы на строительстве объекта: «Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский», в соответствии с рабочей документацией, техническим заданием (приложение №1), локальным сметным расчетом (приложение №2), графиком производства работ (приложение №3), а ООО «Строительное управление – 3» (подрядчик) обязуется принять и оплатить их результат.

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что объем и стоимость работ установлены  сметным расчетом (приложение №1).  Согласно локальному сметному расчету цена договора составляет 14 934 082 руб. 36 коп.

01 апреля 2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому стороны пришли к соглашению об аннулировании приложения №1 к договору, утверждению объема и стоимости работ на основании локального сметного расчета №1 (приложение №1 к соглашению). Согласно локальному сметному расчету к соглашению  цена договора составляет 16 626 852 руб. 54 коп.

Сроки выполнения работ в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2016г : дата начала работ 17 октября 2015, дата окончания работ 19 апреля 2016.

В соответствии с пунктом 3.3 оплата работ производится на основании следующих документов: согласованных с подрядчиком справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по форме КС-2; исполнительной документации, оформленной согласно требованиям РД 11-05-2007, РД 11-02-2006, если отсутствие исполнительной документации исключает возможность использования объекта по прямому назначению; документов удостоверяющих качество скрытых работ, использованных оборудования, материалов, конструкций, деталей и изделий, в течение 15 дней со дня предъявления к оплате счета-фактуры, в размере 95% от стоимости принятых работ.

Пунктом 3.4 предусмотрено, что окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, сдачи ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачи функционирующей инженерной системы, отраженной в п.1.1 договора, включая устранения дефектов, выявленных при приемке результата работ и окончания гарантийного срока.

Выполнение работ субподрядчиком подтверждаются актом о приемке выполненных работ от 20.10.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 20.10.2015 на сумму 1 800 232 руб. 78 коп., актом о приемке выполненных работ от 25.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 25.11.2015 на сумму 7 293 354 руб. 62 коп., актом о приемке выполненных работ от 30.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 30.11.2015 на сумму 4 415 031 руб. 36 коп., актом о приемке выполненных работ от 10.12.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 10.12.2015 на сумму 67 837 руб. 52 коп., актом о приемке выполненных работ от 25.12.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 25.12.2015 на сумму 1 357 626 руб. 08 коп., расчетом и справкой о стоимости выполненных работ от 19.04.2016 на сумму 1 692 770 руб. 18 коп., итого на сумму  16 626 852 руб. 54 коп. Акты приемки работ , справки о стоимости выполненных работ подписаны сторонами договора без замечаний.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по договору В-35/15 от 17.10.2015, подписанному ООО СК «Атриум» (субподрядчик)  и ООО «Строительное  управление 3 (подрядчик) задолженность в пользу ООО СК «Атриум» по состоянию на 11.07.2016г составляет 831 342 руб. 63 коп.

Между тем, в силу пункта 3.3 и 3.4 договора следует, что окончательный расчет (5% от стоимости выполненных работ) производится в течение 30 календарных дней после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, сдачи ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачи функционирующей инженерной системы, отраженной в п.1.1 договора, включая устранения дефектов, выявленных при приемке результата работ и окончания гарантийного срока

Согласно пункту 6.1 договора, гарантия на выполнение работы составляет 60 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Субподрядчик отвечает за любые недостатки, выявленные в течение гарантийного срока (явные и скрытые), наличие которых устанавливается актом подрядчика и субподрядчика или заключением эксперта.

С учетом того, что работы сданы ответчику 25.12.2015, гарантийный срок (60 месяцев) на объект истекает в 2020 году.

Следовательно, исходя из смысла пунктов 3.3, 3.4, 6.1 договора №В-35/15 от 17.10.2015, срок для окончательного расчета в размере 5% от стоимости работ в размере 831 342 руб. 63 коп (16 626 852 руб. 54 коп х 5%) не наступил.

В соответствии с договором субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 ООО СК «Атриум» (субподрядчик) принимает на себя выполнение работ по строительно-монтажным работам по КНС1, КНС2 на строительстве объекта: «Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский», в соответствии с рабочей документацией и локальным сметным расчетом (приложение №1), графиком производства работ (приложение №2), а ООО «Строительное управление – 3» (подрядчик) обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно пункту 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2016г объем и стоимость работ определяются на основании локальных сметных расчетов №1 (приложение №1 к соглашению) и №2 (приложение 2 к соглашению) и составляет 7 216 817 руб. 19 коп, в том числе по локальному сметному расчету № 1 - 2 386 134 руб, 72 коп , по локальному сметному  расчету № 2 -  4 830 682 руб 47 коп.

Дата начала работ 05 ноября 2015, дата окончания работ 06 апреля 2016.

В соответствии с пунктом 3.3 оплата работ производится на основании следующих документов: согласованных с подрядчиком справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по форме КС-2; исполнительной документации, оформленной согласно требованиям РД 11-05-2007, РД 11-02-2006, если отсутствие исполнительной документации исключает возможность использования объекта по прямому назначению; документов удостоверяющих качество скрытых работ, использованных оборудования, материалов, конструкций, деталей и изделий, в течение 15 дней со дня предъявления к оплате счета-фактуры, в размере 95% от стоимости принятых работ.

Пунктом 3.4 предусмотрено, что окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, сдача инженерных сетей ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачи функционирующей инженерной системы, отраженной в п.1.1 договора, включая устранения дефектов, выявленных при приемке результата работ и окончания гарантийного срока.

Выполнение работ субподрядчиком подтверждаются актом о приемке выполненных работ №1 от 23.12.2015 на сумму 2 142 601 руб. 52 коп., актом о приемке выполненных работ №2 от 23.12.2015 на сумму 4 380 010 руб. 14 коп., справкой о стоимости выполненных работ от 23.12.2015 на сумму 6 522 611 руб. 66 коп, расчетом и справкой о стоимости выполненных работ от 06.04.2016 на сумму 595 750 руб. 14 коп., итого на  сумму 7 118 361 руб. 80 коп.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по договору В-53/15 от 05.11.2015, подписанному ООО СК «Артиум» (субподрядчик) и ООО «Строительное  управление 3» (подрядчик) задолженность в пользу ООО СК «Атриум» по состоянию на 11.07.2016г составляет 949 076 руб. 68 коп.

Между тем, в силу пункта 3.3 и 3.4 договора следует, что окончательный расчет (5% от стоимости выполненных работ) производится в течение 30 календарных дней после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, сдачи ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачи функционирующей инженерной системы, отраженной в п.1.1 договора, включая устранения дефектов, выявленных при приемке результата работ и окончания гарантийного срока.

Кроме этого, пунктом 3.5 договора предусмотрено, что в случае выявления недостатков, указанных в п.6.1 до момента оплаты субподрядчику работ по подписанным формам КС-2, КС-3, подрядчик вправе удерживать причитающуюся сумму субподрядчика до устранения им выявленных недостатков.

Согласно пункту 6.1 договора, гарантия на выполнение работы составляет 60 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Субподрядчик отвечает за любые недостатки, выявленные в течение гарантийного срока (явные и скрытые), наличие которых устанавливается актом подрядчика и субподрядчика или заключением эксперта.

С учетом того, что работы сданы ответчику 23.12.2015, гарантийный срок (60 месяцев) на объект истекает в 2020 году.

Из материалов дела следует, что  работы по актам о приемке выполненных работ №1 от 23.12.2015 и №2 от 23.12.2015 приняты с замечаниями о не выполнении врезки в КНС-1, не выполнении отмостки павильонов КНС-1 и КНС-2,

Как следует из распоряжения Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора №66-Р3 от 31.12.2015 и заключения №66-1-16/2015 от 31.12.2015 построенный объект капитального строительства «Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский», расположенный по адресу Республика Бурятия, Иволгинский  район, г.Улан-Удэ, соответствует  требованиям ФЗ «Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г, проектной документации.

Таким образом, суд  приходит к выводу  о  том, что недостатки работ  на  31.12.2015г  субподрядчиком  были  устранены.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Актом сверки  взаимных  расчетов  на  11.07.2016г  ответчиком  подтверждена  задолженность в сумме  949 076 руб 68 коп.

Кроме  того, расчет  стоимости  работ  по выполнению   отмостки ответчиком  не представлен, также  не  представлено  доказательств того, что  стоимость  данных  работ  превышает 5 %  от  стоимости  выполненных  работ (360 840 руб 86 коп).  

Исходя из смысла пунктов 3.3, 3.4, 6.1 договора №В-53/15 от 05.11.2015, срок для окончательного расчета в размере 5% от стоимости работ в размере 360 840 руб. 86 коп (7 216 817 руб. 19 коп х 5%) не наступил.

В остальной части работы подлежат оплате.

Следовательно, ответчиком не произведена оплата за выполненные работы во исполнение пункта 3.3 договора в размере 588 235 руб. 82 коп. из расчета 949 076 руб. 68 коп за минусом 360 840 руб. 86 коп (5% от стоимости работ).

Ответчиком доказательств оплаты задолженности в размере 588 235 руб. 82 коп. не представлено.

Согласно договору цессии, уступки права требования оплаты за выполненные работы от 29.09.2016 ООО СК «Атриум» (цедент) уступило ООО «Байкальские информационные сети» (цессионарий) право требования оплаты за выполненные работы с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление – 3», ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/032301001 (должник) по договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015г в сумме 949 076 руб. 68 коп.,  по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 г. в сумме  831 342 руб. 63 коп.

Существенные условия об уступаемом обязательстве в договоре цессии от 29.09.2016г согласованы.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Письмом, врученным ответчику 28.10.2016, ответчик был извещен о состоявшемся переходе права требования по оплате задолженности по договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 г., по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 г. с требованием оплаты задолженности.

Материалами дела задолженность ответчика подтверждена, доказательств оплаты за выполненные работы не представлено.

На основании статей 309, 310, 382, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации   требование истца о взыскании задолженности обоснованно и подлежит удовлетворению в  сумме 588 235 руб. 82 коп.

В остальной части требование отклоняется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины суд относит на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И Л:

Иск  удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 588 235 руб 82 коп  - сумму долга;

в доход федерального бюджета 10 177 руб 64  коп -  государственную пошлину.

В удовлетворении иска в остальной части  отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-3» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 4 017 руб 60 коп -  расходы  по уплате  государственной пошлины;

в доход федерального бюджета 20 626 руб 36 коп -  государственную пошлину.

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

 

Судья                                                                                                  Л.Ф. Салимзянова