АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А19-7478/2018

24 октября  2018 года

г. Иркутск

           Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2018 года. Полный текст решения изготовлен 24 октября 2018 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСИНСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Осинский р-н, с. Оса)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТАЛЬСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрирован по адресу: г. Иркутск)

третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ» ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

об устранении недостатков,

при участии  в заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности; 

от ответчика: ФИО3 по доверенности;

от третьего лица: ФИО4 по доверенности;

установил:

иск заявлен об обязании ответчика в срок до 30.06.2018 безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в здании и на территории детского сада на 220 мест с овощехранилищем, расположенных по адресу: с. Оса, Осинского района Иркутской области, ул. Комарова, 15 "А", а именно: 

1. Произвести ремонт асфальтового покрытия по периметру здания;

2. В угловых группах детского сада произвести ремонт витражей;

3. Приклеить отделочные платы (кафель) в помещениях пищеблока, прачечной, туалете группы "Светлячок";

4. Установить систему водоочистки;

5. Утеплить водопроводную сеть от скважины до котельной протяженностью 25 метров;

6. Выровнять металлическое ограждение станции первого подъема вместе прохождения теплосети;

7. Вокруг здания станции второго подъема воды уплотнить грунт, произвести отмостку;

8. Вокруг здания станции второго подъема воды необходимо утеплить трубопроводы;

9. Выполнить гидроизоляцию стыков стен и фундамента в помещении овощехранилища.

Впоследствии истец в порядке ст. 49 АКП РФ уточнил исковые требования, определив их в следующем виде: обязать ответчика в срок до 01.08.2019 безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в здании и на территории детского сада на 220 мест с овощехранилищем, расположенном по адресу: с. Оса, Осинского района Иркутской области, ул. Комарова, 15 "А", а именно:

1. в угловых групповых помещениях здания детского сада произвести ремонт витражей;  

2. восстановить отделку стен из керамической плитки на плиточном клее в помещениях пищеблока, прачечной, туалета группы "Светлячок";

3. водостоки с кровли здания в местах примыкания к парапетам выполнить в соответствии с проектом МК № 4 "а" (7373)-2010. Исключить затекание воды с фартуков парапетов на витражи групповых помещений;

4. уплотнить грунты обратной засыпки пазух котлована здания детского сада, насосной станции, овощехранилища, траншеи тепловой сети, водопроводной сети от скважины до котельной протяженностью 25 метров до плотности, соответствующей требованиям проектной документации МК № 4 "а" (7373)-2010. Исключить попадание поверхностных вод в помещения подвала детского сада, овощехранилища, насосной станции;

5. выполнить работы по организации рельефа территории детского сада в соответствии с проектной документацией МК № 4 "а" (7373)-2010, а именно: обеспечить отвод поверхностных вод с территории детского сада (отмосток, газонов, дорожных покрытий и др.);

6. Люки колодцев, тепловой камеры вывести на проектные отметки, выполнив срезку или наращивание горловин в соответствии с требованиями МК № 4 "а" (7373)-2010;

7. заделать технологические отверстия, которые остались после демонтажа опалубки в здании насосной станции второго подъема воды;

8. выровнять металлические ограждения станции первого подъема воды вместе прохождения теплосети.

Уточненные требования приняты судом к производству.

Истец в судебном заседании уточненные требования поддержал.

Ответчик в судебном заседании в порядке пункта 3 статьи 49 АПК РФ исковые требования признал в полном объеме. 

Согласно указанной норме ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

В силу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Признание иска зафиксировано средствами аудиозаписи судебного заседания, а также занесено в протокол судебного заседания.

Суд считает, что признание исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому принимается судом.

Согласно положениям статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном статьей 70 АПК РФ, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Признание ответчиком исковых требований, в соответствии со ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ принято арбитражным судом в качестве факта, не требующего  дальнейшего доказывания и не проверяется в ходе дальнейшего производства по делу, в связи с чем, на основании ст. ст. 307 – 309, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, требования об обязании ответчика в срок до 01.08.2019 безвозмездно устранить недостатки выполненных работ (перечень недостатков изложен в уточнениях от 26.09.2018 № 166) подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТАЛЬСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 01.08.2019 безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в здании и на территории детского сада на 220 мест с овощехранилищем, расположенном по адресу: с. Оса, Осинского района Иркутской области, ул. Комарова, 15 "А", а именно:

1. в угловых групповых помещениях здания детского сада произвести ремонт витражей;  

2. восстановить отделку стен из керамической плитки на плиточном клее в помещениях пищеблока, прачечной, туалета группы "Светлячок";

3. водостоки с кровли здания в местах примыкания к парапетам выполнить в соответствии с проектом МК № 4 "а" (7373)-2010. Исключить затекание воды с фартуков парапетов на витражи групповых помещений;

4. уплотнить грунты обратной засыпки пазух котлована здания детского сада, насосной станции, овощехранилища, траншеи тепловой сети, водопроводной сети от скважины до котельной протяженностью 25 метров до плотности, соответствующей требованиям проектной документации МК № 4 "а" (7373)-2010. Исключить попадание поверхностных вод в помещения подвала детского сада, овощехранилища, насосной станции;

5. выполнить работы по организации рельефа территории детского сада в соответствии с проектной документацией МК № 4 "а" (7373)-2010, а именно: обеспечить отвод поверхностных вод с территории детского сада (отмосток, газонов, дорожных покрытий и др.);

6. Люки колодцев, тепловой камеры вывести на проектные отметки, выполнив срезку или наращивание горловин в соответствии с требованиями МК № 4 "а" (7373)-2010;

7. заделать технологические отверстия, которые остались после демонтажа опалубки в здании насосной станции второго подъема воды;

 8. выровнять металлические ограждения станции первого подъема воды вместе прохождения теплосети.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТАЛЬСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрирован по адресу: г. Иркутск) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья                            С. Н. Швидко