Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-122225/2023

19 мая 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  19 мая 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сухаревской  Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Сусловой В.И.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "РУБИН" (ОГРН:  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление Северная долина" (ОГРН:  

<

***>)

о  взыскании

при участии

согласно протоколу с/з

установил:

общество с ограниченной ответственностью "РУБИН" (далее – Общество, ООО «РУБИН») обратилось в суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление Северная долина" (далее – Компания, ООО «СМУ Северная долина») о взыскании 1 114 393,13 руб. долга.

Определением суда от 23.12.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в общем порядке искового производства, назначено предварительное судебное заседание и судебное заседание.

В судебном заседании 28.03.2024 присутствовал представитель ответчика, просил суд приобщить к материалам дела отзыв на исковое заявление.

В судебном заседании, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В целях соблюдения принципа состязательности и равноправия сторон, судебное заседание отложено.

В судебном заседании  представитель ответчика просил в иске отказать.

Истец не явился, извещен.

В обоснование иска указано, что 11.07.2019 между ООО «РУБИН» и ООО «СМУ Северная долина» заключен договор подряда на производство строительно-монтажных работ          № 876-СД-20-Ш-20-СМУ   на выполнение согласно п.1.1. Договора по заданию Ответчика:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генподрядчика своими силами, средствами и из своих материалов, комплекс работ по благоустройству территории корпуса 20 (жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения) при строительстве комплекса жилых зданий с объектами обслуживания населения на участке 20-1 района «Северная Долина». III этап строительства, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...> участок 20, северо-западнее пересечения с 4-м Верхним 

<

...>), далее по тексту именуется «Объект», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

При заключении Договора стоимость составляла (п.2.1.Договора): Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложения №1.1, 1.2), является твердой и составляет сумму в размере 35195 006, 67 руб. (Тридцать пять миллионов сто девяносто пять тысяч шесть рублей 67 копеек), в том числе НДС 20% - 5 865 864, 45руб., включая:

Благоустройство - 34 500 176, 67 руб. (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч сто семьдесят шесть рублей 67 копеек), в том числе НДС 20% - 5 750 029, 45 руб.,

МАФ - 694 830, 00руб. (Шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 115 805, 00 руб.

В последствии 15.12.2020 между ООО «РУБИН» и Ответчиком  заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору. Указанным Дополнительным соглашением изменены условия Договора, а именно: В соответствии с п.1.3 Договора, а также в связи с изменением объема комплекса работ по благоустройству территории корпуса 20 (жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения) при строительстве комплекса жилых зданий с объектами обслуживания населения на участке 20-1 района «Северная Долина». III этап строительства, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...> участок 20, северо-западнее пересечения с 4-м Верхним 

<

...>), ООО «РУБИН» и Ответчик по взаимному согласию решили:

1. Принять абзацы 1-3 п.2.1. Договора в новой редакции: «2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложения №1.1., 1.2), является твердой и составляет сумму в размере 32 481 757, 01 (Тридцать два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят семь рублей 01 копейка), в том числе НДС 20% - 5 413 626, 17руб., включая:

Благоустройство - 31 786 927, 01 руб. (Тридцать один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать семь рублей 01 копейка), в том числе НДС 20%;

МАФ - 694 830, 00 руб. (Шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать руб.), в том числе НДС 20%».

В соответствии с п.2.1. Договора стоимость выполненных работ составляет                                32 481 757,01 руб.

Обязательства по Договору исполнены ООО «РУБИН», результаты работ ООО «РУБИН» переданы Ответчику своевременно и в полном объеме, что подтверждают итоговый подписанный сторонами Акт сдачи-приемки работ от 03.02.2021г., предоставленный Ответчику бывшим генеральным директором ООО «РУБИН» ФИО1, а также письменное уведомление Ответчика за подписью генерального директора Ответчика (ООО «СМУ-Северная долина») ФИО2 от 07.10.2021 № 07-01/21-3250 (далее - уведомление), которое адресовано генеральному директору ООО «РУБИН» ФИО1 и временному управляющему ООО «РУБИН» ФИО3

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Ответчика не поступало в адрес бывшего генерального директора ООО «РУБИН» ФИО1 и временного управляющего ООО «РУБИН» ФИО3, а также конкурсному управляющему ООО «РУБИН» ФИО4

В уведомлении указано, что результат выполненных работ по Договору на общую сумму 32 481 757, 01 рублей (с учетом дополнительного соглашения) были приняты Ответчиком по итоговому Акту сдачи-приемки работ от 03.02.2021г.

Также Ответчик уведомлением информирует ООО «РУБИН» об установлении сальдо взаимных предоставлений по Договору путем уменьшения суммы задолженности Ответчика перед ООО «РУБИН» (сумма резерва качества) на встречную сумму задолженности ООО «РУБИН» (неотработанный аванс) в размере 1 118 252, 55 рублей.

Согласно п.5.1.Договора Ответчик ежемесячно производит резервирование денежных средств в размере 5 (пять) % стоимости принятых Ответчиком работ для формирования резерва качества. Выплата зарезервированных денежных средств производится на основании выставленного ООО «РУБИН» счета в размере 50% по истечении 6 месяцев и 50% по истечении 12 месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки, указанного в п.4.2. Договора, Акта приёмки благоустройства, подписанного в т.ч. эксплуатирующей организацией (ООО «Эксплуатация ГС-СПб»). Срок платежа - в течение 10 банковских дней с даты предоставления Подрядчиком соответствующего счета. Выплата осуществляется за вычетом суммы ущерба, причиненного Ответчику, а также расходов Ответчика на устранение недостатков в работах, обнаруженных до даты платежа (включая будущие расходы).

В настоящее время сроки, указанные в п.5.1. Договора для выплаты сумм резерва качества наступили, что подтверждает подписанный Ответчиком и ООО «РУБИН» Акт сдачи-приемки работ от 03.02.2021г., а также уведомление за подписью генерального директора Ответчика (ООО «СМУ-Северная долина») ФИО2 от 07.10.2021г.

Также в указанном уведомлении Ответчик извещает, что в результате установления сальдо взаимных предоставлений, остаток задолженности Ответчика перед ООО «РУБИН» по Договору составляет 510 122, 61 рублей.

Согласно п.4.2.2. Договора ООО «РУБИН» должен оформить и подписать у Ответчика итоговый Акт сдачи-приемки, подтверждающий выполнение всего комплекса работ и передачу Ответчику полного пакета исполнительной документации по выполненным работам, а также иной документации по соответствующему виду работ, предусмотренной нормативными документами. Как указано выше требование п.4.2.2. Договора ООО «РУБИН» выполнено в полном объеме, претензий со стороны Ответчика нет. Сроки оплаты по Договору указаны в п.п.2.1.1, 2.2., 5.1. и составляют от 5 до 15 рабочих дней

Таким образом, учитывая, что ООО «РУБИН» выполнены обязательства по Договору в полном объеме, а также наступили сроки выплаты зарезервированных денежных средств по Договору согласно уведомлению Ответчика, Ответчику надлежит осуществить окончательный расчет по Договору.

За периоды с июля 2019 г. по август 2020 г. Ответчиком (ООО «СМУ-Северная долина») на расчетные счета ООО «Рубин» в ПАО Промсвязьбанк № 40702810306003059580 ив АО "Райффайзенбанк" № 40702810803000050475 по Договору были перечислены денежные средства в размере 22 179 596,89 руб.

По условиям Договора Ответчик взял на себя обязательства осуществить платежи в размере 32 481 757, 01 (Тридцать два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят семь рублей 01 копейка), в том числе НДС 20% - 5 413 626, 17 руб.

Согласно вышеуказанной таблице Ответчик осуществил платежи не в полном объеме в размере 31 367 363,88 руб. В настоящее время задолженность Ответчика перед ООО «Рубин» составляет 1 114 393,13 рублей.

Таким образом, размер задолженности составляет 1 114 393,13 рублей с учетом размера произведенных Ответчиком  платежей по Договору.

В настоящее время обязательства, взятые на себя Ответчиком, в размере                                        1 114 393,13 руб. Ответчиком не выполнены. Ответчик не произвел оплату задолженности ООО «Рубин».

Возражая против удовлетворения иска ответчик ссылался на то, что размер взыскиваемой суммы   уменьшен в результате проведенного ответчиком сальдирования, а также указал на отсутствие оснований для оплаты заявленной в иске задолженности, так как, в нарушение условий договора, истцом не предоставлен полис (оригинал) и/или договора страхования ответственности.

Суд в иске отказал исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 5.1. Генподрядчик ежемесячно производит резервирование денежных средств в размере 5% (Пять процентов) от стоимости принятых Генподрядчиком работ для формирования резерва качества. 

Выплата зарезервированных денежных средств производится на основании выставленного Подрядчиком счета в размере 50 (Пятидесяти) % по истечение 6 (Шести) месяцев и 50 (Пятидесяти) % по истечение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки, указанного в п. 4.2. Договора, Акта приёмки благоустройства, подписанного в т.ч. эксплуатирующей организацией (ООО «Эксплуатация ГС-СПб»). Срок платежа – в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком счета.

Согласно пункту 5.1. Договора условием выплаты является предоставление Подрядчиком страхового полиса (оригинал) и/или договора страхования, надежной страховой компании РФ, подтверждающего страхование ответственности Подрядчика за недостатки результата работ, обнаружившиеся в течение гарантийного срока. 

В случае непредоставления Подрядчиком страхового полиса, Генподрядчик выплачивает зарезервированные денежные средства по истечении гарантийного срока по Договору, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком счета.

В соответствии с пунктом 7.2. Договора гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Итогового акта по пункту 4.2. Договора.

Итоговый акт подписан Сторонами 03.02.2021.

Как пояснил ответчик, а истец данный довод не опроверг,  страховой полис и/или договор страхования   не предоставлен.

Гарантийный срок, определяемый в соответствии с пунктом 7.2. Договора истекает 03.02.2025  (включительно), следовательно, основания для оплаты Резерва качества по Договору до истечения предусмотренного в нем гарантийного срока отсутствуют, обязательство по оплате у ООО «СМУ-Северная долина» не возникло. 

Учитывая изложенное, иск  не подлежит удовлетворению. Расходы по госпошлине суд относит на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУБИН" (ОГРН:  

<

***>) в доход федерального бюджета  24 144 руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сухаревская Т.С.