63/2019-113389(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-14080/2019

город Вологда

11 сентября 2019 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

внести изменения в муниципальный контракт на выполнение работ по  привязке экономически эффективной проектной документации повторного  использования для строительства детского сада (с бассейном) на 350 мест  по ул. Возрождения города Вологды от 10.04.2019 № К-29/2019, заключенный  между муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр  города Вологды» и обществом с ограниченной ответственностью  «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды»:  

 пункт 3.2. изложить в следующей редакции: окончание выполнения  работ, включая получение положительного заключения государственной  экспертизы проектной документации, положительного заключения о  достоверности определения сметной стоимости объекта капитального  строительства – до 15 августа 2019 года.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Е.В. Дегтярева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.03.2019 8:14:42

 Кому выдана Дегтярева Елена Викторовна