Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-6668/2020

«07»

октября

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРТКОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 419 171,68 рубля

установил.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРТКОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в сумме 166 658,61 рублей, штрафа в сумме 252 513,07 рублей.Дело рассмотрено в  упрощенном порядке.

Требования истца обусловлены выполнением ответчиком своих обязательств по контракту от 21.08.2017 года № 10-А/17 на поставку и выполнение работ по монтажу, наладке серверного оборудования для модернизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена составляет 2 525 130,47 рублей.

В соответствии с пунктом 2.2 контракта период  поставки, монтажа - 30 календарных дней   с момента заключения договора. 

В соответствии с пунктом 7.3.1 контракта ООО "АЛЕРТКОМ" уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ Росси на дату уплаты пени за каждый день просрочки за нарушение согласованного срока поставки и монтажа.

 В соответствии с пунктом 7.3.3 контракта ООО "АЛЕРТКОМ" несет ответственность в виде штрафа в размере 252 513,07 рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (за исключением просрочки).

В соответствии с пунктом 9.5 контракта споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области.

Из материалов дела следует, что 06.10.2017 года истец принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 21.08.20187 года № 10-А/2017 в связи с невыполнением обязательств поставщиком в установленный срок.

По настоящему делу истец просил взыскать неустойку за период с 20.09.2017 года по 30.10.2017 года в сумме 166 658,61 рублей, штраф в сумме 252 513,07 рублей.

Ответчик о судебном разбирательстве был извещен, не представил  накладных, актов, возражений.

Судом произведен перерасчет неустойки с применением ключевой ставки ЦБ России, действующей на дату вынесения решения суда. 

Требования истца подлежат удовлетворению на основании положения статьи 330 ГК РФ, положений контракта.

     Руководствуясь статьями  167-171, 229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЕРТКОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение срока поставки и монтажа по контракту от 21.08.2017 года № 10-А/17 за период с 21.09.2017 года по 30.10.2017 года в сумме 128 781 рублей (по ставке 4,25% на дату вынесения решения), штраф за невыполнение условий контракта от 21.08.2017 года № 10-А/17 в сумме 252 513,07 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 10 354 рубля.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                    О.Н.Шкутко