АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, 

<

...>

Тел/факс 

<

***>, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А06-9893/2025

г. Астрахань

26 января 2026 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2026 года Полный текст решения изготовлен 26 января 2026 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Абдуллина Р.Р.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яхъяевой Р.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (414024, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги» (105118, 

<

...>, Э/пом/ком 4/I/11, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить выявленные недостатки, а именно: по пр. ФИО1 г. Астрахани на участке дороги от д. № 3/4 до д. 3/2 – трещины продольные с раскрытием шва, по ул. 2-я Басинская г. Астрахани на всем протяжении тротуара – прорастание покрытия тротуара, в течение 1 месяца после вступления решения в законную силу.

при участии:

от Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»: не явился, извещен;

от общества с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги»: не явился, извещен;

установил:

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее – УДХТ администрации муниципального образования «Город Астрахань», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги» (далее - ООО «МИД», ответчик) об обязании устранить выявленные недостатки, а именно: по пр. ФИО1 г. Астрахани на участке дороги от д. № 3/4 до д. 3/2 – трещины продольные с раскрытием шва, по ул. 2-я Басинская г. Астрахани на всем протяжении тротуара – прорастание покрытия тротуара, в течение 1 месяца после вступления решения в законную силу.

Представители лиц, участвующих в деле, в предварительное судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Информация о назначении предварительного судебного заседания размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 26.11.2025.

На основании части 1 статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте предварительного судебного заседания.

Поскольку лицами, участвующими в деле, не заявлено возражений относительно открытия судебного заседания, суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 137 АПК РФ, завершил предварительное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания определением Арбитражного суда Астраханской области от 21.11.2025 по делу № А06-9893/2025.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 14.03.2023 между УДХТ администрации муниципального образования «Город Астрахань» (Заказчик) и ООО «МИД» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 01256000012230000050001 (далее – контракт № 01256000012230000050001), согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Басинская в г. Астрахани

1.2 (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и обеспечить выполнение работ в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и Описанием объекта закупки (Приложение № 4 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В силу пункта 1.3 контракта № 01256000012230000050001 место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 2-я Басинская в г. Астрахани.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта № 01256000012230000050001 цена Контракта определяется на основании сводного сметного расчета стоимости работ, с учетом результатов закупки (протокол № 0125600001223000005-2 от 03.03.2023, снижение 0,49 %), и составляет 28 426 706,76 рублей (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч семьсот шесть рублей 76 копеек) (с учетом НДС 20%) (Приложение № 1 к Контракту).

Согласно пункту 4.1.6 контракта № 01256000012230000050001 заказчик в случае выявления дефектов, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 5 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 9.25. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. (пункт 5.1.25 контракта № 01256000012230000050001).

14 марта 2023 года между УДХТ администрации муниципального образования «Город Астрахань» (Заказчик) и ООО «МИД» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 01256000012230000060001 (далее – контракт № 01256000012230000060001), согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и обеспечить выполнение работ в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и Описанием объекта закупки (Приложение № 4 к

Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В силу пункта 1.2 контракта № 01256000012230000060001 место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта № 01256000012230000060001 цена Контракта определяется на основании сводного сметного расчета стоимости работ, с учетом результатов закупки (протокол № 0125600001223000006-2 от 03.03.2023, снижение 0,50 %), и составляет 23 923 725,00 рублей (двадцать три миллиона девятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать пять рублей 00 копеек) (с учетом НДС 20%) (Приложение № 1 к Контракту).

Согласно пункту 4.1.6 контракта № 01256000012230000060001 Заказчик в случае выявления дефектов, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 5 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 9.25. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. (пункт 5.1.25 контракта № 01256000012230000060001).

31 октября 2023 года между ООО «МИД» (Подрядчик) и ООО ПКФ «МНК» (Субподрядчик) заключен договор субподряда № МК-06/СУБ-2023 (далее - договор), согласно условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Договором, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Договору) и обеспечить выполнение работ в соответствии со Локальным. Сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора и Описанием объекта ремонта (Приложение № 3 к Договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В силу пункта 1.2 договора место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани.

Субподрядчик уведомлен о том, что настоящий Договор заключен в рамках Муниципального контракта № 01256000012230000060001 от 14 марта 2023 года, заключенного между Подрядчиком и Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>(далее Заказчик) - ИКЗ 233301511829730150100100140014211244

В соответствии с пунктом 2 раздела II протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 18.01.2024 № 3-пр под представительством Заместителя Председателя Правительства РФ ФИО2 с 08.04.2025 по 17.04.2025 был проведен мониторинг с представителями ФКУ Упрдор «Каспий» по соблюдению подрядными организациями гарантийных обязательств по объектам 2021 -2024 гг., отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе мониторинга выявлены недостатки: по пр. ФИО1 г. Астрахани на участке дороги от д. № 3/4 до д. 3/2 - трещины продольные с раскрытием шва, по ул. 2-я Басинская г. Астрахани на всем протяжении тротуара - прорастание покрытия тротуара.

В соответствии с пунктом 4.1.6 муниципальных контрактов № № 01256000012230000060001, № 01256000012230000060001 подрядчику направлено извещение

о выявленных дефектах на гарантийных участках, что подтверждается письмом от 28.04.2025 № 30-06-01-1433 с требованием устранить выявленные замечания до 01.06.2025.

В адрес подрядчика и субподрядчика 05.05.2025 направлены уведомления № 30-06-01-1494, № 30-06-01-1495 о проведении комиссионного осмотра гарантийных объектов 14.05.2025..

Комиссией при участии истца и представителя ООО ПКФ «МНК» 14.05.2025 проведена инвентаризация гарантийных обязательств с указанием методов устранения выявленных дефектов и сроком устранения - 01.06.2025.

Гарантийные обязательства по данному Контракту ответчик не исполнил. До настоящего времени выявленные недостатки подрядчиком не устранены.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьей 703 ГК РФ, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В силу части 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 2 статьи 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

На основании пунктов 4, 6 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе

одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ (оказанных услуг) является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51).

Согласно пункту 1 статьи 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

Как следует из материалов дела, 14.03.2023 между УДХТ администрации муниципального образования «Город Астрахань» (Заказчик) и ООО «МИД» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 01256000012230000050001 (далее – контракт № 01256000012230000050001), согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Басинская в г. Астрахани

1.2 (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и обеспечить выполнение работ в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и Описанием объекта закупки (Приложение № 4 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В силу пункта 1.3 контракта № 01256000012230000050001 место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 2-я Басинская в г. Астрахани.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта № 01256000012230000050001 цена Контракта определяется на основании сводного сметного расчета стоимости работ, с учетом результатов закупки (протокол № 0125600001223000005-2 от 03.03.2023, снижение 0,49 %), и составляет 28 426 706,76 рублей (двадцать восемь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч семьсот шесть рублей 76 копеек) (с учетом НДС 20%) (Приложение № 1 к Контракту).

Согласно пункту 4.1.6 контракта № 01256000012230000050001 заказчик в случае выявления дефектов, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 5 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 9.25. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. (пункт 5.1.25 контракта № 01256000012230000050001).

14 марта 2023 года между УДХТ администрации муниципального образования «Город Астрахань» (Заказчик) и ООО «МИД» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 01256000012230000060001 (далее – контракт № 01256000012230000060001), согласно условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения

строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и обеспечить выполнение работ в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и Описанием объекта закупки (Приложение № 4 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В силу пункта 1.2 контракта № 01256000012230000060001 место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта № 01256000012230000060001 цена Контракта определяется на основании сводного сметного расчета стоимости работ, с учетом результатов закупки (протокол № 0125600001223000006-2 от 03.03.2023, снижение 0,50 %), и составляет 23 923 725,00 рублей (двадцать три миллиона девятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать пять рублей 00 копеек) (с учетом НДС 20%) (Приложение № 1 к Контракту).

Согласно пункту 4.1.6 контракта № 01256000012230000060001 Заказчик в случае выявления дефектов, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 5 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 9.25. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. (пункт 5.1.25 контракта № 01256000012230000060001).

31 октября 2023 года между ООО «МИД» (Подрядчик) и ООО ПКФ «МНК» (Субподрядчик) заключен договор субподряда № МК-06/СУБ-2023 (далее - договор), согласно условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани (далее по тексту - работы) в сроки, предусмотренные Договором, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Договору) и обеспечить выполнение работ в соответствии со Локальным. Сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора и Описанием объекта ремонта (Приложение № 3 к Договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В силу пункта 1.2 договора место выполнения работ:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по пр. ФИО1 в г. Астрахани.

Субподрядчик уведомлен о том, что настоящий Договор заключен в рамках Муниципального контракта № 01256000012230000060001 от 14 марта 2023 года, заключенного между Подрядчиком и Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>(далее Заказчик) - ИКЗ 233301511829730150100100140014211244

В соответствии с пунктом 2 раздела II протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 18.01.2024 № 3-пр под представительством Заместителя Председателя Правительства РФ ФИО2 с 08.04.2025 по 17.04.2025 был проведен мониторинг с представителями ФКУ Упрдор «Каспий» по соблюдению подрядными организациями гарантийных обязательств по объектам 2021 -2024 гг., отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе мониторинга выявлены недостатки: по пр. ФИО1 г. Астрахани на участке дороги от д. № 3/4 до д. 3/2 - трещины продольные с раскрытием шва, по ул. 2-я Басинская г. Астрахани на всем протяжении тротуара - прорастание покрытия тротуара.

В соответствии с пунктом 4.1.6 муниципальных контрактов № № 01256000012230000060001, № 01256000012230000060001 подрядчику направлено извещение о выявленных дефектах на гарантийных участках, что подтверждается письмом от 28.04.2025 № 30-06-01-1433 с требованием устранить выявленные замечания до 01.06.2025.

В адрес подрядчика и субподрядчика 05.05.2025 направлены уведомления № 30-06-01-1494, № 30-06-01-1495 о проведении комиссионного осмотра гарантийных объектов 14.05.2025..

Комиссией при участии истца и представителя ООО ПКФ «МНК» 14.05.2025 проведена инвентаризация гарантийных обязательств с указанием методов устранения выявленных дефектов и сроком устранения - 01.06.2025.

Гарантийные обязательства по данному Контракту ответчик не исполнил. До настоящего времени выявленные недостатки подрядчиком не устранены.

Материалами дела подтвержден факт обнаружения недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок, установленный пунктом 9.14 контрактов (4 года), на выполненные по контракту работы к моменту обращения истца со своим иском (14.10.2025) не истек.

До настоящего времени выявленные недостатки подрядчиком не устранены.

Доводы истца о наличии недостатков ответчиком не оспорены и в нарушение статьи 65 АПК РФ документально не опровергнуты.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Ответчик в судебные заседания своего представителя не направлял, возражений относительно предъявленного иска не заявил.

Доказательств о том, что выявленные недостатки работ по контрактам, являются неустранимыми, материалы дела не содержат.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Поскольку ответчик отказался в добровольном порядке по требованию истца устранить недостатки выполненных работ, требование истца о возложении на ответчика обязанности по исполнению обязательства в натуре признается судом правомерным.

С учетом изложенного суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Требования к резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, предусмотрены статьей 174 АПК РФ.

Из содержания названной статьи следует, что в таком судебном акте суду следует определить конкретные действия, лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд считает разумным срок устранения недостатков – 1 месяц со дня вступления решения в законную силу.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1 месяца со дня вступления в законную силу настоящего решения выполнить гарантийные обязательства по договору субподряда в виде устранения недостатков по пр. ФИО1 г. Астрахани на участке дороги от д. № 3/4 до д. 3/2 - трещин продольных с раскрытием шва, по ул. 2-я Басинская г. Астрахани на всем протяжении тротуара - прорастания покрытия тротуара.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 000 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья Р.Р. Абдуллин