Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А50-16140/2023

11 октября 2023 г.

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Е.Д. Антоновой, при  ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Соколовой Е.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ  И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"  (617520, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, УИНСКИЙ РАЙОН, УИНСКОЕ СЕЛО,  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, ОГРН: 1075951000025, Дата  присвоения ОГРН: 22.01.2007, ИНН: 5951043340)  

к Индивидуальному предпринимателю ТУМАНЯНУ ГРИШЕ  АЙКОВИЧУ (ОГРНИП: 321595800002545, ИНН: 595153202188, Дата  присвоения ОГРНИП: 19.01.2021)  

о возложении обязанности безвозмездно выполнить гарантийные  обязательства  

 Руководствуясь ст. ст. 167, 168, 171, 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать Индивидуального предпринимателя ТУМАНЯНА ГРИШУ  АЙКОВИЧА (ОГРНИП: 321595800002545, ИНН: 595153202188)  безвозмездно выполнить гарантийные обязательства в рамках  муниципального контракта от 11.06.2021 г. № 32/КС-21, а именно:  

1.Произвести ремонтно-восстановительные работы резинового покрытия  на площадке для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол и турниковой-гимнастической зонах.  

2.Произвести качественную порошковую окраску столбов ограждения  площадки для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол, в количестве 44  штук.  

3.Закрепить панели ограждения площадки для игры в волейбол, мини- футбол, баскетбол, в количестве 88 штук в соответствии с технологией  

монтажа панелей 3D ограждения, исключая слабое крепление панелей между  столбами.  

4.Восстановить технологическую разметку площадки для игры в  волейбол, мини-футбол, баскетбол в соответствии с правилами соревнования  для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол.  

5.Выполнить качественную порошковую окраску металлических  элементов и восстановить отдельные элементы спортивного оборудования:  

-каскад турников со шведской стенкой, лавкой для пресса, канатом и  кольцами подвесными-1 шт.;  

-уличный тренажер «Жим к груди»- 1 шт.; -уличный тренажёр «Эллиптический»-1 шт.; -уличный тренажёр «Гребля»-1 шт.; -уличный тренажёр «Жим к груди»-1 шт.; -уличный тренажёр «Тяга верхняя»-1 шт.; -уличный тренажёр «Жим ногами»-1 шт. 

Выполнить качественную порошковую окраску каркаса калитки,  установленной в ограждении площадки для игры в волейбол, мини-футбол,  баскетбол. Закрепить на каркасе калитки «полотно» из металлической 3 D  панели.  

Закрыть бесшовным резиновым покрытием (окрасить специальным  составом в цвет покрытия) бетонную поверхность фундамента столбов  ограждения площадки для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол, общей  площадью 1,76 квадратных метров.  

Закрыть бесшовным резиновым покрытием (окрасить специальным  составом в цвет покрытия) в местах установи спортивного оборудования  «Каскад турников со шведской стенкой, лавкой для пресса, канатом и  кольцами подвесными» бетонную поверхность фундамента общей площадью  0,24 квадратных метра.  

Выполнить работы по разделам № 3 «Освещение» и № 4  «Видеонаблюдение» локального сметного расчёта приложения\ 2 к  муниципальному контракту от 11.06.2021 г. № 32/КС-21 на выполнение  работ на объекте «Открытая универсальная спортивная площадка на  территории МБОУ «Судинская средняя общеобразовательная школа» в срок  до 01.07.2024 г.  

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ТУМАНЯНА ГРИШИ  АЙКОВИЧА (ОГРНИП: 321595800002545, ИНН: 595153202188) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 6000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

 Судья Е.Д. Антонова