Арбитражный суд Пермского края Именем Российской Федерации 

 

Резолютивная часть решения

 

18 октября 2017 г Дело № А50-17358/2016  

По делу по иску  

Товарищества собственников недвижимости «Восстания,71» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ТСН «Восстания, 71»)  

к Публичному акционерному обществу «Строительно-монтажный трест №  14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ПАО «СМТ № 14»)  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 110, 167, 170 - 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать Публичное акционерное общество «Строительно-монтажный  трест № 14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 6 месяцев с  момента вступления решения суда, в рамках настоящего дела в законную  силу, устранить строительные недостатки, допущенные при строительстве  жилого дома по адресу: 

<

...>, указанные в заключении  эксперта № 17-02-17-ЗЭ, в том числе:  

1.1.устранить дефекты просадки грунта, на осях 1 -5 по рядам А и Б, а  также ось 1 в рядах Б-Г. Работы выполнить по заранее разработанному  проекту путем засыпки непучинистым грунтом участков просадки с  послойным уплотнением. Проект разработать силами специализированной  организации, в том числе, с целью исключить причину подмывов в период  весеннего подъему УГВ, с мероприятиями по водопонижению и исключению  негативного сезонного воздействия на конструкции фундаментов.  

 1.2.устранить дефекты образования трещин, пустот и смещений в  мозаично - бетонном покрытии в осях 4-5 по рядам Д-К в лифтовых холлах с  1 по 16 этаж, а также в осях 5-6 в рядах Ж-К на 1-ом этаже возле входной  группы, путем проведения комплекса ремонтных работ включающих в себя:  

-работы по раскрытию трещин; -работы по заполнению пустот ремонтным  составом;  

-ремонт трещин и восстановление вешнего вида покрытия. Работы  выполнить по заранее разработанному проекту, с целью исключить причину  

образования трещин в дальнейшем, с мероприятиями по устройству  компенсационных швов демпфирующих смещения.  

 1.3.провести работы по полной замене цементно - песчаной стяжки пола  чердака с контролем, укладки утеплителя и разделительного слоя из  пергамента. Работы выполнить по специально разработанному проекту с  учетом требований действующих на момент проведения работ. Проект  устройства новой стяжки должен быть разработать силами  специализированной организации, в том числе, с целью исключить причину  образования трещин и других дефектов в дальнейшем в рамках нормальной  эксплуатации.  

 1.4.выполнить комплекс работ по полной замене оконных конструкций в  лифтовых холлах (по оси К, в осях 4-5) с 1 по 16 этажи и в техническом  помещении (по оси И, в осях 5-7, и оси 7 в осях И-Ж) 1-го этажа, при этом  работы выполнять по специально разработанному проекту с учетом  требований нормативно технической документации действующей на момент  выполнения работ и фактических размеров оконных проемов.  

1.5.произвести работы по полной замене мембраны кровли с  мероприятиями по просушке основания. Работы выполнить по специально  разработанному проекту, учитывающему рекомендации завода изготовителя  ПВХ-мембраны.  

1.6.произвести работы по полному демонтажу бетонной отмостки по  периметру здания, провести работы по уплотнению грунта под отмостку (с  досыпкой непучинистого грунта) и устройству новой бетонной отмостки.  Работы выполнить по специально разработанному проекту в соответствии с  действующей нормативно - технической документацией с целью исключить  причину образования трещин и других дефектов в дальнейшем в рамках  нормальной эксплуатации. Срок начала работ- май 2018г., сорок окончания  работ-конец июня 2018 г.  

1.7.Выполнить комплекс работ по замене оконных конструкций на  лестничных клетках с 1 по 16 этаж, в соответствии с экспертным  заключением № 2Э/1512-16 от 07.06.2016 г.  

 Взыскать с Публичного акционерного общества «Строительно- монтажный трест № 14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Товарищества собственников недвижимости «Восстания,71» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате госпошлины  в сумме 6 000 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), через  Арбитражный суд Пермского края.  

 Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  

на интернет-сайтах Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Антонова Е.Д.