Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

 

20 января 2019 года                                                              Дело № А56-142200/2018

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Геворкян Д.С.,

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: индивидуальный предприниматель  ФИО1 (адрес:  Россия 196191, Санкт-Петербург, ОГРНИП:  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 21.04.2016);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «ЛСТ Проджект» (адрес:  191186, Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 8, ОГРН:  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 14.02.2008);

третье лицо: 1) ФИО2

2) ФИО3

 

о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства по договору долевого участия от 30.12.2016 № 215/КЗ-10-2016, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ЛСТ Проджект», ФИО2 и  ФИО3 в размере 312 106  руб. 88 коп. за период с 01.05.2018 по 10.09.2018, почтовых расходов на направление досудебной претензии в размере 168 руб. 89 коп., почтовых расходов на направление искового заявления в размере 168 руб. 89 коп. и расходов на оплату услуг представителя в размере 6000 руб.,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ЛСТ Проджект» в удовлетворении ходатайства о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении неустойки. 

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛСТ Проджект» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 Ефимовича:

неустойку в размере 305 066  руб. 88 коп. за период с 04.05.2018 по 10.09.2018 (130 дней), с учетом положений статьи 193 ГК РФ. 

судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, в размере 9034 руб. и 27 руб. 51 коп. почтовых расходов на направление досудебной претензии ответчику, что составляет 1/6 понесенных расходов, поскольку данным почтовым отправлением ответчику направлено шесть документов, пять из которых не связано с направлением претензии по настоящему делу, а также 82 руб. 54 коп. почтовых расходов на направление искового заявления, что составляет 1/2 понесенных расходов, поскольку данным почтовым отправлением ответчику направлено два исковых заявления, одно из которых не связано с настоящим делом, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 5862 руб. – пропорционально размеру удовлетворенных требований.

 

В удовлетворении остальной части исковых требований и заявления о возмещении почтовых расходов на направление досудебной претензии и искового заявления, а также заявления о возмещении расходов на оплату услуг представителя отказать.

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                                                     Геворкян Д.С.