АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-9842/2019

г. Салехард

19 марта 2020 года

Резолютивная часть решения изготовлена 12 марта 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 марта 2020 года.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фалалеевой Ю.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства» (ИНН: 8913007850, ОГРН: 1078913000352) к обществу с ограниченной ответственностью «СОГДИАНА» (ИНН: 8913008371, ОГРН: 1078913000870) о взыскании 1 388 317 руб. 98 коп., 

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель не явился;

от ответчика – представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства» обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «СОГДИАНА»  о взыскании 1388317 руб. 98 коп., и которых: 329817 руб. 71 коп. пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.05.2018 №Ф.2018.227402, и 1058500 руб. 27 коп. штраф в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.05.2018 №Ф.2018.227402.

В ходе производства по делу ответчиком направлен отзыв на иск.

Определением суда от 07 февраля 2020 года судебное разбирательство по делу назначено на 12 марта 2020 года.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Возражений относительно рассмотрения дела по существу в отсутствие представителей не поступило.

О дате, времени и месте  проведения заседания стороны в соответствии со ст. 123 АПК РФ, уведомлены надлежащим образом.

Информация о дате, времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, проводит судебное заседание в отсутствие представителей сторон.

До начала судебного заседания ответчиком, во исполнение определения суда от 07.02.2020, представлено ходатайство о приобщении заращиваемых судом документов, которые приобщено к материалам дела.

Иных дополнений, ходатайств не поступило, возражений относительно рассмотрения спора по существу не заявлено.

Суд счел возможным рассмотреть спор по существу по имеющимся в деле документам.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд установил следующее.

29 мая 2018 между муниципальным казенным учреждением «Управление организации строительства» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СОГДИАНА» (подрядчик), по результатам аукциона в электронной форме (извещение №0190300001918000117 от 16.05.2018), был заключен муниципальный контракт №Ф.2018.227402 на устройство детских игровых комплексов, физкультурно-спортивных и спортивно-игровых площадок, в т.ч.: «Детская игровая площадка мкр.1 д.12,16,22», «Спортивно-игровая площадка мкр.9 д.16» (далее - Контракт).

Цена контракта определена на основании цены, предложенной ответчиком, как победителем электронного аукциона и составила 21 170 005 рублей 33 копейки, НДС не облагается.

В соответствии с п. 1.3. контракта, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в установленный Контрактом срок выполнить собственными и (или) силами привлеченных субподрядных организаций строительные работы (далее работы) на объекте, указанном в пункте 1.2. Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием, из своих материалов, на собственном оборудовании, строительной технике и своими инструментами. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Контракту работы на условиях, определяемых разделом 2 контракта.

Согласно п. 1.5 результатом работы по контракту, являются работы, выполненные в объеме и в соответствии с требованиями государственных норм и стандартов, условиями контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

Согласно п. 3.1. Контракта, обязательства подрядчика по выполнению работ должны быть исполнены 20.08.2018 г.

Исковые требования мотивированы тем, что фактически обязательство предусмотренное контрактом, исполнено ответчиком - 19.12.2018 г., в следующем порядке:

1. Обязательства, исполненные в срок предусмотренный условиями контракта, по состоянию на 20.08.2018 на общую сумму 10 848 232,99 рублей, что подтверждается:

- актом о приёмке выполненных работ № 1 от 03.07.2018, актом о приёмке выполненных работ № 2 от 03.07.2018, актом о приёмке выполненных работ № 3 от 03.07.2018, актом о приёмке выполненных работ № 4 от 03.07.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 03.07.2018, счет-фактурой № 20 от 03.07.2018, в объеме работ на сумму 3 196 379,46 рублей;

- актом о приёмке выполненных работ №5 от 13.07.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 13.07.2018, счет-фактурой № 23 от 13.07.2018, в объеме работ на сумму 613 639,52 рублей.

- актом о приёмке выполненных работ №6 от 23.07.2018, актом о приёмке выполненных работ №7 от 23.07.2018, актом о приёмке выполненных работ №8 от 23.07.2018, актом о приёмке выполненных работ №9 от 23.07.2018, счет-фактурой № 24 от 23.07.2018, в объеме работ на сумму 1 591 048,45 рублей.

- актом о приёмке выполненных работ №10 от 02.08.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 02.08.2018, счет-фактурой № 36 от 02.08.2018, актом о приёмке выполненных работ №11 от 02.08.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 02.08.2018, счет-фактурой № 37 от 02.08.2018, в объеме работ на сумму 1 140 869,60 рублей.

- актом о приёмке выполненных работ №12 от 10.08.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 10.08.2018, счет-фактурой № 41 от 10.08.2018, актом о приёмке выполненных работ №13 от 10.08.2018, актом о приёмке выполненных работ №14 от 10.08.2018, актом о приёмке выполненных работ №15 от 10.08.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 10.08.2018, счет-фактурой № 42 от 10.08.2018 в объеме работ на сумму 4 306 295,96 рублей.

2. Обязательства, исполненные с просрочкой исполнения обязательств и переданные заказчику 27.08.2018, на общую сумму 2 182 834,72 рублей, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ № 16 от 23.08.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 07.09.2018, счет-фактурой № 57 от 07.09.2018, актом о приёмке выполненных работ № 17 от 23.08.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 07.09.2018, счет-фактурой № 56 от 07.09.2018.

3. Обязательства, исполненные с просрочкой исполнения обязательств и переданные заказчику 12.10.2018, на общую сумму 1 054 432,70 рублей, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ № 18 от 09.10.2018, актом о приёмке выполненных работ № 19 от 09.10.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 15.10.2018, счет-фактурой №69 от 15.10.2018, актом о приёмке выполненных работ № 21 от 09.10.2018, актом о приёмке выполненных работ № 22 от 09.10.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 15.10.2018, счет-фактурой №68 от 15.10.2018.

4. Обязательства, исполненные с просрочкой исполнения обязательств и переданные заказчику 20.11.2018, на общую сумму 2 222 604,78 рублей, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ № 25 от 14.11.2018, актом о приёмке выполненных работ № 26 от 14.11.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 22.11.2018, счет-фактурой № 80 от 22.11.2018.

5. Обязательства, исполненные с просрочкой исполнения обязательств и переданные Заказчику 22.11.2018, на общую сумму 188 837,00 рублей, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ № 23 от 14.11.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 22.12.2018, счет-фактурой №81 от 22.11.2018.

6. Обязательства, исполненные с просрочкой исполнения обязательств и переданные Заказчику 19.12.2018, на общую сумму 4 655 821,07 рублей, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ № 27 от 17.12.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 14 от 19.12.2018, счет-фактурй №91 от 19.12.2018, актом о приёмке выполненных работ № 28 от 17.12.2018, актом о приёмке выполненных работ № 29 от 17.12.2018, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 15 от 19.12.2018, счет-фактурой №92 от 19.12.2018.

Пунктом 8.2.2 контракта установлено, что в случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненных Подрядчиком.

Удовлетворяя требование истца о взыскании пени в размере 329 817 рублей 71 копейки по муниципальному контракту № Ф.2018.227402 от 29.05.2018,  суд исходит из следующего.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Как установлено пунктом 2 статьи 763 ГК РФ, по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

26.06.2018 (до завершения предусмотренного Контрактом срока выполнения работ) истец в адрес ответчика направил письмо исх.№25-1-10/362 (с актом осмотра) об отставании от графика производства работ и о необходимости ускорить ход выполнения работ для своевременного исполнения обязательств по контракту. Данное письмо было получено Ответчиком вх.№ 26/1 от 26.06.2018 и оставлено без ответа.

08.08.2018 истец в адрес ответчика направил письмо исх.№25-1-10/528 о срочном принятии мер для своевременного исполнения контракта, о необходимости ускорить ход выполнения работ, а также дать пояснения о сложностях, возникающих в ходе исполнения Контракта. Данное письмо оставлено ответчиком без ответа.

21.08.2018 также в адрес ответчика было направлено уведомление исх.№ 25-1-10/566 о несоблюдении сроков исполнения обязательств по контракту. В ответ ответчик направил письмо исх. №31/08-5 от 31.08.2018 о продлении сроков выполнения работ по контракту.

Поскольку Закон №44-ФЗ не позволял изменение существенных условий контракта, в том числе продление сроков выполнения работ, сроки выполнения работ по контракту не были продлены.

Истец в адрес ответчика направлял письма исх.№25-1-10/627 от 11.09.2018 (с актом осмотра), исх.№25-1-10/670 от 28.09.2018, исх.№25-1-10/719 от 09.10.2018, исх. №25-1-10/739 от 16.10.2018 о необходимости ускорить ход выполнения работ, а также дать пояснения о сложностях, возникающих в ходе исполнения контракта.

В ответ ответчик направил письма исх.№26/09-1 от 26.09.2018, исх.№05/10 от 05.10.2018 с ориентировочными сроками окончания выполнения работ по объектам.

19.10.2018 заказчиком было направлено в адрес подрядчика письмо исх.№25-1 -10/753 о необходимости увеличения рабочей силы на объекте в связи с прогнозируемым изменением погодных условий. В ответ подрядчик направил письмо исх.№25/10-1 от 25.10.2018 об отсутствии необходимых для производства работ материалов.

23.10.2018 заказчиком направлено в адрес подрядчика письмо исх.№25-1-10/778 о предоставлении информации по поставке недостающей комплектации оборудования, также в письме Заказчик просит незамедлительно ускорить ход выполнения работ на объектах, пояснить о сложностях возникающих в ходе исполнения Контракта. В ответ подрядчик направил письмо исх.№25/10-4 от 25.10.2018 о том, что комплектующие для проведения всего комплекса работ будут доставлены в г. Губкинский к 28.10.2018.

23.10.2018 направил подрядчику письмо исх.№25-1-10/784, в котором информирует подрядчика о том, что на момент фактического срока выполнения работ, подрядчику будет предъявлена неустойка в виде пени, за просрочку исполнения обязательств по контракту. В ответ подрядчик направил письмо исх.№25/10-2 от 25.10.2018 с просьбой согласовать замену материала для производства работ.

Заказчик в адрес подрядчика направлял письмо исх.№25-1-10/805 от 29.10.2018 о необходимости ускорить ход выполнения работ, а также дать пояснения о сложностях, возникающих в ходе исполнения контракта. Данное письмо оставлено подрядчиком без ответа.

16.11.2018 в адрес ответчика истцом было направлено письмо исх.№25-1-10/916 с расчётом неустойки, за просрочку обязательств по Контракту сложившейся по состоянию на 16.11.2018. Письмо ответчиком было получено 28.11.2018 вх.№28/11-2 от 28.11.2018 и оставлено без ответа.

19.12.2018 подрядчик предоставил результат работ по контракту, 29.12.2018 контракт был расторгнут по соглашению сторон.

09.01.2019 в адрес ответчика направлено требование исх.№25-1-10/4 с требованием уплатить неустойку в виде пени за просрочку исполнения обязательств по контракту. Данное письмо получено ответчиком 10.01.2019 и оставлено без ответа.

21.01.2019 в адрес ответчика направлено требование исх.№25-1-10/53 с требованием уплатить неустойку в виде пени за просрочку исполнения обязательств по контракту в течение 10-ти календарных дней, в требовании истец уведомил ответчика, что в случае не оплаты задолженности истец начнет мероприятия по взысканию задолженности в судебном порядке. Названное требование было получено ответчиком 21.01.2019.

01.03.2019 от ответчика в адрес истца поступило гарантийное письмо исх.№01/03-1, в котором ответчик обязался произвести выплату неустойки в срок до 25.04.2019. Данное обязательство, в указанный ответчиком срок не исполнено.

В соответствии с ч. 10 правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила определения штрафа, пени), в случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Учитывая, что в настоящее время задолженность Ответчиком не погашена, доказательств обратного ответчиком не представлено, суд считает подлежащим взысканию с ответчика пени в размере 329 817 рублей 71 копейки по муниципальному контракту № Ф.2018.227402 от 29.05.2018. Доводы отзыва нельзя признать обоснованными.

Отказывая истцу в удовлетворении требования о взыскании штрафа в размере 1 058 500 рублей 71 копеек согласно п. 8.2.3 договора суд исходит из следующего. 

Обращаясь с указанным требованием, истец ссылается на п. 4.1.9. Контракта, которым предусмотрена обязанность Подрядчика обеспечить места производства работ ограждающими средствами. Согласно статье 35 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

Как указывает истец, в нарушение условий Контракта подрядчик не обеспечил места производства работ ограждающими средствами.

29.08.2018 Заказчиком направлено в адрес подрядчика письмо исх.№25-1-10/598 о повышении контроля безопасности по недопущению доступа учащихся на территорию застройки и принятии мер безопасности в период проведения работ. Письмо оставлено Подрядчиком без ответа.

09.10.2018 Истцом в адрес Ответчика было направлено письмо исх.№25-1-10/719 с требованием, обеспечить ограждающими средствами места производства работ. Данное письмо оставлено Ответчиком без ответа.

Вместе с тем, 10.10.2018 года на объекте была проведена проверка прокуратурой города Губкинского, по результатам которой в адрес Заказчика было направлено представление вх.№25-1-08/894 от 17.10.2018 об устранении нарушений федерального законодательства, в том числе зафиксированы нарушения в виде свободного доступа на объект посторонних лиц, что может привести к негативным последствиям в виде получения травм, что недопустимо. Так же был составлен акт №б/н от 17.10.2018 об отсутствии ограждающих средств на объекте, подписанный представителями Заказчика и Подрядчика.

23.10.2018 Истцом вновь было направлено письмо в адрес Ответчика исх.№25-1-10/778 (имеется в материалах дела) с требованием обеспечить ограждающими средствами места производства работ. Ответчик в ответ направил письмо исх.№25/10-4 от 25.10.2018 (имеется в материалах дела), в котором не упоминалось об установке ограждающих средств на объекте.

По состоянию на 29.10.2018 в месте производства работ не были установлены ограждающие средства. По данному нарушению составлен акт №б/н от 29.10.2018 подписанный представителями Заказчика и Подрядчика. В адрес Подрядчика направлено письмо исх. №25-1-10/805 от 29.10.2018 (имеется в материалах дела) о необходимости обеспечить ограждающими средствами место производства работ.

Согласно п. 8.2.3 муниципального контракта, за ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки  исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:

 - 3 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 000 000 руб.;

 - 2 %  цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 000 000 руб. и до 10 000 000 руб. включительно;

 - 1 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 10 000 000 руб. до 20 000 000 руб. включительно.

Размер штрафа составляет 1 058 500 руб. 27 коп. 

Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с п.4 Правил определения штрафа, пени и составляет 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Однако в рассматриваемом случае, п. 8.2.3 контакта не применим, поскольку этим же контрактом предусмотрен п. 8.2.4, согласно которому: за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере:

 - 1 000 руб. при цене контракта не более 3 000 000 руб.;

 - 5 000 руб., если цена контракта составляет от 3 000 000 руб. до 50 000 000 руб. включительно;

 Размер штрафа по указанному контракту составляет 5 000 руб. 

При применении указанного пункта как меры ответственности ответчика за ненадлежащее исполнение обязательства по контракту, суд исходит из того факта, что ни в самом контакте, ни в акте от 29.10.2018, на который ссылается истец, не указано стоимостного выражения ограждающих средств места производства работ, равно как и нет указания  на какие – либо конкретные виды,  наименования, объемы материалов, которые ответчику необходимо было  применить при  исполнении указанного обязательства по контакту. 

В рассматриваемом случае, в отсутствие соглашения сторон о стоимости выполнения  вида указанных работ по  обеспечению  ограждающих средств, применения договорной меры ответственности в соответствии с п. 8.2.3 договора не имеется.

Учитывая, что в соответствии с частью 8 статьи 34 Закона №44-ФЗ заказчик имеет право требовать от подрядчика уплаты законной неустойки в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере 5 000 рублей 00 копеек согласно п. 8.2.4 договора.

При таких обстоятельствах, требования Истца суд считает подлежащими удовлетворению частично.

Порядок распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, определен статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 110 названного Кодекса судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 110 АПК РФ, государственная пошлина, уплаченная истцом при предъявлении иска, взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Исковые требования удовлетворены на 24,12% от заявленных.

Учитывая результат рассмотрения дела, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 484 рубля 00 копеек (26 883 руб. х 24.12%).

В оставшейся части расходы по уплате государственной пошлины остаются за истцом и возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СОГДИАНА» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; адрес (место нахождения): 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 18.12.2007) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; адрес (место нахождения): 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 04.05.2007) 329 817 рублей 71 копейку пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.05.2018 №Ф.2018.227402, 5 000  рублей 00 копеек штраф (п. 8.2.4) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.05.2018 №Ф.2018.227402, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 484 рубля 00 копеек. Всего взыскать 341 301 рубль 71 копейку.

В удовлетворении исковых требований в оставшейся части отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://yamal.arbitr.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

В.С. Воробьёва