Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А21- 7946/2022

г.Калининград

06 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 06 октября 2022 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе: судьи  Пахомовой Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СТК Партнер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 236010, 

<

...> литер Г кабинет 323) к администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 238530, К/о, 

<

...>) о взыскании 2 667 434 руб. задолженности, 32 942 руб. пени.

В судебном  заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 – генеральный директор по решению, паспорту;

от ответчика: извещенный, явка представителя не обеспечена;

Суд,

У С Т А Н О В И Л:

Между ООО «СТК Партнер», как Подрядчиком, и Администрацией муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», как Заказчиком, 16 февраля 2022 года заключен муниципальный контракт № 0135300003822000006 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области» (далее по тексту - Контракт). 

В соответствии с разделом 1 Контракта, ООО «СТК Партнер» обязалось выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области», согласно Техническому заданию (Приложение №2 к Контракту) с использованием собственных материалов, машин и оборудования, а Администрация МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» обязалась принять результаты работы и оплатить их в форме безналичного расчета. 

Согласно п. 7.1. ст. 7. Контракта, работы должны были быть выполнены в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Контракта, то есть не позднее 02 апреля 2022 года. 

Согласно п. 2.1. Контракта, цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 3 264 893,50 руб. (Три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто три рубля 50 копеек), цена контракта НДС не облагается.

В соответствии с п. 2.5. основанием для оплаты выполненных работ является документ о приемке, размещенный Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок. 

Пунктом 15. Технического задания на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области», являющегося Приложением № 2 к Контракту, установлен следующий перечень требуемой отчётной документации: акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); счёт-фактура; акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35); бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость материалов, изделий и конструкций по ценам поставщика. 

Как указывает истец, он добросовестно выполнил взятые на себя обязательства по выполнения работ, о чем свидетельствуют акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 05 мая 2022 года «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области» на сумму 2 376 353,07 руб.; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 05 мая 2022 года «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области» на сумму 232 003,46 руб.; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 3 от 05 мая 2022 года «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области» на сумму 59 077,92 руб.; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 1 от 05 мая 2022 года на сумму 2 667 434,45 руб. Все вышеуказанные документы, а также уведомление о том, что документ о приемке, размещен ООО «СТО Партнер» в единой информационной системе в сфере закупок был получены ответчиком 13 мая 2022 года в порядке, установленном ст. 6. Контракта. 

Поскольку Администрация не произвела оплату работ, Общество 21.06.2022г. направило в адрес ответчика претензию.

Претензия оставлена без финансового удовлетворения, что и явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с Администрации 2 667 434,45 руб.

Ответчик, извещенный надлежащим образом 04.08.2022г., отзыв в суд не направил. Возражений своевременно не заявил.

Протокольным определением суда от 04.10.2022г. в порядке п.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд закрыл предварительное заседание и открыл заседание суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений. 

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ закреплено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены,  или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд, исследовав представленные доказательства, как того требует ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований на основании следующего.

В соответствие с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствие с ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В соответствие со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с условиями Контракта, положениями ст. 753 ГК РФ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документов принимает одно из следующих решений: в случае, если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по Контракту, Заказчик принимает результаты работ, подписывает и размещает структурированный документ о приемке; в случае, если представленные результаты работ содержат существенные отклонения от условий Контракта, Заказчик не принимает результаты работ. Заказчик формирует в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки работ подписывает и размещает его в единой информационной системе в сфере закупок.

Как установлено судом, акты выполненных работ и соответствующие справки от 05.05.2022г., получены ответчиком 13.05.2022г.   Вместе с тем, на дату обращения истца в суд, а также на дату судебного разбирательства, мотивированный отказ от приемки работ со стороны ответчика отсутствует. Таким образом, работы по Контракту на общую сумму                2 667 434,45 руб., выполненные ООО «СТК «Партнер», считаются принятыми 27 мая 2022 года. 

В соответствии с п. 2.7. ст. 2. Контракта, расчет с Подрядчиком производится за фактическое оказание работ не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты размещения Заказчиком, структурированного акта о приемке выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, следовательно, в отсутствие каких-либо замечаний по выполненным истцом работам, обязанность по оплате таких работ возникла у ответчика не позднее 10 июня 2022 года. Кроме того, судом принято во внимание, что согласно Акту о приемке рабочей комиссией объекта от 06.06.2022г. по муниципальному контракту № 0135300003822000006 «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Зелёный Гай Зеленоградского района Калининградской области» объект введен в эксплуатацию без каких-либо замечаний. Исследовав акты выполненных работ, заявленные к оплате, суд находит их соответствующими условиям Контракта и смете. Уменьшение цены Контракта обусловлено необходимостью замены видов работ, которые были отражены в актах необходимости выполнения работ от 04.05.2022г., подписанных уполномоченными представителями Администрации и технического контроля.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

 Руководствуясь статьями  110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТК Партнер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 667 434 руб. задолженности, 36 337 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить ООО «СТК Партнер» из федерального бюджета 175 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Калининградской области.

 

Судья                                                                                                   Т.В.Пахомова