224/2023-69008(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 11 апреля 2023 года 

по делу А33-26147/2022 Красноярск

«11» апреля 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в течение двух месяцев с момента вступления в законную  силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.1336.22 от 09 марта 2022  года, и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 8000488105 -  приложение № 1, в редакции дополнительного соглашения № 1, для присоединения к  электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств ООО  «Сервейер» в объеме:  

- обеспечение возможности действиями заявитель осуществить фактическое  присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)  напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя  электрической энергии (мощности) в соответствии с законодателем РФ и на основании  договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном  рынке;  

- строительство КЛ-6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до  проектируемой ТП 6 кВ (п. 10.2.2.) Протяженность и характеристики КЛ определить  проектом;  

- строительство ТП 6 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить  проектом;  

- строительство КЛ 6 кВ от новой ТП до проектируемой концевой анкерной опоры (п.  10.2.4 Протяженность и характеристики КЛ определить проектом.  

- выполнить монтаж концевой анкерной опора 6 кВ до точки присоединения,  находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной  правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристика ЛЭП  определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Сервейер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 73265 руб. 53 коп.  неустойки за период со 02.10.2022 по 15.12.2022, начиная с 16.12.2022 по день фактического  исполнения обязательства неустойка подлежит взысканию с ответчика в размере 976 руб. 87  коп. (390 749,52 руб. х 0,25%) за каждый день просрочки, но не более чем за 268 дней;  

3 000 рублей судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда  

по день его фактического исполнения, а также 8930 руб. – судебных расходов по уплате  

государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сервейер» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 5961 руб. государственной  пошлины, оплаченной по платежному поручению № 19.01.2023 № 1.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Б. Мельникова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 08.03.2023 22:39:00Кому выдана Мельникова Екатерина Борисовна