41/2017-71736(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-3988/2017

город Вологда

03 июля 2017 года

 

р е ш и л:

внести в муниципальный контракт от 20.04.2016 между обществом с  ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное проектирова- ние» и Администрацией Бабаевского муниципального района изменение, из- ложив пункт 2.1 в следующей редакции:  

«2.1. Общий срок выполнения работ: с момента заключения муници- пального контракта до 31.08.2017».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия через Арбит- ражный суд Вологодской области.  

Судья Т.Б. Виноградова