2138/2021-199(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-18020/2020

г. Казань

11 января 2021 года

Арбитражный суд Республики Татарстан 

в составе председательствующего судьи Харина Р.С., при ведении протокола судебного  заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Скузловой В.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального казенного  учреждения "Отдел образования" Исполнительного комитета Мамадышского муниципального  района Республики Татарстан, г. Мамадыш (ОГРН 1021601065606, ИНН 1626002503)  

к акционерному обществу "Стройсервис", г. Мамадыш (ОГРН 1021601064430, ИНН  1626003666)  

об обязании в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки и дефекты, допущенные при выполнении строительных работ,  

третьи лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида «Красногорский детский сад «Радуга» Мамадышского  муниципального района Республики Татарстан,  

Государственное казенное учреждение «Главное инвестициионно-строительное управление  Республики Татарстан»,  

Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,  акционерное общество «Камгэсэнергострой»,  

при участии представителей сторон:  

от истца – Габдрахманов И.Н., руководитель (паспорт, распоряжение от 10.12.2015),  

 Сергеев С.М., по доверенности от 17.11.2020 (после перерыва),  от ответчика – Галимуллин М.Х., по доверенности от 22.11.2018,  

от третьих лиц: 

от ГИСУ РТ – Сафина Л.Н., по доверенности от 28.10.2020 (до перерыва),  от АО «Камгэсэнергострой» – Копов А.И., по доверенности от 11.01.2021 (после перерыва),  

от иных третьих лиц – не явились, извещены, 

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-171 АПК РФ суд, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать акционерное общество "Стройсервис" (ОГРН 1021601064430, ИНН 1626003666)  безвозмездно устранить недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ по  строительству Детского сада на 220 мест в совхозе «Мамадышский» (Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида  «Красногорский детский сад «Радуга» Мамадышского муниципального района Республики  Татарстан), расположенного по адресу: Республика Татарстан, совхоз «Мамадышский»,  ул. Школьная, д. 16 путем производства следующих работ:  

- устранить протекание кровли входных групп 1-го этажа в осях 11-12, С-Т; 14, М-П; 10-13, Б- В (в том числе пост охраны); 6-8, А, а именно: демонтировать напольную плитку покрытия  входных групп, уложить гидроизоляцию и обеспечить разуклонку финишного покрытия для  своевременного отвода атмосферных осадков, загерметизировать узлы примыкания входных  пластиковых дверей с финишным напольным покрытием в срок с 11.05.2021 по 30.06.2021  включительно;  

- отрегулировать пластиковые входные двери и окна 2-го этажа и обеспечить плотное  закрывание створок в осях 14, К-П; 11-14, С; 4-8, А; 9-10, Ш в течение 30 календарных дней с  момент вступления решения суда в законную силу;  

- провести косметический ремонт потолков, в частности зачистить, зашпаклевать и повторно  закрасить межплитные швы в помещениях тамбура и раздевалки группы «Почемучки» (в осях  1-4, Г-Е), спортивного зала (в осях 9-11, И-Л), входной группы (в осях 1, В-Г) в течение  30 календарных дней с момент вступления решения суда в законную силу;  

- заменить отпавшую керамическую плитку вертикальной обшивки всех входных групп;  устранить проседание брусчатки по всему периметру здания, обеспечить своевременный  отвод атмосферных осадков с мест расположения вертикальных водосточных труб, заменить  отпавшие элементы металлосайдинга в вертикальной обшивке перекрытия входной группы  главного входа в осях 11-14, С-Т в срок с 11.05.2021 по 30.06.2021 включительно.  

 В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.  

 Взыскать с акционерного общества "Стройсервис" (ОГРН 1021601064430, ИНН  1626003666) в пользу Муниципального казенного учреждения "Отдел образования"  Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  (ОГРН 1021601065606, ИНН 1626002503) в лице Финансово-бюджетной палаты  Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 6 000 руб. судебных расходов  по оплате государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу по  

отдельному заявлению взыскателя. 

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  

суд в течение месяца с момента вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

Судья Р.С.Харин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 9:29:04Кому выдана Харин Роман Сергеевич