ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-101703/2023

12 июля 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     04 июля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  12 июля 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Пивцаева Е.И.

судей  Семиглазова В.А., Слобожаниной В.Б.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Калякиной В.Д.

при участии:  

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: представитель ФИО1 по доверенности от 16.02.2023 с использованием системы веб-конференции (онлайн-заседание);

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-14920/2024) Федерального государственного унитарного гидрографического предприятия на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.03.2024 по делу № А56-101703/2023 (судья Косенко Т.А.), принятое по иску: 

истец: Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Судоремонтное предприятие Преголь»

о взыскании пени и штрафов по контракту,  

 

установил:

Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие (далее – истец, Предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Судоремонтное предприятие Преголь» (далее – ответчик, Общество, ООО «СРП Преголь») о взыскании 9 398 067,95 руб. пени и   700 000 руб. штрафов по государственному контракту от 30.06.2021 № 775/964-Д.

Решением Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.03.2024 в иске отказано.

Не согласившись с решением суда, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование жалобы ее податель указывает на то, что неустойка за неисполнение обязательств по контракту начислена заказчиком в связи с неисполнением подрядчиком обязательств в период 2022 года. По мнению подателя жалобы, положения Постановления № 783 и Правил, прямо не предусматривающие в качестве специальной нормы право на списание неустоек, начисленных в период 2022 года, подлежат применению с учетом периодов, предусмотренных требованиями Закона о контрактной системе, в связи с чем, основания для применения Предприятием положений Постановления № 783 и списания Обществу неустоек начисленных, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением Контракта, отсутствовали.

01.07.2024 в апелляционный суд от ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Апелляционный суд приобщил к материалам дела отзыв истца на апелляционную жалобу.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. 

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав пояснения представителя ответчика, апелляционный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между Предприятием (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) заключен государственный контракт от 30.06.2021 № 775/964-Д (далее - Контракт) на модернизацию исследовательского судна «Григорий Михеев» (далее - Судно) в соответствии с пунктом 2.1 которого Общество приняло на себя обязательство выполнить работы по модернизации Судна (далее - Работы) в соответствии с требованиями Контракта, в сроки, установленные Контрактом.

В соответствии с пунктом 7.1.2 Контракта дата сдачи Работ по Контракту и передачи модернизированного Судна заказчику: не позднее 11.05.2022.

В силу пунктов 9.1.2 и 9.1.3, 9.2.11 Контракта выполнение работ подтверждается Актами о приемке выполненных Работ, а также Актом приемки модернизированного Судна.

В соответствии с пунктом 16 Контракта за нарушение Подрядчиком срока исполнения обязательства по Контракту, в том числе этапа Контракта Подрядчик но требованию Государственного заказчика уплачивает последнему пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

Цена контракта в соответствии с пунктом 4.1 Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 27.04.2022 № 6 к Контракту) составляет 437 829 950 (четыреста тридцать семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят ) руб. 00 коп.

Стоимость фактически выполненных работ и принятых заказчиком, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ и Актом приемке модернизированного судна:

- по   состоянию   на   12.05.2022   составляла   186   956   582   (сто   восемьдесят шесть     миллионов     девятьсот     пятьдесят     шесть     тысяч     пятьсот     восемьдесят два) руб. 52 коп., (Акты о приемке выполненных работ от 06.10.2021 № 1, от 06.12.2021 № 2, от 11.01.2022 № 3, от 04.02.2022 № 4, от 03.03.2022 № 5, от 04.04.2022 № 6 )

- по состоянию на 27.06.2022 составляла 245 652 885 (двести сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) руб. 27 коп. (Акт о приемке выполненных работ от 27.06.2022 № 7),

- по состоянию на 28.06.2022 составляла 253 955 334 (двести пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 73 коп. (Акт о приемке выполненных работ от 28.06.2022 № 8),

- по состоянию на 04.08.2022 составляла 260 286 326 (двести шестьдесят миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать шесть) руб.60 коп. (Акт о приемке выполненных работ от 04.08.2022 № 9)

- по состоянию на 30.08.2022 составляла 272 694 869 (двести семьдесят два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) руб. 65. коп. (Акты о приемке выполненных работ от 30.08.2022 № 10 и № 10.1),

- по состоянию на 30.09.2022 составляла 281 545 560 (двести восемьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 96 коп. (Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2022 № 11),

- по состоянию на 24.10.2022 составила 321 364 017 (триста двадцать один миллион триста шестьдесят четыре тысячи семнадцать) руб.22 коп.(Акт о приемке выполненных работ от 24.10.2022 №12),,

- по состоянию на 25.11.2022 составила 383 689 075 (триста восемьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят пять) 94 коп. (Акт о приемке выполненных работ от 25.11.2022 № 13)

Работы по модернизации завершены Подрядчиком 26.12.2022. (Акты о приемке выполненных работ от 26.12.2022 № 14, № 15, Акт приемки модернизированного судна от 26.12.2022 № 1)

Как указывает Предприятием, суммы пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту за период с 12.05.2022 по 26.12.2022 составляет                9 398 067 (девять миллионов триста девяносто восемь тысяч шестьдесят семь) руб. 95 коп.

Кроме того, Предприятие сослалось на то, что Обществом несвоевременно исполнены обязательства, предусмотренные пунктами 2.3, 6.3.1.1, 13.1, 13.3, 15.4.8, 15.4.16, 15.4.39 Контракта.

В соответствии с пунктом 2.3 Контракта до начала разработки Рабочей документации и производства Работ по Контракту, но не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты заключения Контракта, Подрядчик обязан разработать и представить Государственному заказчику Смету по форме Приложения № 14 к Контракту. Срок предоставления Сметы до 07.07.2021. Смета представлена Подрядчиком 06.09.2021. (п. 5 Реестра взаимных обязательств от 10.09.2021)

Согласно пункту 6.3.1.1 Контракта подрядчик не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты заключения Контракта обязан предоставить Государственному заказчику График готовности модернизации Судна. Срок предоставления Графика готовности Судна до 07.07.2021. График готовности Судна представлен 04.08.2021 (Письмо ООО «СРП Преголь» от 04.08.2021 исх.№354).

В соответствии с пунктом 13.1 Контракта подрядчик обязан в течение 20 (Двадцати) Дней с даты подписания Контракта заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при проведении Подрядчиком Работ по Контракту. Срок предоставления договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при проведении Подрядчиком Работ по Контракту до 20.07.2021. Договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при проведении Подрядчиком Работ по Контракту представлен Подрядчиком 13.09.2021. (Письмо ООО «СРП Преголь» от 13.09.2021 исх. № 432, письмо ФГУП «Гидрографическое предприятие» от 17.09.2021 № 775/1/2668).

В силу пункта 13.3 Контракта подрядчик обязан не позднее 20 (Двадцати) Дней с даты передачи в модернизацию Судна Государственным заказчиком Подрядчику, последний должен заключить договор страхования Судна. Судно передано Подрядчику в модернизацию по Акту передачи судна в модернизацию от 10.12.2021, срок представления договора страхования Судна. Договор страхования Судна представлен Подрядчиком 22.03.2022. (Акт приемки судна в модернизацию от 10.11.2021, Письмо ООО «СРП Преголь» от 22.03.2022 исх. № 132).

Согласно пункту 15.4.8 Контракта подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Государственному заказчику Плановую калькуляцию затрат на Работы по модернизацию Судна (структуру цены расходов на выполнение Работ) с приложением плановых (ориентировочных) обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, а по окончании Работ Подрядчик предоставляет Плановую калькуляцию затрат на Работы по модернизации Судна с приложением фактических обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, которые являются неотъемлемой частью калькуляции. Плановая калькуляция затрат на Работы по модернизации Судна с обоснованиями-расшифровками должны быть предоставлены в 3 (Трех) экземплярах. Срок представления Плановая калькуляция затрат на Работы по модернизации Судна до 07.07.2021. Плановая калькуляция затрат на Работы по модернизации Судна представлена 06.09.2021 (п. 3 Реестра взаимных обязательств от 10.09.2021)

В соответствии с пунктом 15.4.16 Контракта Подрядчик обязан разработать и согласовать с Государственным заказчиком график приобретения Подрядчиком (Субподрядчиками) ключевых механизмов, оборудования, комплектующих Судна в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Контракта. Срок представления разработать и согласовать с Государственным заказчиком график приобретения Подрядчиком (Субподрядчиками) ключевых механизмов, оборудования, комплектующих Судна не позднее 02.08.2021. График приобретения Подрядчиком (Субподрядчиками) ключевых механизмов, оборудования, комплектующих Судна представлен 06.09.2021 (п. 14 Реестра взаимных обязательств от 10.09.2021)

Пунктом 15.4.39 Контракта предусмотрена обязанность согласовать с Государственным заказчиком Мейкерс-лист производителей механизмов, Оборудования, комплектующих Судна, закупаемых поставщиков в рамках исполнения Контракта в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Контракта. Срок предоставления Мейкерс-листа производителей механизмов, Оборудования, комплектующих Судна, закупаемых поставщиков в рамках исполнения Контракта не позднее 02.08.2021. Мейкерс-лист производителей механизмов. Оборудования, комплектующих Судна, закупаемых поставщиков в рамках исполнения Контракта представлен 06.09.2021 (п. 15 Реестра взаимных обязательств от 10.09.2021)

В соответствии с подпунктом «г» пункта 16.6.1. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Как указывает Предприятием, общая сумма штрафа за ненадлежащее исполнение указанных пунктов Контракта составляет 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00 коп.

В претензии от 14.03.2022 № 775/8/2023-ПРЕТ Предприятие потребовало у Общества оплаты суммы пени и штрафов.

Оставление требований претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения Предприятия в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Проверив  законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В силу ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истцом начислены ответчику 9 398 067,95 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту за период с 12.05.2022 по 26.12.2022 и 700 000 руб. штрафов по Контракту.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик сослался на следующие обстоятельства. 

Общество допустило нарушение указанных в Контракте сроков вследствие существенного изменения таких обстоятельств, которые повлекли объективную невозможность их соблюдения, что подтверждается правовым заключением Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» № 61 от 31.01.2023. Согласно указанному заключению иностранными государствами приняты запреты и ограничения на экспорт в Российскую Федерацию определенной продукции, а также транзит данной продукции с основной территории России на территорию Калининградской области, где расположено и ведет хозяйственную деятельность ООО «СРП Преголь». В частности, Европейский Союз запретил продажу, поставку, передачу или экспорт морских навигационных товаров и технологий, перечисленных в Приложении XVI Регламента (ЕС) 833/2014 и в Положении XIII Регламента (ЕС) 833/2014, любому физическому или юридическому лицу в России для использования или для размещения на борту любого судна под российским флагом.

ООО «СРП Преголь» не могло предвидеть принятие указанных ограничительных (запретительных) мер и наступление вызванных ими последствий. В противном случае Контракт был бы нами заключен на иных условиях или не был бы заключен вовсе. При наличии соответствующих обстоятельств законодательство России предусматривает списание заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек, что закреплено в пункте 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 (далее - Постановление Правительства РФ).

О том, что суммы неустоек в данном случае должны быть списаны заказчиком, Общество информировало истца в письме № 153 от 10.04.2023. К письму было приложено соответствующее правовое заключение Союза «Калининградской торгово-промышленной палаты». Кроме того, в целях исполнения истцом по настоящему делу положений, предусмотренных пп. «г» и п. 2 пп. «а» п. 3, п. 8 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), утвержденных Постановлением Правительства РФ, Обществом были приняты и подписаны подготовленные истцом и направленные в адрес Общества в качестве приложения к претензиям следующие документы: 

- акт сверки расчетов по суммам неустойки (штрафов, пеней) от 16.01.2023 на 31.12.2022 на сумму 7 128 652,91 руб.

- акт сверки расчетов по суммам неустойки (штрафов, пеней) от 07.04.2023 на 01.04.2023 на сумму 10 098 067,95 руб.

Однако, Общество неоднократно, в том числе, в письмах № 249 от 29.06.2023 и № 281 от 06.08.2023 обращало внимание истца на тот факт, что заключенный сторонами Контракт исполнен, сумма неустойки по акту сверки от 01.04.2023 (как и по ранее подписанному), не превышает 5% от цены Контракта (составляет от нее лишь 2,3%) и, соответственно, должна быть списана. Общество также указывало на тот факт, что утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации правила определяют основания и порядок списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек по государственным контрактам и не предоставляют заказчику право не списывать суммы неустоек при наличии предусмотренных в постановлении оснований.

Таким образом, требования истца основываются на обстоятельствах, связанных с исполнением государственного контракта и признанных обеими сторонами. Однако, при этом данные требования являются следствием немотивированного и незаконного отказа со стороны Предприятия исполнить положения пп. «г» и п. 2 пп. «а» п. 3, п. 8 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации и списать сумму неустойки, зафиксированную в многочисленных подписанных сторонами актах сверки.

В связи с изложенным, по мнению ответчика, исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку Предприятие обязано было исполнить положения пп. «г» и п. 2 пп. «а» п. 3, п. 8 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации, и списать сумму неустойки, зафиксированную сторонами в акте сверки расчетов по суммам неустойки (штрафов, пеней) на текущую дату.

В обоснование своих возражений ответчик представил акты сверок, правовое заключение Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» № 61 от 31.01.2023, письма Общества.

В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Исходя из содержания Федерального закона от 30.12.2021 N 476-ФЗ измененная редакция части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до их принятия, поскольку регламентирует правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе, в 2021 году.

Просрочка исполнения обязательств у ответчика возникла с 2021 года.

В целях реализации требований закона Правительством Российской Федерации принято Постановление от 04.07.2018 N 783, которым утверждены обозначенные выше Правила, устанавливающие порядок и случаи списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. 

Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, по смыслу действующего законодательства является антикризисной мерой, которая ранее (до 01.01.2017) также применялась в правовом регулировании отношений в сфере закупок (часть 6.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 N 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»).

Обеспечение возможности дальнейшего применения антикризисных мер еще до обращения Предприятия в арбитражный суд с иском по настоящему делу реализовано законодателем согласно Федеральному закону от 08.03.2022 N 46-ФЗ, которым статья 34 Закона о контрактной системе дополнена частью 9.1, предоставившей Правительству Российской Федерации право устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. Правительство Российской Федерации на основании Постановления от 10.03.2022 N 340 внесло изменения в Правила N 783, исключив в частности в наименовании и пункте 1 слова «в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах».

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил N 783 (в редакции, действующей в период просрочки исполнения обязательств) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» этого пункта.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 данных Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 этих же Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (пункт 11 Правил N 783).

Учитывая разъяснения в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2024 N 305-ЭС23-20353 по делу N А40-192470/2022, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что предъявленные истцом к взысканию суммы пени и штрафов подлежали списанию заказчиком.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, в связи с чем, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 19.03.2024 по делу №  А56-101703/2023  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Е.И. Пивцаев

Судьи

 

В.А. Семиглазов

 В.Б. Слобожанина