Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

22 июня 2019 годаДело № А56-20032/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

:АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (адрес:  Россия 187420, г СЯСЬСТРОЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВОЛХОВСКИЙ р-н, ул СОВЕТСКАЯ 15-А, ОГРН:  1044702048820);

к :Общество с ограниченной ответственностью "Дар" (адрес:  Россия 194358, Санкт-Петербург, Пр-кт Энгельса 154,оф.228, ОГРН:  1037804024917);

о взыскании 475 639,56 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 18.09.2017 № 0145300003015000047 за период с 01.11.2017 по 25.12.2017,

приняв во внимание, что, по сути, сторонами не согласован срок выполнения работ – согласно пункту 7.1 Контракта работы должны быть выполнены до 31.10.2017, разделом «Общие требования к выполнению работ» Технического задания – приложения № 1 к Контракту предусмотрено выполнение работ в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта (то есть до 17.11.2017),

в связи с чем неустойка за нарушение срока выполнения работ не может быть начислена,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

В иске отказать.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Сурков А. А.