Арбитражный суд Московской области

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

гор. Москва

 

«17» февраля 2023 года                                    

Дело № А41-74357/22

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2023 года.     

  Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению 

ООО "АРМАДА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО СК "ЛУЧ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица: АО ТМКБ "Союз", АО "Авиапром",

о взыскании 1 575 000 руб., 

при участии в заседании: согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

ООО "АРМАДА" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО СК "ЛУЧ" о   взыскании задолженности в размере 1 575 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 28 750 руб., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате выполненных дополнительных работ в рамках  Договора строительного подряда № 07/3005 от 15.06.2021г.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены АО ТМКБ "Союз", АО "Авиапром".

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве, дополнениях к отзыву, просил в иске отказать. 

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены, представили свои позиции по делу. АО ТМКБ "Союз", АО "Авиапром" просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав представителей сторон, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

По материалам дела судом установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «АрмадА», именуемое в дальнейшем истец и Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Луч» (ООО СК «Луч»), именуемое в дальнейшем ответчик , заключили договор строительного подряда № 06/0428 от 28.04.2021.

Согласно условиям данного договора, ООО «АрмадА» в установленные сроки обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции корпуса№12, в соответствии с рабочей документацией по проекту № 841-109/104-20 «Техническое перевооружение и реконструкция существующих производственных мощностей в обеспечение серийного изготовления изделий в заданных количествах и проведения комплексных наземных испытаний ПАО ТМКБ «Союз», г.Лыткарино, Московской области» (3 лицо по делу) и сметной документацией, 02-03 - I Объектный сметный расчет на строительство. Корпус № 12; 02-03-01 Локальный сметный,^, расчет. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус № 12; 02-03-02 -Внутреннее электроснабжение, силовое оборудование, кабельные изделия. Корпус № 12; 02-03-03 - Водоснабжение(ВО). Корпус № 12; 02-03-04 - Канализация производственная (КЗ). Корпус № 12; 02-03-05 - Внутренние промпроводки. Корпус № 12; 04-02-01 -Внутриплощадочные кабельные линии 0,4 кВза исключением пунктов 32-47а ООО СК «Луч» обязуется принять работы и уплатить определенную Договором цену.

Согласно условиям заключенного договора ООО СК «Луч» действует в рамкахисполнения своих обязательств по контракту от 30.12.2020 № 109/159-20 заключенного с АО «Авиапром» во исполнение контракта от 30.12.2020 №00000000020956190413/2048700003920000014 заключенного с АО «ТМКБ «Союз», поэтомуАО «Авиапром», АО «ТМКБ «Союз» являются третьими лицами по настоящему делу.

В рамках данного договора истцом был выполнен ряд дополнительных работ.

Истец указал, что  пытался в досудебном порядке урегулировать настоящий спор, в том числе по подписанию соглашения на дополнительные работы, однако, претензии от 18.02.2022 №218, от 17.03.2022 №317  в адрес ответчика оставлялись без внимания.

Дополнительное соглашение на дополнительно выполненные работы к основному договору со стороны ответчика остался не подписанным.

Несмотря на отсутствие оформления договорных отношений, истец на основании представленной ответчиком рабочей документацией выполнил комплекс работ по обустройству объекта, включающих в себя: демонтаж полов; вывоз бетона, алмазное бурение отверстий, монтаж несъемной опалубки, монтаж закладной под электрику с материалом, монтаж свай под моноблок с материалом, демонтаж бетона в траншеях, монтаж кабелей Вибростенда, вывоз мусора между ангаров, кладка, штукатурка, шпаклевка, окраска, увеличение кабеля с гофрой и проведение земляных работ, планировка грунта, монтаж уголка для лотков, изготовление и монтаж ограждения ВРУ, монтаж, демонтаж стопоров, монтаж фальшполов.

В подтверждение факта выполнения работ представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3,переписка, журналы производства работ, доказательства выполнения работ на объекте и иные доказательства.

Претензиями от 18.02.2022 и от 17.03.2022 истец потребовал у ответчика оплатить выполненные дополнительные работы.

Поскольку претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено право заинтересованного лица обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном данным Кодексом.

Право на судебную защиту предполагает своевременное, правильное и справедливое рассмотрение судом дела.

Целью заявленных истцом требований является восстановление его нарушенных прав, посредством взыскания с ответчиков денежных средств за выполненные работы; указанные требования квалифицированы истцом как фактически сложившиеся отношения подряда (к основному договору).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия дл выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными", правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.09.2011 N 1302/11, следует, что отсутствие самостоятельного договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключенного в требуемой законом форме, не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, имеющих для последнего потребительскую ценность.

При наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Сдача результата работ лицом, выполнившим их в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти работы выполнены, означает заключение сторонами соглашения. Обязательства из такого соглашения равнозначны обязательствам из исполненного подрядчиком договора подряда. В этом случае между сторонами уже после выполнения работ возникают обязательства по оплате их результата и гарантии их качества, так же как и тогда, когда между сторонами изначально был заключен договор подряда.

Необходимо учитывать, что в случае, если результат выполненных обществом работ находится у заказчика и у него отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может им использоваться, отсутствие подписанного сторонами договора подряда не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлено, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Судом установлено, что истец известил ответчика о необходимости приемки работ, направив акты формы КС-2 и справку формы КС-3 письмом от 25.08.2022 № 825.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее^ изменение его условий не допускается.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По условиям пункта 1. статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

.

Пунктом 1 статьи 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ, пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Предъявляя требование об оплате выполненных работ, подрядчик обязан доказать факт выполнения работ и их стоимость.

J

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

В силу пункта 5 статьи 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

'

По смыслу приведенных норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создает возможность для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ.

Указанная правовая позиция сформулирована в Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 (пункт 12).

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).

Риск непредоставления доказательств в подтверждение доводов лежит на лице, его не предоставившем (ст. 9 АПК РФ).

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что дополнительные работы не были в надлежащем порядке согласованы  сторонами, согласно п. 2.5., и п. 12.3 договора, в связи с чем, оплате не подлежат.

Суд отклоняет доводы ответчика как несостоятельные, противоречащие сведениям, имеющимся в материалах дела, фактическим обстоятельствам дела.

Так, в материалы дела третьими лицами представлены отзывы на исковое заявление истца, АО ТМКБ Союз и АО «Авиапром».

АО ТМКБ Союз полностью подтверждает выполнение дополнительных работ согласно заявленным сметам КС-2 и КС-3, АО «Авиапром» также подтверждает выполнение дополнительных работ ООО «АрмадА».

Кроме всего, в письме от 21.12.2022 № СК-02/122 ответчик признает частично исполнение работ ООО «АрмадА», однако в отзыве на исковое заявление ответчик просит суд отказать в удовлетворении ООО «АрмадА» заявленных требований.

В материалы дела истцом представлены акты выполненных работ, ответчиком данные акты не подписаны.

Предметом рассмотрения настоящего спора является взыскание истцом дебиторской задолженности с ответчика в размере 1 575 000 руб.

Истцом в адрес ответчика неоднократно направлялись акты сверки, акты выполненных работ. Указанные документы получены генеральным директором ФИО1 12.05.2022, получались также иными представителями ответчика, что подтверждается материалами настоящего дела и представленной электронной перепиской истца и ответчика.

Суд отмечает, что позиция истца по делу четкая и обоснованная, подтверждается позицией третьего лица по настоящему делу, АО «Авиапром». АО «Авиапром» в позиции подтвердил факт выполнения работ истцом, объем которых подтверждается сметами и актами выполненных работ, представленные в материалы дела сторонами. Позиция по делу АО ТМКБ «Союз» не противоречит позиции по делу АО «Авиапром» и также подтверждает обязательства ответчика о необходимости оплаты работ истцу.

Представленные представителем ответчика платежные документы (платежные поручения №72 от 7.06.2021 на сумму 1 000 000 руб., 297 от 2.08.2021 на сумму 500 000 руб., 406 от 13.08.2021 на сумму 1 000 000 руб., 798 от 17.12.2021 на сумму 300 000 руб.) не свидетельствуют об исполнении ответчиком принятых на себя обязательства по отношению к истцу по оплате работ дополнительных на сумму 1 575 000 руб., к существу спора данные платежные поручения не относятся. Эти платежные документы относятся к основному договору №06/0428, по которому нет спора.

Данные платежные поручения относятся к оплате ранее выполненных истцом работ в пользу ответчика и фигурируют в актах сверки выполненных работ с пометкой «оплаченные».

Ранее в позиции АО ТМКБ «Союз» сообщало суду, что в адрес АО «Авиапром» денежные средства по государственному контракту поступили, АО «Авиапром» данные денежные средства направил в адрес ООО СК «Луч» для расчета с субподрядчиками.

Сопроводительным письмом №329 от 29.03.2022 ответчику сообщалось о необходимости уплаты денежных средств за выполненные дополнительные работы. Сопроводительное письмо с приложениями актов выполненных работ и счетами на оплату принял лично генеральный директор ответчика ФИО1. Этим же письмом передавались акты сверок взаимных расчетов.

Письмом № 428 от 28.04.2022 г ответчику указанные акты также направлялись с просьбой их подписать, оплатить и вернуть в адрес истца (получил 28.04.2022 Малькович), однако, в адрес истца оплаты до настоящего времени не поступило.

Письмом № 218 от 18.02.2022 ответчику также сообщалось о необходимости заключения доп. Соглашений на дополнительные работы и их оплате.

Письмом № 317 от 17.03.2022 ответчик уведомлялся о необходимости сверки взаимных расчетов и подписи актов выполненных работ.

Письмом по электронной почте ответчик в адрес истца направил проект дополнительного соглашения на дополнительные работы, однако, его так и не подписал (письмо по эл. почте от 07.04.2022) (приложение к иску , в материалах дела)

Письмом № 825 от 25.08.2022 г ответчику указанные акты выполненных работ также направлялись с просьбой их подписать, оплатить и вернуть в адрес истца (приложение к иску, в материалах дела)

Так, в акте сверки взаимных расчетов, представленные в материалы дела, все представленные ответчиком платежные поручения проходят по основному договору (№06/0428). Задолженность в пользу истца составляет 1 575 000 рублей.

Платежное поручение 406 от 13.08.2021 на сумму 1 000 000 руб. проходит в другом договоре (07/3005), что указано в акте сверки расчетов.

Позиция истца подтверждается почтовой перепиской, в которой неоднократно указывается о необходимости погашения задолженности ответчиком и подписания актов выполненных работ.

Также, в материалы дела представлено дополнительное соглашение № 1 к Договору от 04.04.2021, направленное ответчиком на электронный адрес истца, в котором  сам ответчик указал стоимость дополнительных работ в размере 2 070 128 руб. 51 коп. Вместе с тем, соглашение не было официально подписано сторонами. Однако, основные работы не могли быть выполнены без выполнения дополнительных работ. Данный факт сторонами не оспорен.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, а также то, что Договор строительного подряда № 07/3005 от 15.06.2021г. заключен во исполнение обязательств ответчика по контракту от 30.12.20202 № 00000000020956190413/2048700003920000014, суд приходит к выводу о том, что факт выполнения и сдачи дополнительных работ подтвержден материалами дела, доказательств оплаты работ ответчиком не представлено. Требование о взыскании задолженности за выполненные дополнительные работы подлежит удовлетворению.

Отсутствие дополнительного соглашения наряду с наличием доказательств соблюдения субподрядчиком положений части 3 статьи 743 ГК РФ не освобождает генподрядчика от обязанности по оплате фактически выполненных субподрядчиком дополнительных работ, без выполнения которых не будут достигнуты предусмотренные контрактом проектные показатели, необходимые для обеспечения годности и прочности результата работ.

С учетом результатов рассмотрения дела, судебные расходы возлагаются на ответчика на основании ст.ст.106, 110, 112 АПК РФ.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с  ООО СК "ЛУЧ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "АРМАДА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 1 575  000 руб., расходы  по уплате государственной пошлины в размере 28 750 руб. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья                                                                                                         Е.А. Морозова