32/2023-257304(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-11377/2023

г. Оренбург

12 декабря 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Федоровой С.Г., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом  судебном заседании исковое заявление  

Некоммерческая организация "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Оренбургская область, г. Оренбург)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Благострой"  (1115658035624, ИНН 

<

***>, Оренбургская область, г. Оренбург)  

об обязании выполнить работы по устранению недостатков в  рамках гарантийных обязательств по договору,  

руководствуясь статьями 41, 49, 110, ст. 159, ст.ст. 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования некоммерческой организации "Фонд  модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской  области" удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  "Благострой" безвозмездно в рамках гарантийных обязательств по  договору подряда № СМР - 9/2021 от 11.03.2021 выполнить работы по  устранению недостатков (дефектов) по объекту: 

<

...>, в срок 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу:  

- укрепить прижимную планку, провести герметизацию  прижимной планки к вентканалам и будкам выхода на кровлю в  объеме - 36 м;  

- произвести смену рулонного ковра вокруг ливневых воронок  в1 и 2 подъезде, произвести наклейку дополнительного слоя в объеме  4м2;  

- произвести отбивку разрушенной штукатурки в объеме 149,62  м2, произвести выравнивание стен штукатурным составом в объеме  149,62 м2, произвести окраску будок выхода после оштукатуривания в  объеме 149,62 м2;  

- произвести отбивку разрушенной штукатурки в объеме 28 м2,  произвести выравнивание стен штукатурным составом в объеме 28 м2,  произвести окраску будок вентканалов после оштукатуривания - в  объеме 28 м2;  

-произвести демонтаж фартука в объеме 35,96 м, произвести  установку костылей в количестве 66 шт., произвести установку  фартука после установки костылей;  

- закрепить кровельное ограждение по периметру кровли в  объеме - 40 м, добавить крепеж анкерами по всему периметру.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  "Благострой" в рамках гарантийных обязательств по договору подряда   № СМР - 198/2019 от 03.06,2019 выполнить работы по устранению  недостатков (дефектов) по объекту: 

<

...>, в срок 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу:  

- произвести очистку цоколя от старой краски в объеме - 129,8  м2, произвести окраску фасадов с лесов с подготовкой поверхности в  объеме 129,8 м2;  

- произвести ремонт и восстановление герметизации стыков  наружных стеновых панелей прокладками «Вилатерм», монтажной  пеной и мастикой вулканизирующейся (произвести зачистку от  старого герметика, замазку новым герметикам) в объеме 2м;  

- произвести окраску балконных плит снизу акриловыми  составами с люлек по подготовленной поверхности (провести очистку  плит, окраску) в объеме 26м2;  

- выполнить устройство примыканий рулонного ковра к стенам  дома на козырьке согласно проекта ПСД 3105/2018-АС лист 9 в  объеме 12 м;  

- выполнить устройство отливов на балконных плитах согласно  проекта ПСД 3105/2018-АС лист 9 в объеме 24 м2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  "Благострой" безвозмездно в рамках гарантийных обязательств по  договору подряда № СМР - 8/2021 от 11.03.2021 выполнить работы по  устранению недостатков (дефектов) по объекту: Оренбургская  

область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2, в срок 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу:  

- укрепить прижимную планку к парапету лифтовой шахты  болтами в объеме - 50 шт.;  

- произвести герметизацию полиуретановым герметиком  примыкания прижимной планки к парапету лифтовой шахты в объеме  -25м.;  

- произвести промазку мастикой и произвести наклейку  рулонного ковра к стене парапета в объеме - 15м.;  

- произвести разборку рулонного ковра примыканя к ливневой  воронке в объеме -1м.  

- произвести огрунтование поверхности примыкания к ливневой  воронке в объеме - 1м.;  

- произвести наклейку рулонного ковра примыкания к ливневой  воронке в объеме -1м.;  

произвести демонтаж, выправку оцинкованного листа,  устройство заново деформированного отлива парапета в объеме - 5м.;  

- произвести герметизацию герметиком примыкания элементов  крепления ограждения в объеме-21,6м.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  "Благострой" безвозмездно в рамках гарантийных обязательств по  договору подряда № СМР - 327/2020 от 24,09.2020 выполнить работы  по устранению недостатков (дефектов) по объекту: 

<

...>, в срок 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу:  

- произвести разборку покрытий кровли негерметичных  примыканий рулонного ковра к стенам парапета в объеме - 26,99 м2;  

- произвести огрунтовку оснований из бетона или раствора под  водоизоляционный кровельный ковер в объеме - 26,99м2;  

- произвести устройство примыканий кровель из наплавляемых  материалов к стенам и парапетам в объеме - 31,6 м2;  

- произвести демонтаж дверного блока в объеме - 1 шт;  

- произвести установку нового обрамления дверного проема в  объеме - 0,01885 т;  

- произвести установку двери выхода на кровлю 1 подъезда  согласно листу 11 проекта 161/2020-АС в объеме - 0,01049 т;  

- произвести смену частей канализационного стояка над кровлей  (патрубка) согласно листу 9 проекта 161/2020-АС (высота должна  составлять 1,3м) в объеме - 2 шт.  

В случае несвоевременного исполнения судебного акта взыскать  с общества с ограниченной ответственностью "Благострой" в пользу  некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" судебный штраф в  размере 500 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения  решения суда, начиная с 31 дня после даты вступления решения суда в  законную силу до дня его фактического исполнения.  

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Благострой" в пользу некоммерческой организации "Фонд  модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской  области" расходы по уплате государственной пошлине в размере  

6 000 руб. 00 коп. 

Исполнительный лист выдать истцу по его ходатайству в порядке  статей 318-320 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа,  направляются лицам, участвующим в деле, посредством их  размещения на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее  следующего дня после дня их принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на  бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

 Судья С. Г. Федорова