Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1421/2023

17 июля 2023 года

город Якутск

  Резолютивная часть решения объявлена 10.07.2023  

Мотивированное решение изготовлено 17.07.2023 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению государственного автономного  учреждения Республики Саха (Якутия) "Якутская городская больница № 3" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица  17.06.2004 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  г.Якутску Республики Саха (Якутия), находящегося по адресу: 677010, 

<

...>) от 22.02.2023 № 1134 к обществу с  ограниченной ответственностью "Климовъ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  зарегистрированного в качестве юридического лица 27.11.2020 Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), находящегося по  адресу: 677009, 

<

...>)  об устранении недостатков работ, выполненных по договору № 32110204635 от  02.06.2021, о взыскании 912 721, 95 рублей штрафа за ненадлежащее исполнение  обязательств,  

на судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2 по доверенности 14АА 1879443 от 03.11.2022, паспорт,  диплом;  

от ответчика: не явились, не извещены; У С Т А Н О В И Л: 

государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутская  городская больница № 3" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с  исковым заявлением от 22.02.2023 № 1134 к обществу с ограниченной ответственностью  "Климовъ" об устранении недостатков работ, выполненных по договору № 32110204635  от 02.06.2021, о взыскании 912 721, 95 рублей штрафа за ненадлежащее исполнение  обязательств.  

Определением суда от 25.05.2023 принято уточнение исковых требований об  обязании общества с ограниченной ответственностью "КлимовЪ" своими силами и за свой  счет в срок до 01.07.2023 г. выполнить следующие работы в целях устранения недостатков  капитального ремонта, выполненных по Договору № 32110204635 от 02.06.2021 г.,  выявленные в период действия гарантийных обязательств по адресу г. Якутск, село  Хатассы, ул .Каландрашвили 4/2:  

1 этаж:  

- комната мясозаготовки площадью 40 м2 (помещения № 36; 38) - устранить  

отслоение от стен облицовочной керамической плитки; 

- кухня площадью 47 м2 (помещение № 42) - устранить отслоение от стен  

облицовочной керамической плитки; 

- моечная площадью 25 м2 (помещение № 44) - устранить отслоение от стен  

облицовочной керамической плитки; 

- тамбур площадью 33,5 м2 (помещение № 31) - устранить отслоение от стен  

облицовочной керамической плитки; 

- в коридоре устранить провисание подвесных потолков "Амстронг".  2 этаж:  

- в смотровой-ординаторской (помещение № 1) - устранить отслоение  

водоэмульсионной краски потолка площадью 14,9 м2; 

- в коридоре (помещение № 6) устранить трещину и отслоение водоэмульсионной  

краски стены площадью 1 м2; 

- в коридоре устранить провисание подвесных потолков "Амстронг".  3 этаж:  

- кабинет логопеда (помещение № 6) - устранить отслоение водоэмульсионной  

краски потолка протяженностью 2,5 м, шириной до 30 см; 

- в коридоре (помещение № 7) – устранить трещину и отслоение облицовочной  

плитки пола площадью 2 м2. Наружная торцевая лестница с правой стороны: 

- устранить дефекты облицовки ступеней и лестничных маршей керамической  

плиткой (исправить неровную затирку плитки). Внутри здания 2 лестницы (с 1 по 3 этаж): 

- устранить различную высоту ступеней лестничных маршей (выполнить одной  

высоты); 

- устранить дефекты облицовки ступеней и лестничных маршей керамической  

плиткой (повторно произвести облицовку). 

Взыскании с общества с ограниченной ответственностью "КлимовЪ" в пользу  

государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Якутская  

городская больница № 3" штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств,  

предусмотренных п. 7.1 Договора, в размере 912 721,95 рубля. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, провел судебное заседание в отсутствие представителя ответчика.  Представитель истца поддержал исковые требования.  

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства. 

По результатам электронного аукциона между государственным автономным  

учреждением Республика Саха (Якутия) «Якутская городская больница № 3» (истец,  

заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлимовЪ» (ответчик,  

подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту  

Хатасской участковой больницы ГАУ РС (Я) «ЯГБ № 3» № 32110204635 от 02.06.2021  

(далее - Договор). 

Согласно предмету Договора Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а  

Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных работ по капитальному  

ремонту Хатасской участковой больницы ГАУ РС (Я) «ЯГБ № 3» 

Согласно п. 1.2 Договора сроки выполнения работ: в течении 90 календарных дней с  

момента заключения договора. 

Цена Договора устанавливается в соответствии с протоколом подведения итогов  

электронного аукциона от «13» мая 2021 г. № 2041844 и составляет 9 127 219 (девять  

миллионов сто двадцать семь тысяч двести девятнадцать) рублей 50 копеек, в том числе  

НДС 20% - 1521203,25. 

Цена включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных  сметным расчетом (п. 2.1 Договора).  

Согласно п. 3.11 Договора Подрядчик обязуется: 

Выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и  приложениями к нему, в соответствии с размещенным заказом, по технологическим  условиям, утвержденной сметной документации, действующими строительными,  санитарными, природоохранными и другими нормами, а также иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного  вида (п. 3.1.1. Договора).  

Обеспечить качество выполненных работ и поставляемых материалов, также  обязательное согласование с Заказчиком применяемых материалов. На поставляемые  материалы предоставлять сертификаты, технические паспорта и другие документы,  удостоверяющие их качество и соответствие требованиям пожарной безопасности,  действующим строительным, санитарным и другим нормам (п. 3.1.2. Договора).  

В гарантийный срок 36 месяцев, с момента принятия работ, устранять выявленные  недостатки. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки должны быть  устранены в течение 10 дней с момента получения претензии от Заказчика (п. 3.1.10  Договора).  

Согласно п. 3.2.10. Договора по своему выбору в случаях, когда Работы выполнены  Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ или с иными  недостатками, которые делают их непригодными для предусмотренного Договором  использования: - потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в  разумный срок; - потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ;  - устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с  отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.  

Согласно п. 4.1. Договора сдача и приемка результатов работ осуществляются на  основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом  выполненных работ, оформленным по унифицированным формам № КС-2, № КС-3,  утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.  

В соответствии с п. 4.12. Договора гарантийный срок по качеству выполненных  работ и использованных материалов составляет не менее 24-х месяцев с даты подписания  сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение  Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков,  выявленных после приемки Работ.  

Согласно п. 6.1. Договора работы, указанные в 1.1. настоящего Договора должны  быть выполнены Подрядчиком в срок: в течении 90 календарных дней с момента  заключения договора.  

В п. 7.1 Договора стороны предусмотрели, что за ненадлежащее исполнение  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки  исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства)  предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной  суммы - 10 процентов цены Договора, что составляет 912 721 (девятьсот двенадцать тысяч  семьсот двадцать один) руб. 95 коп.  

31.08.2021 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к Договору о  продлении срока выполнения работ до 20.09.2021.  

20.09.2021 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к Договору об  увеличении цены договора до 10 039 941, 40 рублей.  

По результатам работ стороны подписали: акт о приемке выполненных работ № 1 от  01.12.2021; акт о приемке выполненных работ № 2 от 01.12.2021; справку о стоимости  выполненных работ и затрат № 2 от 10.12.2021; справку о стоимости выполненных работ  и затрат № 1 от 10.12.2021.  

Истец на основании счета на оплату № 8 от 10.12.2021, счета-фактуры № 8 от  10.12.2021 перечислил подрядчику 10 039 941, 40 рублей, что подтверждается платежным  поручением № 4007 от 11.12.2021.  

Истец указывает, что подрядчик просрочил срок выполнения работ на 72 дня, а  также обнаружены недостатки результатов работ:  

Выполненные работы 

Выявленные недостатки 

Примечание 

Внутренняя отделка:  

- окрашивание водоэмульсионными  составами поверхностей потолков,  ранее окрашенных: известковой или  

клеевой краской, с расчисткой старой  краски более 35%;  

- улучшенная масляная окраска ранее  окрашенных потолков: за два раза с  

расчисткой старой краски до 10%;  - устройство потолков: плитно- 

ячеистых по каркасу из оцинкованного  профиля;  

2 этаж: 

- в смотровой-ординаторской  обнаружено отслоение краски с  

потолка, препятствующее 

качественному проведению влажной  текущей и генеральной уборки с  

использованием дезинфицирующих  средств;  

3 этаж: 

- детское неврологическое отделение в  кабинете логопеда около окна отошла  краска с потолка;  

1 и 2 этаж коридор: частично провис  навесного потолка «Амстронг»;  

2 этаж трещина и отслоение краски на  стене.  

Нарушение п. 2.7, п. 4.3 СП 2.1.3678- 20 "Санитарно-эпидемиологические  требования к эксплуатации  

помещений, зданий, сооружений,  

оборудования и транспорта, а также  условиям деятельности  

хозяйствующих субъектов,  осуществляющих продажу товаров,  

выполнение работ или оказание  услуг".  

Постановление о назначении  наказания по делу об  

административном правонарушении   № 34/05-ОЭН; Акт выездной проверки  

 № 52 от «04» апреля 2023 г.  Управления Роспотребнадзора по  

Республике Саха (Якутия)  

Облицовка ступеней плитками  толщиной до 15 мм.;  

Наружная торцевая лестница с правой  стороны:  

- дефекты затирки керамической  плитки  

Внутри здания 2 лестницы: 

- ступени лестничных маршей  различной высоты от 10 до 18 см.;  

- частично раскололись плитки на  лестничных пролетах;  

Нарушение правил пожарной  

безопасности (пункт 4.3.6 СП  1.13130.2020 "Системы  

противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы").  

УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я)  выдано Предписание об устранении  

нарушений обязательных требований  пожарной безопасности № 226/1/1 в  

срок до 01.07.2023 г. 

Дефекты затирки керамической  плитки является нарушением пункта  

7.4.13 СП 71.13330.2017 

"Изоляционные и отделочные  покрытия";  

Внутренняя отделка:  

- гладкая облицовка стен, столбов,  пилястр и откосов (без карнизных,  плинтусных и угловых плиток) без  установки плиток туалетного гарнитура  

на цементном растворе 

(плитка керамическая глазурованная  для внутренней облицовки стен гладкая,  

белая без завала) 

1 этаж  

Комната мясозаготовки – отходит  плитка от стен.  

Моечная – отошла плитка от стен  (есть вероятность падения)  

Кухня – отошла плитка от стен (есть  вероятность падения)  

Тамбур – частично отвалилась плитка  3 этаж на полу частично отошла  

плитка 

Необходимо устранить отслоение от  

стен облицовочной керамической  плитки.  

Помещение мясозаготовки:  Снять плитку со стен, нанести зарубки  

на стенах, нанести бетон-контакт,  поклеить новую плитку – 40 кв.м.  Моечная:  

Снять плитку со стен, нанести зарубки  

на стенах, нанести бетон-контакт,  поклеить новую плитку – 25 кв.м.  Кухня:  

Снять плитку со стен, нанести зарубки  

на стенах, нанести бетон-контакт,  поклеить новую плитку – 47 кв.м.  Тамбур:  

Снять плитку со стен, нанести зарубки  

на стенах, нанести бетон-контакт,  поклеить новую плитку – 33,5 кв.м.  

 

3 этаж на полу – 2 кв.м. 

Истец считает, что причины образования дефектов затирки керамической плитки  

является нарушением пункта 7.4 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные  покрытия"; провис навесного потолка является нарушением пункта 7.7. СП 71.13330.2017  "Изоляционные и отделочные покрытия"; отслоение и повреждение керамической плитки  являются нарушениями пунктов 6.1, 6.6 TP 98-99 "Технические рекомендации по  технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных  керамических плиток". Образование данных дефектов также является следствием  отсутствия необходимой подготовки поверхности стен перед выполнением облицовочных  работ; наличие данных дефектов является следствием ненадлежащего качества  выполненного ремонта по договору.  

Претензией от 04.05.2022 г. с исх. № 622/243-Исх. ГАУ РС (Я) «Якутская городская  больница № 3» просило в срок не позднее 3 дней со дня получения претензии направить  представителя ООО "КлимовЪ" для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,  согласования порядка и сроков их устранения.  

Претензией от 04.07.2022 г. с исх. № 622/343-Исх. ГАУ РС (Я) «Якутская городская  больница № 3» требовало направить представителя ООО "КлимовЪ" для участия в  составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения.  

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница № 3» в претензии от 20.07.2022 г. с исх.   № 622/388 потребовало направить представителя ООО "КлимовЪ" «22» июля 2022 г. в 11  ч. 00 м. по адресу: г. Якутск, 

<

...> для участия в  составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения.  В случае отсутствия Вашего представителя, акт будет составлен в одностороннем  порядке.  

В ответ на претензию от 20.07.2022 г. с исх. № 622/388 ООО "КлимовЪ" сообщило,  что из-за невозможности предоставления своего представителя для участия составления  акта, прост провести проверку самостоятельно и в течении дня представить акт,  фиксирующий дефекты, с предоставлением фото и конкретных причин их возникновения.  

22.07.2022 истцом составлен акт № 1 от 22.07.2022, согласно которому выявлено  следующее:  

1. Торцевая уличная лестница – Замазать швы кафеля 2. 2. Торцевой вход – отходит плитка, частично отвалилась плитка тамбура 3. 1 этаж – провис потолка 4. Комната мясозаготовки – отходит плитка от стен 5. Моечная – отошла плитка от стен (есть вероятность падения) 

6. Центральный лестничный проем – на ступеньках первого этажа сломалась  

плитка 

7. Торцевая и центральные лестничные марши, ремонт выполнен с нарушением  

правил пожарной безопасности (п.4.3.6 СП 1.13130.2020) разная высота от10-18  

см. 8. 2 этаж кабинет приема врача частично отвалилась краска с потолка 

9. 2 этаж коридор провис навесного потолка «Амстронг»  10. 3 этаж на полу отошла плитка  

В данном акте комиссия заключила устранить нарушения в течении 20 дней со дня  получения данного акта.  

24.08.2022 в претензии № 2147/1 истец потребовал устранить недостатки в течении  14 календарных дней.  

03.10.2022 истец направил претензию № 622/522-Исх., в котором требует устранить  недостатки в течении 14 календарных дней, а в случае отказа удовлетворить требования в  добровольном порядке будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд, также  приложил локальный сметный расчет № 1/22, ведомость объемов работ.  

Претензии направлены на электронную почту подрядчика.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску ГУ  МЧС России по РС (Я) вынесено предписание об устранении нарушений обязательных  требований пожарной безопасности № 226/1/1 от 19.10.2022 г.: вид нарушения – ступени  лестничных маршей различной высоты (от 10 см. 18 см.), нарушены требования пожарной  безопасности (п. 4.3.6 СП 1.13130.2020), срок для устранения до 01.07.2023 г.  

Постановлением Мирового судьи судебного участка № 42 г. Якутска РС (Я) от  10.11.2022 г. по делу № 5-1032/41-2022, ГАУ РС (Я) «ЯГБ № 3» признан виновным в  совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП  РФ.  

Истцом в материалы дела представлено постановление Роспотребнадзора о  назначении наказания по делу об административном правонарушении № 34/05ОЭН от  12.04.2023, согласно которому выявлены нарушения и назначено наказание в виде  предупреждения.  

В связи с тем, что указанные требования остались без удовлетворения, истец  обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.  

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о совершении ответчиком действий,  направленных на урегулирование спора и выполнение требований указанной претензии до  момента принятия иска к производству, а также до принятия решения по существу спора,  в материалах дела отсутствуют.  

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил в связи, с чем суд в порядке  статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает  дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд  приходит к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом,  иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве  основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского  кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.  

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

Анализ материалов дела показывает, что между сторонами сложились  правоотношения, вытекающие из договора подряда, регулируемого главой 37  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Правоотношения сторон вытекают из государственных контрактов на выполнение  подрядных работ для государственных нужд, правовое регулирование которых  предусмотрено главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44- ФЗ).  

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для  удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе  государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской  Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется  выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом  объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену  (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Пунктом 1 статьи 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком  работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или  неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам  соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами  или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику  обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно  предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для  установленного договором использования, а если такое использование договором не  предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.  

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского Кодекса РФ установлено, что в случае, когда  договором подряда предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат  работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о  качестве.  

Согласно п. 4 ст. 720 ГК РФ Заказчик, обнаруживший после приемки работы  отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть  установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об  этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.  

Пунктом 2 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,  что в случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,  связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при  условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня  передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или  обычаями делового оборота.  

Заказчик вправе предъявить требования, в отношении недостатков результата  работы, обнаруженных в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

Согласно абзацу второму статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации  предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724  Кодекса, составляет пять лет.  

О наличии недостатков заказчик известил подрядчика в претензиях от 04.05.2022 г. с  исх. № 622/243-Исх.; от 04.07.2022 г. с исх. № 622/343-Исх.; от 20.07.2022 г. с исх. №  622/388; от 24.08.2022 г. с исх. № 2147/1; от 03.10.2022 г. с исх. № 622/522-Исх. Истец  направил на электронный адрес ответчика требование об устранении недостатков.  Ответчик в ответе на претензию просило представить акт, фиксирующий дефекты, с  предоставлением фото и конкретных причин их возникновения.  

В соответствии с п. 3.1.10 Договора подрядчик обязался в гарантийный срок 36  месяцев, с момента принятия работ, устранять выявленные недостатки. Выявленные в  течение гарантийного срока недостатки должны быть устранены в течение 10 дней с  момента получения претензии от Заказчика.  

В соответствии с п. 4.12. Договора гарантийный срок по качеству выполненных  работ и использованных материалов составляет не менее 24-х месяцев с даты подписания  сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение  Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков,  выявленных после приемки Работ.  

01.12.2021 работы приняты и переданы согласно актам о приемке выполненных  работ № 1, 2.  

О наличии недостатков заказчик известил подрядчика в пределах двухлетного срока,  предусмотренного пунктом 2 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик  несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного  срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или  его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его  эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими  лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или  привлеченными им третьими лицами.  

Бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные недостатки выполненных  работ являются следствием неправильной эксплуатации объекта строительства, либо  последствием нормального износа и иных обстоятельств, лежит на ответчике, как  подрядчике (статья 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 65, 68  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в  случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда,  ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не  пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в  договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования,  заказчик вправе, если иное не установлено, законом или договором, по своему выбору  потребовать от подрядчика:  

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика  устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).  

Материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом.  

В нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации ответчик не доказал соответствие объекта строительства установленным  требованиям, а также не подтвердил наличие в настоящем случае обстоятельств,  являющихся основанием для освобождения его от ответственности (п. 2 ст. 471  Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 7 ст. 7 Закона N 214-ФЗ).  

Ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы ответчиком также  не заявлено.  

В соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения  или несовершения ими процессуальных действий.  

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

С учетом изложенного, исследовав и оценив представленные в материалы дела  документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части  обязания ответчика выполнить работы по устранению недостатков, допущенные при  выполнении работ по договору № 32110204635 от 02.06.2021 при этом учитывая  заявленный истцом срок устранения недостатков истек, суд считает возможным  установить срок устранения недостатков в течении 30 дней со дня вступления в силу  решения суда.  

Истец также просит взыскать штраф в размере 912 721, 95 рублей за ненадлежащее  исполнение обязательств.  

В п. 7.1 Договора стороны предусмотрели, что за ненадлежащее исполнение  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки  исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства)  предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной  суммы - 10 процентов цены Договора, что составляет 912 721 (девятьсот двенадцать тысяч  семьсот двадцать один) руб. 95 коп.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской  Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и  другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Учитывая установленным факт ненадлежащего исполнения обществом с  ограниченной ответственностью "КлимовЪ" обязательств, предусмотренных договором №  32110204635 от 02.06.2021, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению  требование истца о взыскании штрафа в размере 912 721, 95 рублей.  

Истцом уплачена государственная пошлина в доход федерального бюджета в  размере 27 254 рублей по платежному поручению № 558 от 03.03.2023 на сумму 21 254  рублей и платежным поручением № 441 от 22.02.2023 на сумму 6 000 рублей.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в  сети «Интернет».  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в  общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу:  www.kad.arbitr.ru.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "КлимовЪ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица 27.11.2020  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха  (Якутия), находящегося по адресу: 677009, 

<

...>) своими силами и за свой счет в течении 30 дней со дня  вступления в силу решения суда выполнить следующие работы в целях устранения  

недостатков капитального ремонта, выполненных по Договору № 32110204635 от  02.06.2021, выявленные в период действия гарантийных обязательств по адресу г. Якутск,  село Хатассы, улица.Каландрашвили 4/2:  

1 этаж: 

- комната мясозаготовки площадью 40 м² (помещения № 36; 38) - устранить  отслоение от стен облицовочной керамической плитки;  

- кухня площадью 47 м² (помещение № 42) - устранить отслоение от стен  облицовочной керамической плитки;  

- моечная площадью 25 м² (помещение № 44) - устранить отслоение от стен  облицовочной керамической плитки;  

- тамбур площадью 33,5 м² (помещение № 31) - устранить отслоение от стен  облицовочной керамической плитки;  

- в коридоре устранить провисание подвесных потолков "Амстронг".  2 этаж:  

- в смотровой-ординаторской (помещение № 1) - устранить отслоение  водоэмульсионной краски потолка площадью 14,9 м²;  

- в коридоре (помещение № 6) устранить трещину и отслоение водоэмульсионной  краски стены площадью 1 м²;  

- в коридоре устранить провисание подвесных потолков "Амстронг".  3 этаж:  

- кабинет логопеда (помещение № 6) - устранить отслоение водоэмульсионной  краски потолка протяженностью 2,5 м, шириной до 30 см;  

- в коридоре (помещение № 7) – устранить трещину и отслоение облицовочной  плитки пола площадью 2 м².  

Наружная торцевая лестница с правой стороны: 

- устранить дефекты облицовки ступеней и лестничных маршей керамической  плиткой (исправить неровную затирку плитки).  

Внутри здания 2 лестницы (с 1 по 3 этаж): 

- устранить различную высоту ступеней лестничных маршей (выполнить одной  высоты);  

- устранить дефекты облицовки ступеней и лестничных маршей керамической  плиткой (повторно произвести облицовку).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КлимовЪ"(ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица  27.11.2020 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Республике  Саха (Якутия), находящегося по адресу: 677009, 

<

...>)  в пользу государственного автономного учреждения  Республики Саха (Якутия) "Якутская городская больница № 3" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица 17.06.2004  Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Якутску  Республики Саха (Якутия), находящегося по адресу: 677010, 

<

...>) 912 721, 95 рублей штраф за ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных п. 7.1 Договора, а также 27 254 рубля расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 22:40:00

 Кому выдана Семёнова Ульяна Николаевна