Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

15. 10. 2019 года.                                            Дело № А40-167478/19-43-1532

Резолютивная часть решения объявлена 08. 10. 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 15. 10. 2019 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " СтройМонтажМеханизация " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " ИСК "Аванти СтройГрупп " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 486 285 руб. 17 коп. – долга, пени,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 20.08.2019 г., от ответчика – не явился.

Изучив, имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск  заявлен о взыскании 1 486 285 руб. 17 коп. – долга, пени, на основании статей 15, 636, 711 ГК РФ. 

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении и в письменном уточнении исковых требований, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между Истцом и ответчиком заключен договор № 18/61 от 01 июня 2018г.

В соответствии с договором № 18/61 от 01 июня 2018г. между ООО «ИСК «Аванти СтройГрупп» и ООО «СтройМонтажМеханизация» (Заказчик) (ООО «ИСК «Аванти СтройГрупп» - Ответчик) в течение 10-ти банковских дней следующего за отчётным месяца производит оплату за работу автокранов один раз в месяц, из расчёта стоимости 1 маш/часа умноженного на количество отработанных часов за период, согласно Приложению №1. 

Однако, Заказчик свои обязательства не выполнил, задолженность перед Подрядчиком за период с января 2019 по июнь 2019 составляет 1 436 400,00 рублей, включая 20% НДС 239 400,00 рублей. 

Ответчик не удовлетворил требований Истца оплатить долг (Претензии Исх. № 11 от 10.06.2019г.).

Согласно ст. 632 ГК РФ, По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в размере 1 436 400 руб. 00 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. 

Согласно п.2.6. договора, пени за просрочку оплаты составляют: за январь 2019г. с 01 февраля 2019 года и по 21 июня 2019г., составляют 141 сутки просрочки платежа * 0,05% за каждый день просрочки платежа, от неоплаченной в срок суммы, от суммы задолженности 102 333,33 рубля без НДС, что составляет 7214,50 рублей; за февраль 2019г. с 01 марта 2019 года и по 21 июня 2019г., составляют 113 суток просрочки платежа * 0,05% за каждый день просрочки платежа, от неоплаченной в срок суммы, от суммы задолженности 309 333,33 рубля без НДС, что составляет 17 477,33 рублей; за март 2019г. с 01 апреля 2019 года и по 21 июня 2019г., составляют 82 суток просрочки платежа * 0,05% за каждый день просрочки платежа, от неоплаченной в срок суммы, от суммы задолженности 417 333,33 рубля без НДС, что составляет 17 110,67 рублей; за апрель 2019г. с 01 мая 2019 года и по 21 июня 2019г., составляют 67 суток просрочки платежа * 0,05% за каждый день просрочки платежа, от неоплаченной в срок суммы, от суммы задолженности 246 400,00 рубля без НДС, что составляет 6 878,67 рублей;за май 2019г. с 01 июня 2019 года и по 21 июня 2019г., составляют 21 сутки просрочки платежа * 0,05% за каждый день просрочки платежа, от неоплаченной в срок суммы, от суммы задолженности 114 666,67 рубля без НДС, что составляет 1 204,00 рублей; Итого пени в соответствии с п. 2.6. Договора № 18/61 от 01 июня 2018г. составляют 49 885,17 руб.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 49 885 руб. 17 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на Ответчика, в  соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-425, 431-434, 606-608, 610, 614, 632-641 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " ИСК "Аванти СтройГрупп " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " СтройМонтажМеханизация " (ОГРН 

<

***>) 1 486 285 руб. 17 коп., в том числе: 1 436 400 руб. 00 коп. – долга, 49 885 руб. 17 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 27 863 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов