445/2020-10653(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-7577/2019

04 февраля 2020 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при  

ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

ФИО1, рассмотрев после объявленного 28.01.2020 перерыва в открытом  

судебном заседании исковое заявление 

фонда «Региональный оператор Фонда капитального ремонта многоквартирных  

домов Курской области» 

к обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «Мастер Групп»  

об обязании устранить недостатки работ в течение 30 дней с момента вступления  

решения в законную силу, 

третье лицо: Государственная жилищная инспекция Курской области.  В судебном заседании приняли участие представители:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 29.11.2018 № 38,  от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.01.2019,  

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 156, 167-171, 176-177, 180  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Мастер Групп» в  

тридцатидневный срок после вступления решения в законную силу безвозмездно  

устранить недостатки работ, выполненных по договору № КР-058/2016 от 05.08.2016 

строительного подряда по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного  

дома, расположенного по адресу 

<

...>:  

выполнить работы по восстановлению стен фасада дома в удовлетворительное  

техническое состояние, а именно: 

‒ со стороны дворовой части дома по ул. Ленина - 25,46 м2;  ‒ дворовая часть - 18,08 м2;  

‒ устранить отслоение, отпадение штукатурно-покрасочных слоев: крыльцо  дома (стены), а именно:  

‒ вход со двор со стороны ул. Димитрова - 29,12 м2; ‒ в районе ливневой канализации со стороны ул. Димитрова - 3,2 м2; ‒ крыльцо со стороны ул. Ленина - 3,27 м2; 

‒ установить и устранить причину капельных течей в подвальном помещении на  трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 32 длиной 4,7 м в теплоузле, длиной 5,2  метра в подвале под площадкой у входа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Мастер Групп» в  пользу Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных  домов Курской области» 6000,00 руб. расходов, понесенных на уплату государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Ю. Арцыбашева