Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://penza.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А49-2809/2024

17 декабря 2024

 

город Пенза

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2024 года

В полном объеме решение изготовлено 17 декабря 2024 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Болгова С.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хованчук Д.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиал «Пензаэнерго» (ОГРН 

<

***>)

к акционерному обществу «Пензанефтепродукт» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 50 150,53 руб.,

при участии:

от истца – не явились,

от ответчика – представителя по доверенности ФИО1.(до перерыва),

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Пензанефтепродукт» о взыскании неустойки за период с 30.12.2023 по 04.03.2024 в размере 50 150,53 руб., начисленной за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору № 2240-005970 от 05.10.2022, а также неустойки, начисленной с 05.03.2024 по день фактического исполнения обязательств по договору.

Истец явку своего представителя в судебное заседание 19.11.2024 не обеспечил, до судебного заседания представил в суд ходатайство об увеличении исковых требований, в котором просил взыскать с ответчика неустойку за период с 30.12.2023 по 12.09.2024 в размере 177 806,43 руб.

На основании статьи 49 АПК РФ арбитражным судом принято увеличение истцом исковых требований, иск признан заявленным о взыскании 177 806,43 руб.

Ответчик в судебном заседании возражений по исковым требованиям не выразил.

Для проверки расчетов в судебном заседании был объявлен перерыв до 03.12.2024.

После перерыва стороны в судебное заседание не явились.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ арбитражный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между ПАО «Россети Волга» (Сетевая организация) и АО «Пензанефтепродукт» (Заявитель) 05.10.2022 заключен договор № 2240-005970 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Заявителя – ТП-10/0,4кВ для электроснабжения нежилого сооружения АЗС № 9 (заявка № ПЭ000006595 от 22.08.2022г.), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-           максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 292 кВт;

-           категория надежности: 3;

-           класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: 10 кВ;

-           максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт. (п. 1.1 договора).

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1.2 договора).

Точка присоединения - вновь построенная отпаечная ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №9 «Львовская» через РП-10кВ №2 «Первомайская» ПС 110/35/10кВ «Цветочная» - указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) (п. 1.4 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении № 1 к договору. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п.1.5 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня  заключения договора (п.1.6 договора).

В соответствии с п. 2.1 договора Сетевая организация обязалась в течение 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. Не позднее 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 1.6. настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения, и направить его Заявителю.

В соответствии с п.2.2. договора ответчик обязался: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении техническихусловий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Размер платы за технологическое присоединение по договору составляет 303 942,62 руб., в том числе  НДС (НДС-20%) 50 657,10 руб. (пункт 3.2 договора).

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, являющимся Приложением №1 к договору, Сетевая организация осуществляет:

- создание технической возможности в точке присоединения для технологического присоединения энергопринимающих устройств путем выполнения необходимых мероприятий до границы земельного участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) его присоединяемые объекты;

- расчет уставок РЗА по ячейке №9 в РП-10кВ №2 ФИО2 110/35/1 ОкВ «Цветочная» на основании сведений, представленных заявителем в соответствии с п. 11.7.;

- проектирование и строительство отпаечной ВЛ-1 ОкВ от ВЛ-1 ОкВ №9 «Львовская» до границы земельного участка Заявителя. Тип опор, марку провода определяет проектом;

- установку линейного разъединителя на ВЛ-10кВ №9 «Львовская». Тип и место установки определяет проектом;

- проектирование и установку измерительного комплекса учета электроэнергии в соответствии с требованиями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012г.;

- фактическое присоединение энергопринимающих устройств к своим электрическим сетям в точке присоединения, при этом включение мощности будет произведено Пензенским производственным отделением филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» после проведения сетевой организацией проверки выполнения технических условий и оформления акта о выполнении ТУ.

Заявитель осуществляет:

- мероприятия по технологическому присоединению своих энергопринимающих устройств к точке присоединения - вновь построенной отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №9 «Львовская» через РП-10кВ №2 «Первомайская» ПС 110/35/10кВ «Цветочная»;

- проектирование электросетевого хозяйства 0,38-ЮкВ, необходимого объема защиты и автоматики в соответствии с категорийностью, при этом содержание разделов проектной документации должно соответствовать требованиям норм действующего законодательства;

- строительство и монтаж электросетевого хозяйства 0,38-ЮкВ в границах своего земельного участка (в том числе монтаж ВЛ(КЛ)-10кВ от ТП-10/0,4кВ до указанной в п.7 настоящих ТУ точки присоединения, в соответствии с ПУЭ), обеспечивающего технологическое присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с требуемыми параметрами (п.п. 3,4,5 настоящих ТУ).;

- проектирование и установку в соответствии с проектом оборудования, обеспечивающего соблюдение максимального значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети в точке поставки в размере 0,4 согласно требований Приказа Министерства энергетики РФ от 23.06.2015 г. №380.

- проектирование и установку на границе раздела балансовой принадлежности оборудования, обеспечивающего функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- учитывая, что предлагаемая схема электроснабжения объекта от сетей «Пензаэнерго» обеспечивает 3 категорию надежности, при которой перерыв в электроснабжении допускается, согласно ПУЭ (п. 1.2.21) до 24 часов и ежегодный план отключения до 3 суток, для обеспечения надежности электроснабжения энергопринимающих устройств объекта по 2 категории надежности установить независимый источник питания, тип и мощность которого определить проектом. Проектом предусмотреть систему автоматики и блокировки, исключающую параллельную работу с энергосистемой.

- не позднее 10 рабочих дней до уведомления о выполнении технических условий представить Сетевой организации для расчета уставок и настройки РЗА следующие сведения: протяженность ВЛ (КЛ), сечение и марку провода (кабеля), тип и мощность установленных трансформаторов;

- проект электроснабжения согласовывает с Филиалом ПАО «Россети Волга» -«Пензаэнерго» (в двух экземплярах с последующей передачей одного экземпляра в Пензенское производственное отделение) и иными заинтересованными организациями. В проекте предусматривает раздел «Качество электрической энергии», «Релейная защита».

Срок действия ТУ - 2 года со дня заключения договора об осуществлении, технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий).

27.09.2023 года истец направил в адрес ответчика извещение о готовности объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга» к присоединению энергопринимающих устройств объекта - ТП-10/0,4кВ для электроснабжения нежилого сооружения АЗС № 9, расположенной по адресу: 

<

...> на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3014003:4, максимальная мощность 292 кВт, категория надежности III, класс напряжения 10 кВ к сетям ПАО «Россети Волга». (извещение № МР6/124/06/1120 от 27.09.2023 года).

Получение извещения ответчиком не оспаривается.

Дополнительным соглашением № 1 от 04.10.2023 года к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-005970 от 05.10.2022 года стороны согласовали, что мероприятия по технологическому присоединению должны быть осуществлены в срок до 29.12.2023 года (пункт 1.6 договора).

Ссылаясь на то, что уведомление от АО «Пензанефтепродукт» о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках заключенного договора № 2240-005970 от 05.10.2022 г. в адрес сетевой организации поступило только 12.09.2024, и  ответчиком нарушены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные указанным договором, ПАО «Россети Волга» в лице филиала  «Пензаэнерго» обратилось в арбитражный суд с иском к АО«Пензанефтепродукт» о взыскании, с учетом принятого судом увеличения требований, за период с 30.12.2023 по 12.09.2024 в размере 177 806,43 руб.

Ответчик факт нарушения сроков по уведомлению сетевой организации о выполнении им мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям не оспаривает.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27. 12. 2004 года № 861.

В соответствии с пунктами 3, 30, 30.1 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В силу пункта 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в сроки, установленные Правилами. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике и пункты 16, 17 Правил № 861).

Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил № 861 договор о технологическом присоединении должен содержать обязательные условия об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне неустойку по договору.

В соответствии с пунктом 16(6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

По условиям п. 1.6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2240-005970 от 05.10.2022  года (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 04.10.2023 года) мероприятия по технологическому присоединению должны быть осуществлены в срок до 29.12.2023 года (пункт 1.6 договора).

За неисполнение ответчиком обязанности по выполнении им мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, предусмотренных техническими условиями, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 30.12.2023 г. по 12.09.2024 г.

Согласно представленному истцом расчету, ответчику начислена неустойка за период с 30.12.2023 по 12.09.2024 в размере 177 806,43 руб.

В данном случае, требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению арбитражный суд признает обоснованными,  поскольку в силу ст. 330 ГК РФ в случае просрочки исполнения обязательств должник обязан уплатить кредитору определенную денежную сумму, в данном случае – неустойку, размер которой определен в п. 5.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2240-005970 от 05.10.2022 года и составляет 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

В соответствии с частью 1 статьи 112 и частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд решает вопросы распределения судебных расходов.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом изложенного с ответчика в пользу истца полежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 006 руб.

В связи с увеличением суммы исковых требований, государственная пошлина в размере 4 328 руб. полежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчика.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» и может быть направлено на бумажном носителе по их заявлению.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить полностью, судебные расходы отнести на ответчика.

Взыскать с акционерного общества «Пензанефтепродукт» (ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 177 806,43 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 006 руб.

Взыскать с акционерного общества «Пензанефтепродукт» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 328 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья

С.В. Болгов