РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 21 октября 2025 года    

по делу А33-16948/2025 Красноярск  

«21» октября 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления решения суда  

в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к  

электрическим сетям энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя  

ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП:

<

***>)  

по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный  

район, сельское поселение Солонцовский сельсовет, 

<

...> участок  

 № 21 И, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090101:1905, в соответствии с  

условиями договора № 20.2400.3608.24 от 16.04.2024 и техническими условиями №  

8000598996: 

Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  

электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее  

15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются  

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (п.3 Договора). - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 0,40 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  

отсутствует. 

- Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии  

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность  

энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

I точка присоединения: максимальная мощность 150 кВт. Линия(0,4) Проектируемая  

Ячейка РУ (0,4) Л-5 ул. Новая уч.16Б (ФИО2.) ТПТП-134-1-8 ПС ПС 110 кВ Солонцы № 134 

- Основной источник питания: ПС ПО кВ Солонцы № 134. - Резервный источник питания: отсутствует.  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением  

Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.  

- от РУ 0,4 кВ ТП-134-1-8 до границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки линии, марку и сечение провода определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 72 032,05 руб. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.3608.24 от 16.04.2024, рассчитанной за периоды с 17.10.2024 по 21.10.2025, с 22.10.2025 по день фактического исполнения обязательств из расчета 194,68 руб. за каждый день просрочки, а также 25 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку из расчета 2 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня после вступления решения суда в законную силу, по день его фактического исполнения включительно.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья М.Ю. Винокурова