АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432068 

Тел. (8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru. Интернет: http://ulyanovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Ульяновск  08.02.2024 Дело N А72-13555/2023 

Судья Арбитражного суда Ульяновской области В.В.Тимофеев, руководствуясь  ст.ст. 66, 110, 156, 167-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Стройтехпартнёр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в срок в  течении месяца с момента вступления решения суда в законную силу выполнить работы  по устранению строительных недостатков многоквартирного жилого дома № 44г по ул.  Коммунальная в р.п. Николаевка муниципального образования «Николаевский район»  Ульяновской области, а именно:  

по гидроизоляции жилого дома: выполнить ремонт или устроить вертикальную  гидроизоляцию с выполнением следующих сопутствующих работ: демонтаж отмостки,  откопать стены подвала на всю высоту (в зависимости от качества устроенной  гидроизоляции, при ее наличии), выполнить обмазочную гидроизоляцию в соответствии  с проектом, засыпать пазухи, выполнить уплотнение грунта, подготовить основание  отмостки в соответствии с проектом, устроить отмостку;  

для устройства горизонтальной гидроизоляции разработать проектные решения;  

по отмостке: демонтаж отмостки и устройство ее с уплотнением грунта и по  основанию в соответствии с проектной документацией;  

по вентиляции: прочистка вентиляционных каналов; 

по оконным блокам в жилых помещениях: замена оконных блоков с заменой  облицовки внутренних откосов (при демонтаже блоков облицовка внутренних откосов  подлежит демонтажу);  

по оконным блокам в помещениях кухонь: регулировка фурнитуры оконных  блоков в помещениях кухонь квартир жилого дома;  

по отливам: демонтировать отливы и установить с применением нового материала  после затирки швов облицовки;  

по облицовке наружных стен облицовочным кирпичом: выполнить затирку швов  облицовки наружный стен по всей площади облицовки, в том числе и по наружным  откосам оконных проемов;  

по возведению вентиляционных каналов из кирпича: разработать дополнительное  проектное решение;  

по отоплению лестничных клеток и технических помещений в подвале: установить  электроконвекторы в подъездах и в технических помещениях подвала в соответствии с  проектной документацией;  

по канализации: устроить промежуточные колодцы, согласно проектной  документации и на расстоянии не менее, указанном в Таблице 18.2 СП 30.13330.2020.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Специализированный застройщик «Стройтехпартнёр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч)  рублей 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.  Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья В.В. Тимофеев