Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-56094/2021

20 сентября 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ" (196084, Санкт-Петербург город, Московский проспект, дом 107, корпус 3 литер О, эт/пом/ком 2/4-Н/2.6, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО3 по доверенности от 31.03.2021; 

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 09.03.2021; 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – Предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ" (далее – Общество) о взыскании 2554439,25 руб. задолженности по договору субподряда от 27.09.2016 № СГК-16-341/01 (далее – Договор), 170015,33 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.01.2020 по 09.06.2021, а также процентов за пользование чужими денежными средствами за период с даты вынесения судебного акта по день исполнения решения суда, начисляемые на сумму задолженности исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика  возражал против  удовлетворения исковых требований.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, между Обществом (генподрядчиком) и акционерным обществом "монтажное управление № 5" (субподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами работы (далее по тексту – работы) по объектам ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (далее по тексту – Принципал), указанные в приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью, а генподрядчик обязуется принимать работы, фактически выполненные субподрядчиком по Договору в соответствии с проектной документацией, включая сметную часть (далее по тексту - «ПД»), предоставленной ООО «Газпром центрремонт» (далее по тексту – заказчик) и/или принципалом, либо, при отсутствии ПД, сметной документацией (далее – по тексту – «СД») и оплачивать их стоимость субподрядчику. 

По п. 2.1. Договора перечень объектов, объемы и стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему Договору, определяется приложением № 1 к Договору. 

Согласно п. 2.2. Договора срок выполнения работ определяются приложением № 1. При необходимости промежуточные сроки определяются оформленным сторонами календарным планом-графиком выполнения работ. Датой исполнения субподрядчиком обязательств по выполнению работ считается дата подписания сторонами акта приемки объекта из ремонта. 

В соответствии с п. 3.1. Договора стоимость работ, предусмотренных к выполнению п. 1.1. настоящего Договора является приблизительной и составляет 284921555,28 руб. 

В силу п. 6.11 Договора субподрядчик гарантирует (в части выполненных работ) нормальную работу объектов проведения работ в течение срока, предусмотренного отраслевыми нормативными актами. В случае, если гарантийный срок на выполненные работы не предусмотрен отраслевыми нормативными актами, срок гарантии определяется статьей 724 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно п. 7.1.1 договора сдача-приемка выполненных субподрядчиком объема работ по настоящему договору производится не позднее 20 числа отчетного месяца с сопроводительным письмом предъявляет генподрядчику оформленный со своей стороны на бумажном (четыре экземпляра) и электронном носителях пакет документов: акты о приемке выполненных работ (форма КС-2, приложение № 5) с приложением заверенных копий первичных документов, подтверждающих фактические затраты, включенные в акты КС-2.

КС-2 оформляется в формате сметной программы «Гранд-смета»  в формате Exel, с включением стоимости МТР, используемых субподрядчиком для обеспечения данных работ в отчетном месяце. 

В случае использования давальческих материалов поставки генподрядчик для работ в отчетном месяце стоимость давальческих материалов в форме КС-2:

- указывается справочно на основании отчета о вовлечении материалов в производство (приложение № 3.1.) без включения стоимости давальческих материалов  в форму КС-2 или (в зависимости от порядка оформления, принятого заказчиком) указывается по сметной стоимости с последующим исключением (минусом) стоимости давальческих материалов из формы КС-2.

Отчеты о вовлечении материалов в производство:

- «отчет о вовлечении материалов в производство» приложение № 3.1 к настоящему Договору; 

- «отчет о вовлечении материалов в производство, переданных на давальческой основе» приложение № 3.2 к настоящему Договору; 

- «отчет о расходе материалов поставки генподрядчика, переданных путем купли-продажи» приложение № 3.3 к настоящему Договору. 

В случае, если при производстве работ субподрядчиком были использованы МТР поставки генподрядчика, субподрядчик вместе с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) предоставляет расчет на компенсацию стоимости МТР поставки генподрядчика по всей номенклатуре (приложение № 3.1).

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), (приложение № 6), оформлены со своей стороны.

Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) и другие требуемые документы, перечень которых определяется приложениями № 11 и № 12 предоставляются на электронном и бумажном носителях.

Счет-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 169 НК РФ).

Справку о сдаче эксплуатирующей организации  (принципалу) оформленной исполнительной документации на выполненные работы в подписью представителя эксплуатирующей организации (принципала).

Ежемесячно субподрядчик обязан предъявить ответственному представителю генподрядчика журнал производства работ КС-6 (форма КС-6). 

Согласно п. 7.1.2. Договора генподрядчик обязан в течение 15 рабочих дней с даты предоставления акта КС-2 и справки КС-3 с полным комплектом документов, указанных в п. 7.1.1., подписать их и скрепить печатью или дать мотивированный отказ в письменной форме. В случае наличия замечаний субподрядчик обязан в течение 2 дней внести необходимые изменения в документы или предоставить мотивированные возражения в письменном виде. Подписанные акты КС-2 и справки КС-3 в двух экземплярах передаются генподрядчиком субподрядчику, 2 экземпляра остаются у генподрядчика. 

В соответствии с п. 9.2. Договора основанием для взаимных расчетов по настоящему Договору служат следующие документы: счет-фактура субподрядчика с приложением справки КС-3, заполненной на основании подписанного сторонами акта КС-2, счет-фактура генподрядчика за проданные субподрядчику материалы, акт и счет-фактура генподрядчика за оказанные услуги генподрядчика. 

В силу абз. 1 п. 9.8. Договора платежи за выполненные работы производятся генподрядчиком в пределах 97% от стоимости выполненных работ, указанных в справке о стоимости выполненных работ по  форме КС-3, в порядке, предусмотренном п. 9.1. настоящего Договора. Оставшиеся денежные средства в размере 3% от цены работ выплачиваются генподрядчиком после истечения гарантийного срока объекта, предусмотренного пунктом 6.11 настоящего Договора, либо при предоставлении субподрядчиком банковской гарантии на сумму 3% цены работ. Гарант выбирается субподрядчиком по согласованию с генподрядчиком. Окончательный текст банковской гарантии подлежит обязательством согласованию с генподрядчиком.

Согласно абз. 3 п. 9.8. Договора в случае непредставления субподрядчиком банковской гарантии для оплаты оставшейся части цен работ стороны в течение 10 рабочих дней с момента истечения гарантийного срока составляют отдельный акт, которым свидетельствуют отсутствие недостатков, либо подтверждают произведенные удержания, вызванные нарушением гарантийных обязательств субподрядчика. На основании такого акта генподрядчик производит окончательный расчет. 

В силу абз. 4 п. 9.8. Договора стороны подтверждают, что гарантийные обязательства субподрядчика не ограничены суммой денежных средств, составляющей 3% цены работ по настоящему Договору. 

Стороны подписали справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.05.2017 № 1 на сумму 5575710,62 руб., от 30.06.2017 № 2 на сумму 6662332,37 руб., от 31.08.2017 № 3 на сумму 12345812,06 руб., от 30.09.2017 № 4 на сумму 11066340,77 руб., от 30.11.2017 № 5 на сумму 11319443,60 руб., от 31.12.2017 № 5 на сумму 38840115,05 руб. 

Между акционерным обществом "Монтажное управление № 5" (продавцом) и Предпринимателем (покупателем) заключен Договор купли-продажи (уступки права требования) от 05.02.2021 (далее – Договор уступки), по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора следующее имущество Лот № 9 – дебиторская задолженность (право требования на общую сумму 102925459,35 руб. 

Предприниматель, ссылаясь на неоплату Обществом задолженности по договору, обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с пунктом 2 статьи 724 ГК РФ в случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В силу пункта 1 статьи 382 ГК РФ принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно пункту 2 статьи 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт сдачи-приемки работ по Договору подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат от 31.05.2017 № 1 на сумму 5575710,62 руб., от 30.06.2017 № 2 на сумму 6662332,37 руб., от 31.08.2017 № 3 на сумму 12345812,06 руб., от 30.09.2017 № 4 на сумму 11066340,77 руб., от 30.11.2017 № 5 на сумму 11319443,60 руб., от 31.12.2017 № 5 на сумму 38840115,05 руб., подписанными генподрядчиком без возражений по объему и качеству работ. 

Ответчик считает, что денежные средства в размере 3% подлежат оплате только после составления сторонами акта об отсутствии недостатков.

Суд не соглашается с данным доводом, поскольку после истечения гарантийного срока, установленного в пункте 6.11 договора, генподрядчик не предъявил претензии по недостаткам в принятых работах. 

Нарушение субподрядчиком срока выполнения работ не свидетельствует о наличии недостатков в работах, подлежащих устранению по акту, что не является основанием для отказа в подписании акта по пункту 9.8 договора.

Встречный иск Общество не заявило.

Довод ответчика о несогласованности в договоре уступки предмета договора опровергается представленными истцом в материалы дела документами.

Согласно п. 1.2. Договора уступки полный перечень дебиторской задолженности (права требования) с указанием должника, суммы задолженности содержится в приложении № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

В соответствии с п. 3.1. Договора уступки продавец передает имущество (документация в отношении права требования) покупателю по акту приема-передачи не позднее чем через три рабочих дня после полной оплаты имущества по месту нахождения имущества: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

...>. В акт приема-передачи включен перечень дебиторской задолженности с указанием должника, суммы задолженности, а также основания возникновения задолженности. 

Согласно п. 7.1. Договора уступки настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

В п. 11 приложения № 1 к договору купли-продажи дебиторской задолженности от 05.02.2021 «Состав имущества, входящего в Лот № 9 (публичное предложение № 24) указано: ООО «Стройгазконсалтинг» ИНН 

<

***>, сумма задолженности на дату начала торгов: 7337601,02 руб., сумма задолженности на дату заключения договора купли-продажи: 7337601,02 руб. 

В п. 11 акта приема-передачи документов по договору купли-продажи (уступки права требования) указан договор субподряда СГК-16-341/01 от 27.12.2016 и следующие суммы дебиторской задолженности по договор субподряда СГК-16-341/01 от 27.12.2016: 167271,32 руб., 183984,14 руб., 385974,68 руб., 326394,50 руб., 341384,35 руб., 1149430,26 руб., а всего 2554439,25 руб. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о наступлении обязательства Общества по оплате 2554439,25 руб. задолженности.

Исковое требование о взыскании 2554439,25 руб. задолженности суд удовлетвореняет в полном объеме. 

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с п. 48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Истец заявил требования о взыскании 170015,33 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.01.2020 по 09.06.2021, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с даты вынесения судебного акта по день исполнения решения суда, начисляемые на сумму задолженности исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Проверив расчет процентов за период с 23.01.2020 по 09.06.2021, суд признает его верным.

На основании изложенного, суд удовлетворяет названные требования в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ" пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 2554439,25 руб. задолженности, 170015,33 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.06.2021 по день фактического исполнения решения суда, 36622 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.