АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-252053/22-110-1894

г. Москва

19 июня 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 19 июня 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>) к  государственному бюджетному учреждению города Москвы "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА  ВОСТОЧНЫЙ" (105173, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>) о взыскании 292 495,81 руб.,  

при участии: от истца – ФИО3 по дов. от 16.05.2023, от ответчика- не явился, 

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 обратилась с  иском к государственному бюджетному учреждению города Москвы "ЖИЛИЩНИК  РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ" о взыскании 283 106,12 руб. задолженности по договору   № 21-4794005 от 12.10.2021, 9 389,69 руб. пеней.  

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о  времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения  информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте  арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на  основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 17.02.2011г. № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в  редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК  РФ». Иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.  

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные  доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Как усматривается из материалов дела, между индивидуальным  предпринимателем ФИО2 и Государственным бюджетным  учреждением города Москвы «Жилищник района Восточный» был заключен договор   № 21-4794005 от 12.10.2021, согласно которому подрядчик обязуется по заданию  заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по адресу  ул. Главная, д.21 в объеме, установленном в техническом задании, заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях,  предусмотренных договором.  

Согласно пункту 2.1. Договора Стороны согласовали цену Договора, которая  составляет 283 106 (двести восемьдесят три тысячи сто шесть) рублей 12 (двенадцать)  копеек.  

Также Сторонами Договора согласован порядок расчетов за выполненные  работы. Заказчик оплачивает работы по факту всего объема выполненных работ, в  безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ на расчетный  счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими  Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее -  УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной  системы «Портал поставщиков» (далее - АИС «Портал поставщиков») Универсального  передаточного документа в электронной (далее - УПД), в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней (в случае, если лицо, с которым заключается договор, является субъектом  малого и среднего предпринимательства) с даты подписания Заказчиком УПД (п. 2.6.2  Договора).  

Подрядчиком были выполнены работы по Договору, на сумму 283 106 (двести  восемьдесят три тысячи сто шесть) рублей 12 (двенадцать) копеек.  

Исходя из пункта 4.1. Договора, Подрядчик представил Заказчику комплект  отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, а также направил  подписанный УКЭП электронный структурированный УПД посредством АИС «Портал  поставщиков».  

Данное обстоятельство подтверждается Универсальным передаточным  документом № 40 от 31.01.2022. Дата подписания Исполнителем в АИС «Портал  поставщиков» (Информация об электронных подписях) 30.05.2022г. 17:16:26, а также  Актом сдачи-приемки выполненных работ/Акт об исполнении обязательств от  30.05.2022. подписанным сторонами в бумажном виде.  

Исходя из чего, образовалась задолженность за выполненные работы по  Договору в размере 283 106 (двести восемьдесят три тысячи сто шесть) рублей 12  (двенадцать) копеек.  

Данные обстоятельства подтверждаются: 

Универсальным передаточным документом № 43 от 31.01.2022 направленный  Истцом в АИС «Портал поставщиков»;  

Актом сдачи-приемки выполненных работ/Акт об исполнении обязательств от  30.05.2022. подписанным сторонами в бумажном виде  

Ответчик игнорировал подписание УПД, направленного посредством АИС  «Портал поставщиков».  

Таким образом, УПД № 43 от 31.01.2022 был получен Ответчиком, но не  подписан.  

Исходя из п. 4.2. Договора предусмотрено, что после получения от Подрядчика  подписанного УКЭП электронный структурированный УПД и комплекта документов,  предусмотренных Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему  Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям,  

изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, направляет Подрядчику  подписанный УКЭП электронный структурированный УПД, либо информацию о  предоставлении разъяснений относительно выполненных работ, либо информацию о  мотивированном отказе от принятия выполненных работ, или информацию о перечне  выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от  принятия Выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков  Заказчик отклоняет направленный Подрядчиком подписанный УКЭП электронный  структурированный УПД. Подрядчик обязуется в срок, установленный в информации о  перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные  недостатки за свой счет.  

Исходя из п. 1, ст. 720 ГК РФ, Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

В соответствии с п. 2, ст. 314 ГК 2. В случаях, когда обязательство не  предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить  этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен  моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней  со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность  исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами,  условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.  При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого  обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если  иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства  или не явствует из обычаев либо существа обязательства.  

Руководствуясь п. 4 ст. 753 ГК РФ и позицией ВАС (п. 14 Информационного  письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров  по договору строительного подряда"), судьи удовлетворяют иски подрядчиков о  взыскании стоимости работ, выполнение которых подтверждено актами сдачи- приемки, оформленными в одностороннем порядке.  

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в Определении от  24.09.2019 N 305-ЭС19-9109 по делу N А40-63742/2018 подтвердила право подрядчика  требовать оплаты работ, если заказчик не подписал акт и не представил  мотивированных возражений.  

Ввиду выше изложенных обстоятельств, ввиду отсутствия от заказчика  мотивированного отказа от принятия выполненных работ, информации о перечне  выявленных недостатков, а также отклоненного УПД, а также ввиду того, что  договором не определен срок для принятия работы, то УПД должен быть подписан  заказчиком в течение 7 дней с момента его получения от Подрядчика.  

Кроме того подписанный сторонами Акт сдачи-приемки выполненных  работ/Акт об исполнении обязательств от 30.05.2022. в бумажном виде подтверждает  принятие выполненные работ, отсутствие от заказчика мотивированного отказа от  принятия выполненных работ, информации о перечне выявленных недостатков.  

Согласно ст. 4.1. Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Сведения о  юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям  отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным  статьей 4 настоящего Федерального закона, вносятся в единый реестр субъектов малого  и среднего предпринимательства в соответствии с настоящей статьей.  

Исходя из сведений Единого реестра субъектов малого и среднего  предпринимательства ИЭ9965-22-7108931 от 26.10.2022, Истец является субъектом  малого и среднего предпринимательства.  

УПД был направлен посредством АИС «Портал поставщиков» 30.05.2022.  Таким образом, УПД должен быть подписан не позднее 06.06.2022.  

Оплата должна быть осуществлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (в 

случае, если лицо, с которым заключается договор, является субъектом малого и  среднего предпринимательства) с даты подписания Заказчиком УПД (п. 2.6.2  Договора), т.е. не позднее 28.06.2022.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов.  

В силу п. 1. ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях  расторжения договора» указывает, что если к моменту расторжения договора,  исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные  услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного  управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется  согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим  соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга  на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие  договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно  как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день  фактического исполнения обязательства.  

Согласно условиям п. 7.7 Договора, пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня,  следующего после дня стечения установленного Договором срока исполнения  обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Срок, с которого 

установлена ставка  

Размер ставки  рефинансирования  

(%, годовых) 

Документ, в котором сообщена ставка 

с 19 сентября 2022г.  

7,5 

Информационное сообщение Банка России от 16.09.2022  

с 25 июля 2022 г.  

8 

Информационное сообщение Банка России от 22.07.2022  

с 14 июня 2022 г.  

9,5 

Информационное сообщение Банка России от 10.06.2022  

Исходя из количества дней просрочки 122 дня (на 28.10.2022), сума пени  

составляет 

Задолженность 

Период просрочки 

 

Ставка 

Формула 

Неустойка  

 

с 

по 

дней 

 

283 106,12 

29.06.2022  

задолженность на 283 106,12 руб. 

 

283 106,12 

29.06.2022  

24.07.2022  

26 

9.5 

283 106,12 х 26 х 1/300 х 9.5%  

2 330,91 р.  

283 106,12 

25.07.2022  

18.09.2022  

56 

8 

283 106,12 х 56 х 1/300 х 8% 

4 227,72 р.  

283 106,12 

19.09.2022  

28.10.2022  

40 

7.5 

283 106,12 х 40 х 1/300 х 7.5%  

2 831,06 р.  

Сумма пени (неустойки): 9 389,69 руб. 

 

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.  

Кроме того, с ответчика на основании ст.ст. 106, 112 АПК РФ подлежат  взысканию расходы истца на оплату услуг представителя, поскольку их понесение  

подтверждено документально (договор № 10/22-5 от 12.10.2022, п/п № 203 от  01.11.2022).  

Суд, с учетом изложенного, исходя из принципа разумности, временных  затрат, объема и качества оказанных услуг и подлежащих представлению  документов, сложившейся судебной практики, категории спора, удовлетворяет  данное заявление в полном объеме в размере 18 023,28 рублей.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 137-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного бюджетного учреждения города Москвы  "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ" (ОГРН: 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП:  

<

***>) 283 106 руб. 12 коп. задолженности, 9 389 руб. 69 коп. неустойки,  18 023 руб. 28 коп. в возмещение судебных издержек, 8 850 руб. в возмещение  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: А.В. Мищенко