Арбитражный суд

 Западно-Сибирского округа

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тюмень                                                                                                 Дело № А03-11986/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 28 апреля 2025 года

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего                                   Буровой А.А.

судей                                                                  Алексеевой Н.А.

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания с использованием системы веб-конференции помощником судьи Южаковым Ю.А. рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю на решение от 21.10.2025 Арбитражного суда Алтайского края (судья Синцова В.В.) и постановление от 21.01.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Хайкина С.Н., Кривошеина С.В., Павлюк Т.В.) по делу № А03-11986/2024 по заявлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (656043, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Управлению Федерального казначейства по Алтайскому краю (656043, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительным представления от 14.05.2024                   № 17-43-12/3916 в части.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (119435, город Москва, муниципальный округ Хамовники, улица Большая Пироговская, дом 23; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

В судебном заседании путем использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание) участвовали представители:

от Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю - ФИО2 по доверенности от 20.12.2024 № 14-29/27;

от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края – ФИО3 по доверенности от 26.12.2024 № 29/Д/47.

Суд установил:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее – заявитель, Минстрой Алтайского края) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением к Управлению Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее – управление) о признании недействительным представления от 14.05.2024 № 17-43-12/3916 в части пунктов 3-7.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России).

Решением от 21.10.2024 Арбитражного суда Алтайского края, оставленным без изменения постановлением от 21.01.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены частично, признано недействительным представление от 14.05.2024 в части пунктов 3, 4, 6; в удовлетворении остальной части заявленного требования отказано.

В кассационной жалобе, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, управление просит принятые по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению подателя кассационной жалобы, Минстрой Алтайского края в нарушение условий соглашений о предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта не представил в Минстрой России актуализированную государственную программу Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», предусматривающую мероприятия, софинансируемые за счет субсидий из федерального бюджета, а также не исполнены показатели результативности, установленные в целях предоставления субсидий.

Минстрой Алтайского края в возражениях на кассационную жалобу ссылается на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, просит оставить их без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Минстрой России отзыв на кассационную жалобу в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 286 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены принятых по делу решения и постановления судов.

Судами установлено и следует из материалов дела, что на основании приказа                   от 14.02.2024 № 50 управлением в отношении Минстроя Алтайского края проведена выездная проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» за период с 01.01.2021 по истекший период 2024 года (далее – проверка), составлен акт проверки от 01.04.2024, вынесено представление от 14.05.2024, согласно которому установлены нарушения, в том числе:

- в нарушение требований статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 13 Правил предоставления и распределения субсидий                        из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее - Правила № 1710), пунктов 4.3.8.2 соглашений от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, от 24.12.2022 № 069-09-2023-312,                 пункта 4.3.9.2 соглашения от 25.12.2023 № 069-09-2024-021 в Минстрой России                            не представлена государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 517, предусматривающая мероприятия, софинансируемые за счет субсидии и изменения в части мероприятий по строительству                                                  и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, внесенные                          в государственную программу от 31.07.2019 № 297 постановлениями Правительства Алтайского края от 27.06.2022 № 232, от 16.02.2023 № 45, от 29.12.2023 № 544 (пункт 3);

- в нарушение требований статьи 162 БК РФ, пункта 13 Правил № 1710, пункта 4.3.3 соглашения от 24.12.2021 № 069-09-2022-192 в 2022 году не обеспечено достижение значения результата использования субсидии с начала текущего финансового года                        на 1 единицу по показателю «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» из-за необоснованного включения в показатель объекта «Водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край», введенного в эксплуатацию 11.02.2021; сумма средств, подлежащая возврату по указанному нарушению, составила 10 762 791,60 руб. (пункт 4);

- в нарушение требований статьи 162 БК РФ, пункта 16 Правил № 1710, пункта 4.3.7 соглашения от 24.12.2021 № 069-09-2022-192 в отчете о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2023 в показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» включен объект «Водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край», введенный в эксплуатацию 11.02.2021, что повлекло завышение фактически достигнутых значений на отчетную дату в графе «из них с начала текущего финансового года» на 1 единицу (пункт 5);

- в нарушение требований статьи 162 БК РФ, пункта 15 Правил № 1710, пункта 4.3.3 соглашения от 24.12.2022 № 069-09-2023-312 в 2023 году не обеспечено достижение значения результата использования субсидии с даты заключения соглашения на 1 единицу и с начала текущего финансового года на 1 единицу по показателю «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» из-за необоснованного включения в показатель объекта «Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Нижнечуманка Баевского района Алтайского края», строительство которого осуществлялось за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»; сумма средств, подлежащая возврату                             по указанному нарушению, составила 22 928 990 руб. (пункт 6);

- в нарушение требований статьи 162 БК РФ, пункта 16 Правил № 1710, пункта 4.3.7 соглашения от 24.12.2022 № 069-09-2023-312 в отчете о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2024 в показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» включен объект «Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Нижнечуманка Баевского района Алтайского края», строительство которого осуществлялось за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», что повлекло завышение фактически достигнутых значений в графе «с даты заключения соглашения» на 1 единицу и в графе «из них                            с начала текущего финансового года» на 1 единицу (пункт 7).

В соответствии с резолютивной частью представления от 14.05.2024 Минстрой Алтайского края обязан в срок до 01.08.2024 принять меры к возмещению в доход федерального бюджета средств субсидии по нарушению, указанному в пункте 4 представления, в сумме 10 762 791,60 руб., по нарушению, указанному в пункте 6 представления, в сумме 22 928 990 руб. (пункт 1 резолютивной части); принять меры по устранению причин и условий совершения нарушений, указанных в представлении в срок до 01.08.2024 (пункт 2 резолютивной части).

Не согласившись с пунктами 3-7 представления от 14.05.2024, Минстрой Алтайского края обратился в Арбитражный суд Алтайского края с настоящим заявлением.

Применительно к доводам кассационной жалобы, признавая недействительным представление от 14.05.2024 в части пунктов 3, 4, 6, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями БК РФ, Правил № 1710, пришли к выводу о несоответствии указанных пунктов представления от 14.05.2024 требованиям действующего законодательства и нарушении прав и законных интересов Минстроя Алтайского края.

Оставляя без изменения обжалуемые судебные акты, суд округа исходит из доводов кассационной жалобы и конкретных обстоятельств рассматриваемого спора.

В соответствии со статьей 34 БК РФ одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Согласно пункту 1 статьи 132 БК РФ под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В силу подпунктов 3, 7 пункта 1 статьи 162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 179 БК РФ государственными программами Российской Федерации (государственными программами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской Федерации (муниципальных программ), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам субъекта Российской Федерации). Порядки предоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующей программой.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Постановление № 1710).

С 2019 года на территории Российской Федерации реализуется федеральный проект «Чистая вода» (далее - федеральный проект). С 01.01.2021 мероприятия этого федерального проекта осуществляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 62 Постановление № 1710 дополнено новым приложением № 15.2 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения», которые устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы и города Санкт-Петербурга, на софинансирование мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации, по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и (или) предоставлению субсидий местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели в рамках мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях реализации федерального проекта на территории Алтайского края между Минстроем России и Минстроем Алтайского края заключено соглашение от 02.12.2020                № 069-2020-F5001-22 о реализации регионального проекта «Чистая вода (Алтайский край)», обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – соглашение от 02.12.2020).

Во исполнение указанного соглашения Минстрой России и Минстрой Алтайского края заключили соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, от 24.12.2022 № 069-09-2023-312, предметом которых являлось предоставление средств федерального бюджета в виде субсидий в целях реализации федерального проекта «Чистая вода».

Приложением № 2 к соглашению от 24.12.2021  № 069-09-2022-192 стороны согласовали объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,                  а также объекты капитального строительства: «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района Алтайского края», «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Декоративной, 51г микрорайон «Спутник» г. Барнаула», «Строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения в с. Новоегорьевское Егорьевского района», «Реконструкция сетей и объектов водоснабжения                                       в с. Петропавловское Петропавловского района».

Приложением № 4 «Значения результатов использования субсидии» к соглашению от 24.12.2021 № 069-09-2022-192 (в редакции дополнительного соглашения от 30.12.2022             № 069-09-2022-192/6) плановые значения результатов использования субсидии по показателю «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами с нарастающим итогом» на 31.12.2022 в графе «с даты заключения соглашения» - 4 единицы, в графе «из них с начала текущего финансового года» -                        3 единицы.

Фактически в 2022 году за счет средств федерального бюджета, предоставленных                 на основании соглашения от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, завершено строительство по двум объектам: «Строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения                           в с. Новоегорьевское Егорьевского района» и «Реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Петропавловское Петропавловского района».

Приложением № 2 к соглашению от 24.12.2022 № 069-09-2023-312 стороны согласовали объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также объекты капитального строительства: «Строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30, г. Барнаула, Алтайского края», «Реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная заимка, по ул. Соколиной 55», «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Декоративной, 51г микрорайон «Спутник» г. Барнаула», «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района Алтайского края».

Приложением № 4 «Значения результатов использования субсидии» к соглашению от 24.12.2022 № 069-09-2023-312 (в редакции дополнительного соглашения от 08.12.2023 № 069-09-2023-312/3) плановые значения результатов использования субсидии по показателю «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами с нарастающим итогом» на 31.12.2023 в графе «с даты заключения соглашения» - 6 единиц, в графе «из них с начала текущего финансового года» -                         2 единицы.

Фактически в 2023 году за счет средств федерального бюджета, предоставленных на основании соглашения от 24.12.2022 № 069-09-2023-312, завершено строительство объекта «Реконструкция артезианского водозабора по ул. Декоративной, 51г микрорайон «Спутник» г. Барнаула.

Судами также установлено, что между Минстроем России и Минстроем Алтайского края заключены дополнительные соглашения от 15.09.2022 № 069-2020-F5001-22/2,               от 15.09.2023 № 069-2020-F5001-22/5 к соглашению от 02.12.2020, согласно которым в случае фактического перевыполнения в предыдущем периоде плановых значений результата и показателей, предусмотренных Приложениями № 1 и 2, фактические значения результата и показателей за отчетный год увеличивается на количество перевыполненных в предыдущем периоде объектов, в том числе объектов регионального проекта «Чистая вода», построенных и реконструированных (модернизированных)                      без использования средств федерального бюджета.

Проанализировав условия соглашений от 24.12.2021 № 069-09-2022-192 (в редакции дополнительного соглашения от 30.12.2022 № 069-09-2022-192/6), от 24.12.2022                     № 069-09-2023-312 (в редакции дополнительного соглашения от 08.12.2023                                № 069-09-2023-312/3), суды установили, что по показателю результативности «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами с нарастающим итогом» плановое значение определено на 31.12.2022 в графе «из них с начала текущего финансового года» - 3 объекта, на 31.12.2023 в графе «из них с начала текущего финансового года» - 2 объекта, при этом в указанное количество включены объекты как с федеральным источником финансирования, так и с региональным источником финансирования.

11.01.2023 Минстрой Алтайского края предоставил Минстрою России отчет о реализации соглашения от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, включающий информацию                 о реализации в отчетном году объекта «Водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край» (объект реализован                         без использования федеральных средств).

11.01.2024 Минстрой Алтайского края предоставил Минстрою России отчет о реализации соглашения от 24.12.2022 № 069-09-2023-312, включающий информацию о реализации объекта «Строительство централизованной системы водоснабжения                          в с. Нижнечуманка Баевского района Алтайского края» (объект реализован без использования федеральных средств и по другой программе строительства - государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»).

Минстрой России в письме от 27.04.2024 № 24726-ОШ/06, направленном в адрес Правительства Алтайского края, счел обоснованным определение плановых значений показателей результативности использования субсидий по указанным соглашениям и фактически достигнутых значений указанных показателей с учетом объектов питьевого водоснабжения, утвержденных региональной программой, финансируемых за счет средств регионального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства, суды первой и апелляционной инстанций, установив, что в соглашения               от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, от 24.12.2022 № 069-09-2023-312 не вносились изменения, позволяющие в показатели результативности вносить объекты, финансируемые за счет средств краевого бюджета, вместе с тем отраженные                                 в пунктах 4 - 7 представления от 14.05.2024 объекты капитального строительства, построенные за счет средств краевого бюджета, без софинансирования из федерального бюджета, включены в показатели результативности по соглашениям, принимая во внимание, что по результатам проверки управлением не выявлено нецелевого расходования средств федерального бюджета по объектам, включенным в соглашения, все объекты, предусмотренные соглашениями и финансируемые за счет средств федерального бюджета, введены в эксплуатацию в установленные сроки, пришли к обоснованным выводам о несоответствии пунктов 4, 6 оспариваемого представления нормам действующего законодательства и нарушении прав и законных интересов заявителя;                   об отсутствии правовых оснований для возложения на Минстрой Алтайского края обязанности по возврату в федеральный бюджет полученной субсидии.

Судами правомерно отмечено, что включение в статистическую отчетность объектов, не финансируемых за счет средств федерального бюджета, при соблюдении условий использования и расходования средств федерального бюджета по предусмотренным соглашениям объектам, не может рассматриваться как не исполнение показателей результативности.

Кроме того, одним из оснований вынесения оспариваемого представления послужили выводы управления о нарушении заявителем пункта 13 Правил № 1710, пунктов 4.3.8.2 соглашений от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, от 24.12.2022                                  № 069-09-2023-312, пункта 4.3.9.2 соглашения от 25.12.2023 № 069-09-2024-021 (пункт 3).

Так, соглашениями от 24.12.2021 № 069-09-2022-192, а также от 24.12.2022                           № 069-09-2023-312, установлено, что субъект обязуется представить актуализированную государственную программу субъекта Российской Федерации, предусматривающую мероприятия, софинансируемые за счет субсидии, в Минстрой России в течение 14 дней              с момента принятия соответствующего нормативного правового акта субъекта.

В соответствии с пунктом 13 Правил № 1710 предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Признавая недействительным пункт 3 представления от 14.05.2024, суды первой и апелляционной инстанций, установив заключение соглашений, определяющих порядок предоставления субсидии, при этом в самих соглашениях не урегулирован порядок предоставления (уведомления, информирования) программ, программы опубликованы на официальных сайтах администрации края в отсутствии замечаний Минстроя России, учитывая, что предусмотренная соглашениями обязанность Минстроя Алтайского края представить в течение 14 дней в Минстрой России актуализированную государственную программу, предусматривающую мероприятия, финансируемые за счет субсидии,                        не отнесена к обязательным условиям в силу Правил № 1710, пришли к верным выводам о соблюдении Минстроем Алтайского края требований пункта 13 Правил № 1710; о недоказанности управлением нарушения заявителем пункта 7 части 1 статьи 162 БК РФ.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены нормы законодательства, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В целом доводы кассационной жалобы сводятся к изложению обстоятельств дела, которые получили надлежащую правовую оценку судов и мотивированно отклонены, не подтверждают нарушений судами норм материального и (или) процессуального права, фактически направлены на переоценку выводов судов нижестоящих инстанций.

Иное толкование подателем жалобы положений действующего законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 АПК РФ), судом кассационной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд округа не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 21.10.2024 Арбитражного суда Алтайского края и постановление от 21.01.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А03-11986/2024 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий                                                               А.А. Бурова

Судьи                                                                                              Н.А. Алексеева

ФИО1