Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                         Дело № А40-53972/17-31-520

Резолютивная часть объявлена 04 апреля 2018 года

Решение изготовлено в полном объеме 26 апреля 2018 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Давледьяновой Е.Ю. (единолично) (с учетом смены фамилии)

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой Ю.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ФГС" (141407, 

<

...> СТРОЕНИЕ 6А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" (129626, 

<

...>, СТР.1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 586 144,82 руб.

по встречному иску ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" (129626, 

<

...>, СТР.1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ООО "ФГС" (141407, 

<

...> СТРОЕНИЕ 6А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 351 601,18 руб. 

с привлечением третьего лица: ООО «ПрофФасад» (141407, 

<

...>)

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФГС" (далее - Истец) обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы к ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" (далее - Ответчик) о взыскании задолженности в размере 3 586 144,82 руб.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме, ссылась на неисполнение ответчиком обязательств по Договорам № Ч170214 от 25.12.2013, № Ч140514 от 28.05.2014, № Ч130514 от 28.05.2014 в части оплаты выполненнных работ.

Представители ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика и третьего лица о дате, месте и времени судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК РФ. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя ответчика в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

При этом суд особо отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является процессуальной обязанностью ответчика.

В определении суда, суд обязывал Ответчика представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ за десять дней до даты судебного заседания.

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ Ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).

Суд, выслушав доводы истца, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «ПрофФасад» (далее - «Третье лицо», «Подрядчик») и ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" (далее - «Ответчик», «Заказчик») были заключены следующие договоры № Ч170214 от 25.12.2013, № Ч140514 от 28.05.2014, № Ч130514 от 28.05.2014 (далее – Договоры).

В соответствии с условиями Договора № Ч170214 от 25.12.2013 Подрядчик  в срок до 10.05.2014 обязался разработать и согласовать конструкторско-монтажную документацию, включающую документацию, изгоовленную на основании геодезической съемки, отражающую фактическую привязку конструкций к  существующему зданию, статический расчет конструкций на несущую способность и ветровые нагрузки (далее –проектная документация) для фасада малоэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО, Красногорский район, вблизи поселка Отрадное, коттеджный поселок «EtudeFamilyClub» многоквартирный жилой дом № 2 (далее - Объект), а также изготовить и осуществить монтаж конструкций в соответствии с разработанной проеткной документацией, а Заказчик – принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора в соответствии с п.2.1 составляет 9 447 343,40 руб.

Расчеты по Договору в соответствии с п.п. 6.2, 6.3 производятся в следующем порядке: первый аванс в размере 4 023 990,36 руб. подлежит оплате в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора при условии получения от Подрядчика счета на оплату; второй аванс в размере 4 023 990,36 руб. – в течение 14 рабочих дней после получения Подрядчиком первого авансового платежа 

Окончательный расчет по Договору производится за фактичсеки выполненные работы в течение пяти рабочих дней с даты подписания сторонами Актов выполннных работ (КС-2, КС-3) за вычетом ранее оплаченного аванса (п.п. 6.4, 6.5 Договора).

В соответствии с условиями Договора № Ч140514 от 28.05.2014 Подрядчик  в обязался разработать и согласовать конструкторско-монтажную документацию, включающую документацию, изгоовленную на основании геодезической съемки, отражающую фактическую привязку конструкций к  существующему зданию, статический расчет конструкций на несущую способность и ветровые нагрузки (далее –проектная документация) для фасада малоэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО, Красногорский район, вблизи поселка Отрадное, коттеджный поселок «EtudeFamilyClub» многоквартирный жилой дом № 4 (далее - Объект), а также изготовить и осуществить монтаж конструкций в соответствии с разработанной проеткной документацией, а Заказчик – принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора в соответствии с п.2.1 составляет 9 447 343,40 руб.

Расчеты по Договору в соответствии с п.п. 6.2, 6.3 производятся в следующем порядке: 50% от общей стоимости проектной документации и 50% от общей стоимости конструкций в сумме 4 023 990 руб. подлежат оплате в течение пяти рабочих дней с даты направления Подрядчику уведомления о готовности Объекта к выполнению, оставшиеся 50% - в течение 14 рабочих дней после получения Подрядчиком авансового платежа.

Оплата работ монтажа констуркций производится Заазчиком в течение пяти рабочих дней с даты подписания сторонами Актов выполннных работ (КС-2, КС-3) (п.п. 6.4, 6.5 Договора).

В соответствии с условиями Договора № Ч130514 от 28.05.2014 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 26.01.2015 Подрядчик  в обязался разработать и согласовать конструкторско-монтажную документацию, включающую документацию, изгоовленную на основании геодезической съемки, отражающую фактическую привязку конструкций к  существующему зданию, статический расчет конструкций на несущую способность и ветровые нагрузки (далее –проектная документация) для фасада малоэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО, Красногорский район, вблизи поселка Отрадное, коттеджный поселок «EtudeFamilyClub» многоквартирный жилой дом № 3 (далее - Объект),  изготовить и осуществить монтаж конструкций в соответствии с разработанной проеткной документацией,  а также выполнить дополнительные работы, предусмотренные в п.1 Дополнительного соглашения № 2 от 26.01.2015, а Заказчик – принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора в соответствии с п.2.1 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 26.01.2015 составляет 12 022 003,66 руб.

Расчеты по Договору в соответствии с п.п. 6.2, 6.3 производятся в следующем порядке: 50% от общей стоимости проектной документации и 50% от общей стоимости конструкций в сумме 4 023 990 руб. подлежат оплате в течение пяти рабочих дней с даты направления Подрядчику уведомления о готовности Объекта к выполнению, оставшиеся 50% - в течение 14 рабочих дней после получения Подрядчиком авансового платежа.

Оплата работ монтажа конструкций производится Заазчиком в течение пяти рабочих дней с даты подписания сторонами Актов выполннных работ (КС-2, КС-3) (п.п. 6.4, 6.5 Договора).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Впоследствии между ООО «ПрофФасад» (далее - «Третье лицо», «Подрядчик»), ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" (далее - «Ответчик», «Заказчик») и ООО "ФГС" (далее – «Истец», «Новый подрядчик») были заключены Соглашения от 12.10.2015, по условиям которых ООО «ПрофФасад» передало ООО "ФГС" принадлежащие ему права и обязанности к Заказчику ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" по Договорам № Ч170214 от 25.12.2013, № Ч140514 от 28.05.2014, № Ч130514 от 28.05.2014.

Пунктом 1.2 указанных Соглашений прдусмотрено, что на дату подписания указанных Соглашений обязательства по Договорам № Ч170214 от 25.12.2013, № Ч140514 от 28.05.2014, № Ч130514 от 28.05.2014 выполнены ООО «ПрофФасад» в полном объеме, при этом задолженность ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" по оплате выполненных в рамках данных Договоров работ составила 400 516,58 руб. (по Договору № Ч170214 от 25.12.2013), 33 114,98 руб. (по Договору № Ч140514 от 28.05.2014) и 26 342,28 руб. (по Договору № Ч130514 от 28.05.2014).

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из представленных в материалы дела двусторонне подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ КС-2, КС-3 № 1123-01 от 23.11.2015 (по договору № Ч140514 от 28.05.2014) и № 1123-02 от 23.11.2015 (по договору № Ч130514 от 28.05.2014) ООО "ФГС" были выполнены работы, а Ответчиком данные работы приняты.

Однако в нарушение принятых по указанным Договорам оябазтельств, оплата выполненых работ не была произведена Ответчиком в полном объеме, общая сумма здолженности составила 586 144,82 руб., из которой: 400 516,58 руб. – по Договору № Ч170214 от 25.12.2013; 144 240,32 руб. – по Договору № Ч140514 от 28.05.2014; 41 387,92 руб. -* по Договору № Ч130514 от 28.05.2014).

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 17/02/16 от 17.02.2016 с требованием незамедлительно произвести погашение задолженности в размере 586 144,82 руб.

Требование истца исполнено не было, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик доказательств оплаты стоимости выполненных работ в полном объеме в адрес истца и суда не направил, факт того, что неисполнение обязательства явилось следствием непреодолимой силы не подтвердил, что может являться подтверждением не исполнения обязательств по договору и действующему законодательству.

При указанных обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310, 330, 702, 711, 746, 753 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ЗАО "ЭЛИТ СТАНДАРТ" (129626, 

<

...>, СТР.1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ФГС" (141407, 

<

...> СТРОЕНИЕ 6А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) долг в размере 586 144,82 руб. (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто сорок четыре рубля восемьдесят две копейки), а также расходы по государственной пошлине в размере 14 723 руб. (Четырнадцать тысяч семьсот двадцать три рубля).

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

СУДЬЯ

Е.Ю. Давледьянова