АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-66743/2023-83-393

г. Москва

16 июня 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 июня 2023 г. Полный текст решения изготовлен 16 июня 2023 г. 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83393), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску ООО "Нефтьпромсервис" (ИНН 

<

***>) к  ООО "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору поставки  от 25.12.2018 в размере 97 757 931 руб. 49 коп.,  

по встречному иску ООО "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>) к ООО "Нефтьпромсервис"  (ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 73 458 122 руб. 69 коп. и 37 993,42 евро  по курсу ЦБ РФ на дату оплаты,  

при участии: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.02.2023, от ответчика – ФИО3 по доверенности № 252/22 от 28.12.2022, 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Нефтьпромсервис" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с иском к ООО "ДорСтройСистем" (далее – ответчик) о взыскании задолженности в  размере 97 757 931 руб. 49 коп.  

К производству, для совместного рассмотрения с первоначальным иском судом принят  встречный иск ответчика к истцу о взыскании неустойки в размере 73 458 122 руб. 69 коп. и  37 993,42 евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.  

Истец явку обеспечил, заявленное требование поддержал в полном объеме, возражал  относительно удовлетворения требования по встречному иску.  

Ответчик явку обеспечил, заявленное по встречному иску требование поддержал в  полном объеме, возражал относительно удовлетворения требования истца по  первоначальному иску.  

Протокольным определением от 13.06.2023 судом отказано в принятии уточнений истца  в части заявления требования о взыскании неустойки в размере 159 025 118 руб. 79 коп. со  ссылкой на разъяснения, содержащиеся в абзаце третьем пункта 26 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 "О применении Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой  

инстанции", поскольку в заявлении об уточнении исковых требований истцом были  предъявлены новые, ранее не заявленные по иску требования, что не является уточнением  размера исковых требований в соответствии с нормами Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Суд отмечает, что истец не лишен возможности обратиться в суд с самостоятельным  иском с требованием о взыскании соответствующей неустойки.  

Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства, суд приходит к  следующим выводам.  

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из  представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений  (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 АПК РФ).  

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Судом при рассмотрении дела установлено и сторонами не оспаривалось, что  25.12.2018 между истцом (поставщиком) и ответчиком (покупателем) был заключен договор  поставки товара, выполнения работ/оказания услуг, условия поставки, условия выполнения  работ/оказания услуг определяются условиями договора и дополнительными соглашениями к  нему.  

Также судом установлено, что сторонами подписаны дополнительные соглашения № 1  от 25.12.2018, № 2 от 21.01.2019, № 3 от 27.05.2019, № 4 от 20.08.2019, № 5 от 17.01.2020, № 6  от 17.01.2020, № 7 от 14.02.2020, № 7/1 от 20.02.2020, № 8 от 27.04.2020, № 9 от 27.04.2020, №  10 от 15.09.2020, № 11 от 23.09.2020, № 12 от 23.09.2020, № 13 от 17.11.2020 к договору, а  также спецификации к дополнительным соглашениям.  

Истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате  встречного исполнения, последний, с учетом условия пункта 6.1 договора, следует считать  наступившим.  

Задолженность в заявленном размере формируется из расчета 71 716 853 руб. 99 коп. +  25 843 300 руб. 38 коп. + 197 777 руб. 12 коп.  

В отношении задолженности в размере 71 716 853 руб. 99 коп.  

Факт исполнения обязательств по договору и дополнительным соглашениям обоснован  истцом товарными накладными и актами, подписанными сторонами в отсутствие разногласий.  

Дополнительно представлен акта сверки взаиморасчетов за период: 1 полугодие 2022 г.  с указанием размера признанной на 30.06.2022 задолженности в размере 88 221 303 руб. 26  коп., соответствующий акт подписан главным бухгалтером. В то же время, при  непредставлении ответчиком надлежащих доказательств, свидетельствующий о том, что  подписание актов взаимных расчетов с контрагентами не входило в круг служебных  обязанностей главного бухгалтера оснований для признания соответствующего доказательства  ненадлежащим у суда не имеется.  

Также представлены платежные поручения о частичном погашении задолженности. 

В отношении задолженности в размере 25 843 300 руб. 38 коп.  

Истцом в обоснование размера задолженности представлены товарные накладные и  акты, подписанные в одностороннем порядке, которые по мнению истца являются  корректировочными. Таким образом, учитывая изменения, внесенные дополнительным  соглашением № 9 в спецификации №№ 1-4 к дополнительному соглашению № 2, стоимость  поставленной продукции и оказанных сопутствующих услуг в 2019 г. подлежат изменению.  

Товарные накладные и акты получены ответчиком 04.05.2023 (РПО №  10737039005306).  

Также произведена корректировка задолженности в отношении поставленного товара,  стоимость которого согласована в евро.  

Стоимость такого товара составляет 22 607,75 евро, и корректируется сторонами на  последнее число каждого месяца, исходя из текущего курса евро.  

Поскольку на момент подачи иска (28.02.2023) курс евро определялся из расчета 79,623  руб. за 1 евро, в то время как по состоянию на 30.04.2023 курс евро определялся из расчета  88,3712 руб. за 1 евро, задолженность увеличилась на 197 777 руб. 12 коп., исходя из расчета  1 997 874 руб. - 1 800 096 руб. 88 коп.  

Ответчиком отзыв не представлен, по существу доводов встречного иска, позиция истца  не оспаривается, в то же время указано на просрочку исполнения последним договорных  обязательств.  

Так ответчиком произведено начисление неустойки: 

1. по дополнительному соглашению № 1 (пункт 24), с учетом подписания  дополнительных соглашений № 7/1 и № 11, которыми внесены изменения в сроки поставки  товара и выполнения работ, в размере 44 374 425 руб. 96 коп., в том числе:  

1.1. за период с 14.05.2019 (авансовый платеж по поручению № 131 от 13.02.2021 +3  месяца, срок поставки товара) по 20.02.2020 (дата подписания дополнительного соглашения №  7/1);  

1.2. за период с 28.07.2019 (авансовый платеж по поручению № 952 от 27.06.2019 +1  месяц, срок выполнения работ) по 20.02.2020 (дата подписания дополнительного соглашения   № 7/1);  

1.3. за период с 21.02.2020 (авансовый платеж по поручению № 131 от 13.02.2019 +4  месяца, срок поставки товара, а также распространение на взаимоотношения сторон  дополнительного соглашения № 11) по 31.07.2020 (поставка истцом товара по накладной №  59);  

1.4. за период с 21.02.2020 (распространение на взаимоотношения сторон  дополнительного соглашения № 11) по 20.11.2020 (подписание акта № 120).  

2. по дополнительному соглашению № 2 (пункт 24) в размере 25 636 186 руб. 13 коп., в  том числе:  

2.1. по спецификации № 1 за период с 24.06.2019 (авансовый платеж по поручению №  525 от 24.04.2019 + 60 дней) по 01.10.2019 (частичное исполнение обязательств по поставке –  товарная накладная № 82 от 31.05.2019 и выполнению работ – акт № 129 от 01.10.2019, при  этом, в полном объеме обязательства не исполнены, недопоставлен товар на сумму 4 692 800  руб. и не выполнены работы на сумму 403 200 руб.);  

2.2. по спецификации № 2 за период с 19.11.2019 (авансовый платеж по поручениям №  950 от 27.06.2019, № 951 от 27.06.2019; № 1355 от 23.08.2019 + 60 рабочих дней) по 24.04.2019  (частичное исполнение обязательств по поставке – товарная накладная № 128 от 01.10.2019 и  выполнению работ – акт № 128 от 01.10.2019, при этом, в полном объеме обязательства не  исполнены, недопоставлен товар на сумму 8 609 320 руб. 69 коп. и не выполнены работы на  сумму 429 828 руб.);  

2.3. по спецификации № 4 за период с 31.08.2019 (авансовый платеж по поручениям №  1357 от 23.08.2019 и № 1457 от 27.08.2019, при согласованных сроках монтажных работ до  15.09.2019 и пусконаладочных работ до 30.11.2019) по 25.04.2023 (частичное исполнение  обязательств по выполнению проектных работ – акт № 130 от 10.10.2019, монтажных работ –  акт № 140 от 11.12.2019, пуско-наладке – не выполнены, при этом, в полном объеме  обязательства не исполнены, не выполнены проектные работы на сумму 3 704 676 руб.,  монтажные работы на сумму 206 276 руб., а также пусконаладочные работы на сумму 957 580  

3. по дополнительному соглашению № 4 (пункт 24) в размере 2 405 416 руб. 68 коп. и  8 478,59 евро, в том числе:  

3.1. по спецификации № 1 за период с 10.01.2020 (авансовый платеж по поручениям №  1794 от 30.09.2019, № 1795 от 30.09.2019, № 1796 от 30.09.2019 + 70 дней) по 26.04.2023  (встречные обязательства истцом не исполнены;  

3.2. по спецификации № 2 за период с 04.07.2020 (авансовый платеж по поручениям №  1793 от 30.09.2019, № 327 от 24.04.2020, № 325 от 24.04.2020 + 70 дней) по 26.04.2023  (встречные обязательства истцом не исполнены);  

3.3. по спецификации № 3 за период с 04.10.2019 (авансовый платеж по поручению №  1787 от 27.09.2019 + 7 дней, исходя из положений пункта 2 статьи 314, пункта 1 статьи 457 и  разъяснений, изложенных в пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением  положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" (далее –  Постановление № 18)) по 01.07.2020 (исполнение обязательств по поставке – накладная № 104  от 01.07.2020);  

3.4. по спецификации № 4 за период с 15.05.2020 (авансовый платеж по поручениям №  2417 от 18.12.2019, № 326 от 24.04.2020 + 20 дней) по 20.03.2023 (исполнение обязательств по  поставке – накладная № 4 от 20.03.2023);  

3.5. по спецификации № 5 за период с 19.11.2019 (авансовый платеж по поручению №  2029 от 29.10.2019 + 20 дней) по 25.04.2023 (встречные обязательства истцом не исполнены);  

3.6. по спецификации № 6 за период с 12.10.2019 (авансовый платеж по поручению №  1827 от 03.10.2019 + 7 дней, исходя из положений пункта 2 статьи 314, пункта 1 статьи 457 и  разъяснений, изложенных в пункте 7 Постановления № 18) по 24.01.2020 (исполнение  обязательств по поставке – накладная № 16 от 24.01.2020).  

4. по дополнительному соглашению № 5 (пункт 24) в размере 141 768 руб. и 171,60  евро, в том числе:  

4.1. по спецификации № 1 за период с 15.02.2020 (дата подписания дополнительного  соглашения № 5 + 4 недели) по 21.02.2020 (исполнение обязательств по поставке – накладная   № 14 от 21.02.2020);  

4.2. по спецификации № 2 за период с 16.06.2020 (авансовый платеж по поручению №  447 от 08.05.2020 + 25 рабочих дней) по 06.04.2023 (встречные обязательства истцом не  исполнены), применено ограничение 20%.  

5. по дополнительному соглашению № 7 (пункт 24) в размере 168 394 руб. 32 коп. и  29 343,23 евро, в том числе:  

5.1. по спецификации № 1 за период с 17.07.2020 (авансовый платеж по поручению №  446 от 08.05.2020 + 3 рабочих дня) по 30.06.2021 (исполнение обязательств по поставке –  накладная № 20 от 30.06.2021);  

5.2. по спецификации № 2 за период с 15.05.2020 (авансовый платеж по поручению №  444 от 08.05.2020 + 8-10 недель) по 18.05.2020 (исполнение обязательств по поставке –  накладная № 57 от 18.05.2020).  

6. по дополнительному соглашению № 12 (пункт 24), спецификации № 1 в размере  731 931 руб. 60 коп., за период с 13.03.2021 (авансовый платеж по поручениям № 553 от  24.02.2021 и № 578 от 02.03.2021 + сроки, определенные пунктом 1.6 спецификации) по  06.04.2020 (встречные обязательства истцом не исполнены).  

Таким образом, размер неустойки составляет 73 458 122 руб. 69 коп. и 37 993,42 евро по  курсу ЦБ РФ на дату оплаты.  

Истцом заявлено о пропуске срока исковой давности, в остальной части требование  истца не оспаривалось, расчеты неустойки по существу не оспорены. Дополнительно заявлено  ходатайство о применении положений статьи 333 ГК РФ и снижения размера неустойки до  

Рассматриваемый договор является смешанным (пункт 3 статьи 421 ГК РФ) и сочетает  элементы договоров поставки (статьи 454, 506, 516 ГК РФ) и подряда (статьи 702, 708, 711,  720, 753 ГК РФ).  

В соответствии с приведенными статьями, обязательственное правоотношение по  договору состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого  договора: обязательства поставщика-продавца (подрядчика) по передаче товара и выполнения  в натуре работ надлежащего качества в согласованный срок и обязательства покупателя  (заказчика) уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой  (статьи 307, 328 ГК РФ).  

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

Из положений статей 711, 720, 753 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 8  информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"  (далее – Информационное письмо № 51) следует, что обязанность заказчика по оплате работ  наступает после сдачи ему результата работ, если иное не предусмотрено договором;  надлежащим доказательством выполнения работ, их стоимости по договору подряда являются  акты приемки выполненных работ.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,  подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ), при этом, согласно абзацу  второму приведенной нормы, доказательством выполнения работ может быть и акт,  подписанный одной стороной.  

Акт, подписанный одной стороной, может быть оспорен заинтересованной стороной в  суде. Суд вправе признать односторонний акт недействительным лишь в случае, если мотивы  отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  

Таким образом, исходя из буквального толкования положений статьи 753 ГК РФ, а  также учитывая разъяснения, изложенные пункте 8 Информационного письма № 51,  оформленный в одностороннем порядке акт является доказательством исполнения  подрядчиком обязательства по договору только при наличии доказательств сдачи последнего  заказчику.  

Факт исполнения обязательств по поставке и выполнению работ в заявленной истцом  части документально подтвержден, ответчиком не оспорен, в отношении объема и качества  выполненных работ, ассортимента, объема и иных условий поставленного товара последним  не представлено, о фальсификации доказательств также не заявлено.  

По смыслу положений статей 2, 7, 8, 9, пункта 10 части 2 статьи 153 АПК РФ  арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет  руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности,  предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий,  оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного  исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного  применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела,  обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в  деле.  

Исходя из положений статьи 9, частей 1, 2 статьи 65, статьи 71 АПК РФ, арбитражный  суд обеспечивает реализацию принципа состязательности сторон спора, оценивает доводы и  возражения участвующих в деле лиц и доказательств, представленных ими в обоснование  своих позиций.  

Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и, с  учетом правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации № 5256/11 от 25.07.2011 по делу № А40- 

38267/2010-81-326, снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности по сбору  доказательств. Приведенное правило содержит и статья 65 АПК РФ, согласно пункту 1  которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Из смысла норм части 2 статьи 9 и части 3 статьи 65 АПК РФ следует, что лица,  участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть  доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений,  перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного  разбирательства  

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ отказ стороны от фактического участия в  состязательном процессе, что может выражаться в непредставлении отзыва на исковое  заявление и доказательств в обоснование своей позиции, неявке в судебное заседание влечет  для стороны неблагоприятные последствия несовершения процессуального действия и  пассивности при реализации своего процессуального права.  

Ответчик, являясь участником арбитражного процесса и неся риск совершения или  несовершения им процессуальных действий, в том числе по представлению доказательств в  материалы дела, документально не опроверг применительно к требованиям статьи 65 АПК РФ  позицию истца.  

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ, ООО "ДорСтройСистем" несет риск  негативных процессуально-правовых последствий несовершения соответствующих действий.  

Аналогичная позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации   № 308-ЭС17-6757 (2, 3) от 06.08.2018 по делу № А22-941/2006, постановлениях Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации № 8127/13 от 15.10.2013 по делу № А4612382/2012 и № 12505/11 от 06.03.2012 по делу № А56-1486/2010.  

Поскольку материалами дела подтверждается факт исполнения договорных  обязательств истцом в спорном размере, при этом доказательств, как опровергающих позицию  истца, так и надлежащего исполнения встречных договорных обязательств – оплате результата  работ в предшествующий обращению истца с иском период или погашении задолженности,  при рассмотрении соответствующего требования в суде, требование ООО "Нефтьпромсервис"  признается судом правомерным и подлежащим удовлетворению.  

В соответствии с пунктом 1 статей 314, 329, 330 ГК РФ кредитор вправе требовать  уплаты предусмотренной соглашением сторон неустойки в случае неисполнения  обязательства в срок, определенный в обязательстве.  

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан арифметически и  методологически выполненным верно.  

Суд при этом считает необходимым отметить, что согласно статье 9.1 Федерального  закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о  банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении  курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе  ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами,  на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 "О  введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен  мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в  отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.  

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 "О  некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 №  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", разъяснено, что в период действия моратория  

проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка  (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 НК РФ), а также  иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория,  к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый  пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия  моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия,  предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего  Федерального закона.  

В абзаце десятом пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве установлен мораторий на  начисление неустоек (штрафы, пени) и иных финансовых санкций за неисполнение или  ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением  текущих платежей.  

В вопросе 10 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с  применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории  Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утвержден  Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) разъяснено, что одним из последствий  введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных  финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных  обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория  (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).  

В статье 2 Закона о банкротстве под денежным обязательством понимается обязанность  должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой  сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации,  бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.  

Из приведенных норм Закона о банкротстве и разъяснений Пленума Верховного Суда  Российской Федерации следует, что в период действия моратория не подлежат начислению  финансовые санкции в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением именно  денежных обязательств и обязательных платежей. В случае, если обязательство носит  неденежный характер, введение моратория не приостанавливает начисление за его  неисполнение или ненадлежащее исполнение санкций.  

В рассматриваемом деле вменяемые ответчику нарушения принятых обязательств по  выполнению работ в установленный договором срок носят неденежный характер, неустойка  начислена за нарушение срока выполнения работ в рамках заключенного договора.  

Таким образом, суд не применяет положения о моратории. 

Поскольку материалы дела не содержат соответствующих доказательств,  свидетельствующих об отсутствии вины в просрочке исполнения обязательства, последние  истцом в материалы дела не представлены, соответствующий довод признается судом  несостоятельным и подлежит отклонению.  

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты  прав по иску лица, права которого нарушены.  

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года  со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.  

В силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по  заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока  исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к  вынесению судом решения об отказе в иске.  

При рассмотрении настоящего дела истцом было сделано заявление о пропуске  ответчиком срока исковой давности.  

Как следует из материалов дела, ответчик обратился в суд с настоящим иском  11.05.2023, согласно входящему штампу суда, подав его через канцелярию.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 202 ГК РФ, пунктом 16 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах,  связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой  давности", течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к  несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том  числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности  приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при  отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.  

При этом, согласно пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 22.06.2021 № 18 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров,  рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства" соблюдение  досудебного порядка урегулирования спора при подаче встречного иска не требуется,  поскольку встречный иск предъявляется после возбуждения производства по делу и  соблюдение такого порядка не будет способствовать достижению целей досудебного  урегулирования (статья 138 ГПК РФ, часть 3 статьи 132 АПК РФ).  

Соблюдение претензионного порядка производилось ответчиком в ходе рассмотрения  судом требования по первоначальному иску.  

Таким образом, в рассматриваемом случае норма пункта 3 статьи 202 ГК РФ не  подлежит применению, поскольку из существа имеющегося между сторонами спора не  следует, что последний возможно урегулировать миром, кроме того, необходимость в  соблюдении претензионного требования по встречному иску не требуется.  

Учитывая применение общего трехлетнего срока исковой давности, представляется, что  требование истца за период, предшествующий 11.05.2020, задавнено.  

В связи с чем, размер неустойки, заявленной в пределах срока исковой давности, не  может превышать 9 062 492 руб. 48 коп. и 37 367,49 евро.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

Правила статьи 333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую  уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.  В соответствии с разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах  применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", неустойка может быть  снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего  заявления со стороны ответчика.  

При этом заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства может быть сделано исключительно при рассмотрении судом дела  по правилам суда первой инстанции.  

Ответчиком было заявлено при рассмотрении спора по существу об уменьшении  размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.  

К последствиям нарушения обязательства могут быть отнесены неполученные истцом  имущество и денежные средства, понесенные убытки, другие имущественные или  неимущественные права, на которые истец вправе рассчитывать в соответствии с  законодательством и договором. При оценке таких последствий судом могут приниматься во  внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям  нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договора и т.д.).  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки  

суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность  неисполнения обязательств и др.  

Как указано в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №  7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации  об ответственности за нарушение обязательств" (далее – Постановление № 7), если должником  является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно  некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности,  снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого  должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6,  пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

Согласно пункту 75 Постановления № 7 при оценке соразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать  преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование  чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

С учетом обстоятельств настоящего дела, компенсационного характера неустойки в  гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности начисленной неустойки  последствиям неисполнения обязательств должником, исходя из периода неисполнения  ответчиком своих обязательств.  

Применительно к положениям статьи 71 АПК РФ, судом произведено снижение  взыскиваемой неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, исходя из применения критерия  разумности, ограничив ее начисление размером задолженности (встречный иск, страница 7 –  таблица, строки 3-5 расчета; страницы 8-9 – таблица; страница 10 – таблицы № 2, № 3;  страница 14 – таблица № 2).  

Таким образом, итоговый размер неустойки, подлежащей взысканию с истца в пользу  ответчика составляет 8 652 842 руб. 13 коп. и 36 960,73 евро.  

Учитывая изложенное, требования истца по первоначальному иску подлежат  удовлетворению в полном объеме, ответчика по встречному иску частичному  удовлетворению.  

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии с  положениями статьи 110 АПК РФ, главы 25.3 НК РФ.  

Абзацем третьем пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если размер заявленной  неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления  ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной  суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая  подлежала бы взысканию без учета ее снижения.  

Правоприменительными положениями пункта 13 информационного письма Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.11.2002 № 70 "О применении  арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее  - Информационное письмо № 70) установлено, что если законом или соглашением сторон курс  и дата пересчета не установлены, суд в соответствии с пунктом 2 статьи 317 ГК РФ указывает,  что пересчет осуществляется по официальному курсу на дату фактического платежа.  

В соответствии с пунктом 16 Информационного письма № 70 при взыскании в  судебном порядке долга в иностранной валюте либо выраженного в иностранной валюте или  условных денежных единицах по правилам пункта 2 статьи 317 ГК РФ, а равно начисленных  

неустойки и (или) процентов цена иска определяется судом в рублях в соответствии с  правилами пункта 2 статьи 317 ГК РФ на день подачи искового заявления.  

Так, при обращении с иском ответчиком произведена оплата госпошлины в предельном  размере 200 000 руб.  

Первоначальные требования ответчика по встречному иску заявлены в размере  76 655 261 руб. 38 коп.  

С учетом приведенных положений, размер неустойки без применения положений  статьи 333 ГК РФ составляет 12 206 959 руб. 29 коп. (9 062 492 руб. 48 коп. + 3 144 466 руб. 81  коп.).  

Таким образом, госпошлина подлежит отнесению на истца в размере 31 849 руб. 

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 170 АПК РФ при полном или  частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части  решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.  

Норма абзаца второго части 5 статьи 170 АПК РФ непосредственно связана со статьей  410 ГК РФ, предусматривающей, что одним из оснований прекращения обязательств является  зачет и применима по аналогии закона (часть 5 статьи 3 АПК РФ) к рассматриваемым  правоотношениям. При этом процессуальные действия по подаче встречных требований,  основанные на одностороннем волеизъявлении, согласуются с гражданско-правовой природой  зачета, для которого тоже достаточно заявления одной стороны.  

Как указано в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о  возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", суд вправе осуществить зачет  судебных издержек, взыскиваемых в пользу каждой из сторон, и иных присуждаемых им  денежных сумм как встречных (часть 5 статьи 3, часть 3 статьи 132 АПК РФ).  

С учетом произведенного зачета, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат  денежные средства в размере 85 719 123 руб. 20 коп.  

На основании статей 1, 8, 12, 307, 309, 310, 314, 329, 330, 331, 333, 421, 454, 506, 516,  702, 708, 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь  статьями 9, 41, 65, 70, 71, 75, 110, 167, 170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с ООО "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО  "Нефтьпромсервис" (ИНН 

<

***>) задолженность в размере 97 757 931 руб. 49 коп., а  также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "Нефтьпромсервис" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО  "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 8 652 842 руб. 13 коп. и 36 960,73  евро по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа, а также расходы по оплате госпошлины в  размере 31 849 руб.  

В связи с наличием взаимных обязательств судом производится зачет удовлетворенных  требований.  

С учетом проведенного судом зачета удовлетворенных требований, взыскать с ООО  "ДорСтройСистем" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "Нефтьпромсервис" (ИНН 

<

***>)  денежные средства в размере 85 719 123 руб. 20 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Эле ктронна я подпи сь дейст вительна . В.П. Сорокин 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.03.2023 10:04:00

Кому выдана Сорокин Владислав Петрович