АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

07 ноября 2024 года Дело № А33-29027/2024 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24 октября 2024 года. 

В полном объёме решение изготовлено 07 ноября 2024 года.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Эколос- 

Проектстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к краевому государственному казенному учреждению "Управление капитального  

строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о продлении срока выполнения работ, в присутствии: 

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 05.09.2024 (до и после  

перерыва) от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 16.02.2024, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Эколос-Проектстрой" (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к краевому государственному  казенному учреждению "Управление капитального строительства" (далее – ответчик) о  продлении срока выполнения работ по контракту № ЭА- № -13347/23 на выполнение  строительно-монтажных и пусконаладочных работ объекта «Очистные сооружения в п.г.т.  Большая Мурта Большемуртинского района» (ИКЗ закупки  232246005076624600100100940014221000) до 01.09.2025.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 18.09.2024  возбуждено производство по делу.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Между государственным предприятием Красноярского края «Центр развития  коммунального комплекса» и обществом с ограниченной ответственностью "Эколос- Проектстрой" (далее - Истец, Подрядчик) на основании протокола подведения итогов  электронного аукциона от 24.08.2023 № 0119200000123013425-2, руководствуясь  Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) был заключен 11.09.2023 Контракт № ЭА- № -13347/23 на выполнение  строительно-монтажных и пусконаладочных работ объекта «Очистные сооружения в п.г.т.  Большая Мурта Большемуртинского района», ИКЗ закупки  232246005076624600100100940014221000 (далее - Контракт).  

Соглашением от 12.03.2024 о перемене заказчика все права и права и обязанности  Заказчика - государственного предприятия Красноярского края «Центр развития  коммунального комплекса» по Контракту перешли к Краевому государственному  казенному учреждению «Управление капитального строительства» (далее - Ответчик,  Заказчик).  

По условиям пункта 1.1 Контракта Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте «Очистные сооружения в п.г.т.  Большая Мурта Большемуртинского района» в сроки, предусмотренные в сроки,  предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложением № 2 к Контракту), который является его неотъемлемой  частью. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием  (Приложение № 1 к Контракту), настоящим Контрактом и утвержденной Заказчиком  проектной документацией (Шифр Э-2021-1) ООО "Эколос-Проектстрой" г. Красноярск, в  том числе: строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, приобретение  монтируемого оборудования.  

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта - срок выполнения работ: со дня заключения  Контракта до 28.10.2024 (включительно).  

Пунктом 2.2 Контракта предусмотрено, что виды и сроки выполнения работ  указываются в графике выполнения строительно - монтажных работ (Приложение № 2 к  Контракту), который уточняется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней  со дня, следующего за днем заключения Контракта в соответствии с техническим  заданием, проектной документацией и условиями настоящего Контракта, согласовывается  с Заказчиком, утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего  Контракта.  

Утвержденный график оформляется дополнительным соглашением, которое вступает  в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон,  возникшие с момента подписания настоящего Контракта.  

Согласно пункту 1.3 Контракта Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять и оплатить результат работ в соответствии с  условиями настоящего Контракта.  

В силу положений пункта 7.1 Контракта для реализации положений настоящего  Контракта Заказчик после заключения Контракта обязуется передать Подрядчику  строительную площадку по акту приема-передачи в порядке, определенном действующим  законодательством Российской Федерации, комплекс работ по строительству которого  является предметом настоящего Контракта. Производит приемку, экспертизу и оплату  работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Контрактом (пункт 7.1.1  Контракта).  

25.03.2024 КГКУ «УКС» заключил с муниципальным образованием поселок Большая  Мурта Большемуртинского района Договор безвозмездного пользования находящимся в  государственной собственности земельным участком из категории земель - земли  населенных пунктов с кадастровым номером 24:008:1802002:139 площадью 49 997 кв. м. с  местоположением: Россия, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая  Мурта, ул. Доброва, 30, -являющимся земельным участком для размещения объекта  строительства по Контракту.  

05.04.2024 КГКУ «УКС» направил истцу Акт передачи земельного участка под  строительную площадку.  

17.04.2024 был подписан со стороны ООО «Эколос-ПроектСтрой» Акт передачи  земельного участка под строительную площадку.  

Истец в исковом заявлении указывает, что 05.04.2024 ответчик реализовал свою  обязанность по передаче строительной площадки истцу, спустя 207 дней с даты  заключения Контракта.  

24.04.2024 КГКУ «УКС» передал истцу проектно-сметную и рабочую документацию  по Акту от 24.04.2024 приёма-передачи утвержденной проектно-сметной и рабочей  документации в производство работ.  

Согласно пункту 7 .1. Контракта, для реализации положений настоящего Контракта  Заказчик обязан передать Подрядчику утвержденную документацию по Объекту и  исходные данные по акту приема-передачи (Приложение № 5 к Контракту). Данные  документы предоставляются Заказчиком Подрядчику в 1 (одном) экземпляре: на  электронном и бумажном носителе в течение 10 (десяти) дней со дня заключения  Контракта. Документация должна быть допущена к производству работ Заказчиком с  подписью ответственного лица путем простановки штампа  

В соответствии с п. 7.3.32. Контракта, для выполнения работ Подрядчик должен  обеспечить наличие на строительной площадке проектной и рабочей документации,  утвержденной к производству работ, специальных журналов работ, приказов о назначении  ответственных лиц.  

Как следует из искового заявления, срок контракта составляет 414 дней (с 11.09.2023  по 28.10.2024).  

Как указывает истец, учитывая, что значительная часть работ предполагает их  выполнение только в период положительных температур наружного воздуха (например,  благоустройство территории с проведение озеленения), окончание срока выполнения  работ по Контракту должно приходиться в большей части на летний период времени.  

Ссылаясь на отсутствие возможности выполнить работы в срок, предусмотренный  контрактом от 11.09.2023 № ЭА- № -13347/23, по причинам, не зависящим от него, истец  обратился в суд с настоящим иском о продлении срока выполнения работ по контракту №  ЭА- № -13347/23 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ  объекта «Очистные сооружения в п.г.т. Большая Мурта Большемуртинского района» (ИКЗ  закупки 232246005076624600100100940014221000) до 01.09.2025.  

Ответчик в отзыве на иск указал, что изменения в части сроков выполнения работ в  контракт от 11.09.2023 № ЭА- № -13347/23 не вносились.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои  гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих  прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих  законодательству условий договора.  

Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и  юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские  права.  

В системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства,  закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при  установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских  обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать  добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или  недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или  недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника  гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.  Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий  предполагаются, пока не доказано иное (пункт 1 Постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами  некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской  Федерации»).  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе,  гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок,  предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не  предусмотренных законом, но не противоречащих ему, вследствие неосновательного  обогащения.  

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными предъявляемыми требованиями.  

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает  недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

Заключенный между истцом и ответчиком муниципальный контракт по своей  правовой природе является договором строительного подряда, взаимоотношения сторон  по которому регламентируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».  

В силу ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В соответствии с положениями статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Согласно п. 1 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).  

Согласно п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса Российской Федерации государственный  или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости  подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке  финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.  

Согласно пункту 2 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации  изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с  обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке  или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.  

Частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что контракт заключается на  условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением  принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о  закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым  заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим  Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять  участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке,  заявка, окончательное предложение не предусмотрены.  

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара,  работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного  товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия  их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также  о порядке и сроках оформления результатов такой приемки (часть 13 статьи 34 Закона №  44-ФЗ).  

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за  исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего  Федерального закона.  

В части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрено общее правило о том, что при  исполнении контракта не допускается изменение его существенных условий, за  исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, перечисленных в пунктах 1  - 7 указанной части.  

Таким образом, системный анализ положений статей 766, 767 ГК РФ, статей 34 и 95  Закона № 44-ФЗ позволяет сделать вывод о том, что сроки выполнения работ по  государственному (муниципальному) контракту являются существенными условиями  контракта, изменение которых возможно строго в случаях, прямо предусмотренных ст. 95  Федерального закона № 44-ФЗ.  

Статья 450 ГК РФ предусматривает исчерпывающий перечень оснований для  изменения и расторжения договора.  

В соответствии со статьей 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны  по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими  законами или договором.  

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по  решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

Согласно пункту 4 статьи 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным  изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях,  когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для  сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения  договора на измененных судом условиях.  

В силу пункта 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о  приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами  или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям,  предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию  заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:  

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения  обстоятельств не произойдет;  

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона  не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;  

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы  соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы  

для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы  того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;  

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск  изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.  

При этом, основанием для изменения договора в силу вышеуказанных правовых норм  является одновременное наличие всех четырех указанных условий. Отсутствие одного из  четырех необходимых условий изменения муниципального контракта влечет отказ в  удовлетворении иска.  

В целях стабилизации экономики и поддержки бизнеса Правительством Российской  Федерации принят ряд антикризисных мер, в том числе принято Постановление  Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения  существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом  которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному  ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению  объектов культурного наследия».  

Пунктом 1 данного Постановления установлено, что при возникновении в ходе  исполнения государственных и муниципальных контрактов (далее - контракт), предметом  которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному  ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению  объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств,  влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения  следующих существенных условий контракта, в том числе:  

а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с  необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт,  срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» ранее изменялся;  

Порядок такого изменения предусмотрен в п. 4 Постановления, согласно которому  поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме  предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации  и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта  соглашения об изменении условий контракта;  

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления  предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам  рассмотрения такого предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)  подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с  Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» информацию об изменении  контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении  существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.  

Вместе с тем, приведенные истцом в качестве обоснования требования об изменении  срока окончания работ по контракту обстоятельства, связанные с невозможностью  исполнить обязательства по контракту в установленный срок ввиду неисполнения  Заказчиком встречного обязательства, не отнесены законодателем к числу безусловных  оснований для изменения сроков выполнения работ по государственному контракту.  

На недопустимость изменения сторонами сроков выполнения работ по  государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и  заключенным в соответствии с ним контрактом, что обеспечивает равенство участников  размещения заказов и свободу конкуренции указано в пункте 9 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.  

Пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что  изменение существенных условий контракта допустимо по соглашению сторон, в том  числе в случае, если контракт, предметом которого является выполнение работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального  строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по  независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его  исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию,  либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается  однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока  исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.  

В части 65.1 статьи 112 Федерального Закона № 44-ФЗ указано, что по соглашению  сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1  января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон  контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.  

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением  положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на основании  решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа  государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при  осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,  муниципальных нужд соответственно.  

Пунктом 9.10. контракта предусмотрено, что изменение существенных условий  контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом № 44-ФЗ.  

Таким образом, при соблюдении совокупности условий, установленных указанными  нормами Закона о контрактной системе, существенные условия контракта, в том числе,  срок исполнения контракта, могут быть изменены исключительно по соглашению сторон  и по причине невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта  обстоятельствам, в том числе по причине необходимости внесения изменений в  проектную документацию.  

Юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению  договора по общему правилу пункта 1 статьи 421 ГК РФ не допускается.  

Оснований для обязания ответчика заключить дополнительное соглашение об  изменении условий контракта, касающегося сроков выполнения работ, предусмотренных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, истцом не представлено.  

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что изменения в части сроков  выполнения работ в контракт от 11.09.2023 № ЭА- № -13347/23 не вносились.  

Таким образом, соглашение об изменении условий контракта - продлении сроков  выполнения работ сторонами не достигнуто.  

Истцом не доказан факт возникновения исключительных обстоятельств,  указывающих на допустимость изменения условий контракта по решению суда по  правилам статьи 451 ГК РФ  

Суд также отмечает, что действующее законодательство о контрактной системе не  предусматривает право подрядчика требовать понуждения заказчика к изменению  условий контракта в части сроков выполнения работ (определение Верховного Суда РФ от  25.04.2022 № 305-ЭС22-4781).  

Вместе с тем доводы общества о невозможности выполнения работ в срок,  установленный контрактом, по причинам, зависящим от Заказчика, подлежат учету и  оценке при рассмотрении вопроса о применении к подрядчику мер ответственности  исходя из положений пункта 3 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 3 статьи  405, пункта 1 статьи 406 ГК РФ. Названный подход отражен в пункте 10 Обзора судебной  практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.  

Аналогичный вывод нашел свое отражение в судебной практике и содержится в  Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2023 по делу   № А06-3430/2023.  

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что обстоятельства,  указанные истцом в качестве оснований для изменения срока окончания работ, не  подпадают под действие пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.  

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства и материалы дела, то, что сторонами не  достигнуто соглашение о продлении сроков выполнения работ по рассматриваемому  контракту, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения  требований истца, в связи с чем отклоняет доводы истца и отказывает в удовлетворении  иска.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Расходы по уплате государственной пошлины с учетом вышеизложенного, результата  рассмотрения настоящего спора и положений статьи 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации относятся на истца.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа (код доступа - ).   

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  

обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в  

Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

Судья С.А. Красовская