АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-4663/2017

г. Чебоксары

02 августа 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2017 года. Полный текст решения изготовлен 02 августа 2017 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи Данилова А.Р.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

администрации Ибресинского района Чувашской Республики,

(

<

...>, ОГРН 

<

***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «Санар-Строй»,

(

<

...>, ОГРН 

<

***>),

о понуждении выполнить строительные работы и взыскании 25392 руб. 51 коп.,

при участии

представителя истца ФИО2 на основании доверенности от 06.06.2017 № 1625, 

установил:

администрация Ибресинского района Чувашской Республики (далее – истец) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» (далее – ООО «Санар-Строй», ответчик) о понуждении выполнить строительные работы и взыскании 25392 руб. 51 коп. пеней за период с 02.12.2016 по 27.12.2016 и с 28.12.2016 по день ввода объекта в эксплуатацию. 

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по муниципальному контракту от 26.01.2016 № 2. 

В отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, указав, что им выполнены работы на сумму контракта. 

Определением от 10.07.2017 судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований, истец просил обязать ответчика выполнить работы, взыскать с него  218647 руб. 76 коп. пеней за период с 01.12.2016 по 19.05.2017 и 822500 руб. штрафа. 

В судебном заседании представитель истца исковые требования уточнил, просил обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу выполнить следующие работы:

1) по разделу кровля:

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 в количестве 881 кв.м.; 

- антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины в количестве 182,367 кг; 

2) по разделу двери:

- замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом в количестве 15 компл.; 

3) по разделу внутренняя отделка:

- оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности в количестве 1436,2 кв.м.;

- обои виниловые моющиеся ZEN в количестве 464,317 кв.м.; 

- обои обыкновенного качества в количестве 1158,589 кв.м.;

- окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза - плинтусов в количестве 41,1 кв.м.; 

4) по разделу полы: 

тип 7

- устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках в количестве 362,3 кв.м.;

плинтуса

- устройство плинтусов цементных в количестве 0,7 м.;

- устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 134,3 м.;

- устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 587,3 м.;

5) по разделу сантехнические работы:

оборудование

- установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным в количестве 15 компл.; 

- подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм в количестве 15 шт.; установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в количестве 16 компл.;

- смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой смешения с аэратором в количестве 16 компл.;

- установка ванн купальных прямых стальных в количестве 15 компл.;

- установка смесителей в количестве 15 шт.;

- смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом в количестве 15  компл.;

- установка моек на одно отделение в количестве 15 компл.;

- смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой смешения с аэратором в количестве 15 компл.;

(вентиляция)

- установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м. в количестве 34 решетки;

- решетка АМР 150x150 (507,75/1,18x1,03/1,98=223,84) в количестве 19 шт.;

- решетка АВР 250x250 (310/1,18x1,03/1,98=136,66) в количестве 15 шт.;

- установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200x200 мм в количестве 1 решетка;

- установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм в количестве 2 решетки.

6) по разделу сети пожарной сигнализации:

- извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический радиоизотопный световой в нормальном исполнении в количестве 53 шт.;

- извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М) в количестве 53 шт.; 

- прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг. по стене кирпичной 110 м.;

- кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической рензины в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x1x0,5 в количестве 110 м.; 

7) по разделу сети радиовещания:

- громкоговоритель или звуковая колонка в помещении в количестве 15 шт.; 

- радиоприемник Нейва РП-221 (756/11,18x1,03/8.15=80,97) в количестве 15 шт.; 

8) по разделу сети телефонизации:

- коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой в количестве 1 коробка;

- коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 в количестве 1 шт.; 

9) по разделу доступ:

- замок кодовый (867,54/1,18x1,03/8,15=92,92) в количестве 1 шт.;

10) металлический шкаф ШМ-1:

- изготовление металлического шкафа в количестве 0,14634 т. конструкций; 

- петли накладные размером 70x55 мм в количестве 6 комплектов;

- монтаж металлического шкафа из полосовой и тонколистовой стали в количестве 0,14634 т. конструкций;

- конструкции стальные в количестве 0,14634 т.;

- замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ в количестве 6 шт.;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в количестве 7,1 кв.м.,

а также взыскать с ответчика 196783 руб. 90 коп. пеней за период с 01.12.2016 по 19.05.2017 и 822500 руб. штрафа по муниципальному контракту от 26.01.2016 № 2. 

Уточнение исковых требований судом принято на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, полномочного представителя в суд не направил.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Согласно статье 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 25.07.2017 по 27.07.2017.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

26 января 2016 года между администраций Ибресинского района Чувашской Республики (заказчик) и ООО «Санар-Строй» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 2, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом все работы в объеме в соответствии с техническим заданием (приложение №1), проектной документацией, с условиями аукционной заявки и контракта по строительству жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность Буинского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики для последующего использования их в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда (пункт 1.1 контракта).

В соответствии с пунктом 1.2 контракта объектами строительства являются жилые помещения (квартиры): общая площадь - не менее 597,49 кв.м., что составляет 15 (пятнадцать) благоустроенных квартир (приложение №1 к контракту).

Место выполнения работ и объем работ определены техническим заданием заказчика (приложение №1 к контракту) и проектной документацией. Адрес объектов строительства, их характеристики могут быть уточнены после окончания строительства многоквартирного дома, в составе которого находятся объекты строительства, и получения разрешения на ввод его в эксплуатацию. При этом площадь объектов строительства уточняется по данным технической инвентаризации (пункт 1.5 договора).    

Срок выполнения работ: срок, в течение которого подрядчик обязан завершить строительств многоквартирного дома, ввести его в эксплуатацию – до 01.12.2016 (приложение № 2 к контракту) (пункт 1.6 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта стоимость работ в соответствии с условиями проведенного аукциона составляет 16450000 руб., без НДС.

Цена контракта на весь период выполнения работ является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) (пункт 2.2 контракта).

Датой окончания выполнения работ по контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту), подтверждением является подписанный сторонами акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством объекта. Окончание выполнения работ по контракту устанавливается контрактом до 01.12.2016 (пункт 3.2 контракта).

Во исполнение условий контракта заказчик платежными поручениями от 17.03.2016 № 522270, от 24.03.2016 № 561881, от 17.06.2016 № 173277, от 17.06.2016 № 173278, от 22.06.2016 № 200419, от 12.07.2016 № 321958, от 04.08.2016 № 441853, от 12.08.2016 № 490352, от 19.08.2016 № 523931, от 30.08.2016 № 569904, от 30.08.2016 № 569903, от 07.09.2016 № 6123379, от 27.09.2016 № 733554, от 06.10.2016 № 789238, от 01.11.2016 № 41291, от 07.11.2016 № 66334, от 24.11.2016 № 179054, от 12.12.2016 № 295877, от 21.12.2016 № 371274, от 21.12.2016 № 371275, от 27.12.2016 № 347432 перечислил на счет ответчика денежные средства в размере 15243936 руб. 54 коп.

Претензионными письмами от 21.09.2016, от 21.11.2016, 02.12.2016 истец просил ответчика ускорить завершение строительства жилых помещений (квартир).

05 апреля 2017 года между заказчиком, подрядчиком и ООО «Строймонтаж» (субподрядчик) заключено дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту от 26.01.2016 № 2, в связи с привлечением подрядчиком к выполнению работ по контракту субподрядчика с объемом работ стоимостью 966029 руб. 88 коп.

Заказчик платежными поручениями от 10.05.2017 № 264818, от 19.05.2017 № 354789 перечислил на счет ООО «Строймонтаж» денежные средства в размере 966029 руб. 88 коп.

Ответчик в предусмотренные муниципальным контрактом сроки работы не выполнил.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по контракту послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

В силу пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

К подрядным работам для государственных нужд применяются общие положения о подряде (пункт 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

На основании пункта 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата работ, выполненных по договору строительного подряда либо выполненного этапа работ, если это предусмотрено договором, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует из материалов дела, предусмотренные муниципальным контрактом от 26.01.2016 № 2 работы ответчиком в полном объеме не выполнены, что подтверждается представленными справками о стоимости выполненных работ и затрат и актами о приемке выполненных работ (т. 1 л.д. 96 – 152, т. 2 л.д. 1 – 63).

Доказательства обратного в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены.

Довод ответчика об отсутствии у него обязанности выполнить работы, поскольку им работы на цену контракта выполнены, судом отклоняется ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 5.2.3 муниципального контракта от 26.01.2016 № 2 подрядчик принял на себя обязательство выполнить все работы по строительству объекта с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В связи с чем, суд признает требование истца о понуждении ответчика выполнить строительные работы подлежащим удовлетворению, как основанное на законе и подтвержденное материалами дела. 

Истец также просит взыскать с ответчика 196783 руб. 90 коп. пеней за период с 01.12.2016 по 19.05.2017 и 822500 руб. штрафа по муниципальному контракту от 26.01.2016 № 2. 

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Пунктом 10.2 контракта предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом: в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику неустойку (штраф, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, рассчитанной по определенной формуле. 

Представленный истцом расчет пеней судом проверен и признан обоснованным в заявленном размере.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063: а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.; б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.; в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.; г) 0,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб. (пункт 10.2 контракта).

Согласно расчету истца сумма штрафа составляет 822500 руб.

Поскольку нормами Закона № 44-ФЗ и условиями контракта исключается возможность начисления штрафа в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, суд правовых оснований для удовлетворения иска в этой части не усматривает.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд учитывает, что администрация Ибресинского района Чувашской Республики освобождена от уплаты государственной пошлины в силу закона. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу выполнить следующие работы:

1) по разделу кровля:

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 в количестве 881 кв.м.; 

- антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины в количестве 182,367 кг; 

2) по разделу двери:

- замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом в количестве 15 компл.; 

3) по разделу внутренняя отделка:

- оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности в количестве 1436,2 кв.м.;

- обои виниловые моющиеся ZEN в количестве 464,317 кв.м.; 

- обои обыкновенного качества в количестве 1158,589 кв.м.;

- окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза - плинтусов в количестве 41,1 кв.м.; 

4) по разделу полы: 

тип 7

- устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках в количестве 362,3 кв.м.;

плинтуса

- устройство плинтусов цементных в количестве 0,7 м.;

- устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 134,3 м.;

- устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 587,3 м.;

5) по разделу сантехнические работы:

оборудование

- установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным в количестве 15 компл.; 

- подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм в количестве 15 шт.; установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в количестве 16 компл.;

- смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой смешения с аэратором в количестве 16 компл.;

- установка ванн купальных прямых стальных в количестве 15 компл.;

- установка смесителей в количестве 15 шт.;

- смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом в количестве 15  компл.;

- установка моек на одно отделение в количестве 15 компл.;

- смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой смешения с аэратором в количестве 15 компл.;

(вентиляция)

- установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв.м. в количестве 34 решетки;

- решетка АМР 150x150 (507,75/1,18x1,03/1,98=223,84) в количестве 19 шт.;

- решетка АВР 250x250 (310/1,18x1,03/1,98=136,66) в количестве 15 шт.;

- установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200x200 мм в количестве 1 решетка;

- установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм в количестве 2 решетки.

6) по разделу сети пожарной сигнализации:

- извещатель ПС автоматический дымовой фотоэлектрический радиоизотопный световой в нормальном исполнении в количестве 53 шт.;

- извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М) в количестве 53 шт.; 

- прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг. по стене кирпичной 110 м.;

- кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической рензины в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x1x0,5 в количестве 110 м.; 

7) по разделу сети радиовещания:

- громкоговоритель или звуковая колонка в помещении в количестве 15 шт.; 

- радиоприемник Нейва РП-221 (756/11,18x1,03/8.15=80,97) в количестве 15 шт.; 

8) по разделу сети телефонизации:

- коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой в количестве 1 коробка;

- коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 в количестве 1 шт.; 

9) по разделу доступ:

- замок кодовый (867,54/1,18x1,03/8,15=92,92) в количестве 1 шт.;

10) металлический шкаф ШМ-1:

- изготовление металлического шкафа в количестве 0,14634 т. конструкций; 

- петли накладные размером 70x55 мм в количестве 6 комплектов;

- монтаж металлического шкафа из полосовой и тонколистовой стали в количестве 0,14634 т. конструкций;

- конструкции стальные в количестве 0,14634 т.;

- замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ в количестве 6 шт.;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в количестве 7,1 кв.м.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» в пользу администрации Ибресинского района Чувашской Республики 196783 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб. 90 коп. пеней за период с 01.12.2016 по 19.05.2017. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Санар-Строй» в доход федерального бюджета 12904 (Двенадцать тысяч девятьсот четыре) государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

А.Р. Данилов