Арбитражный суд Пензенской области Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, e-mail:penza.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г.Пенза Дело № А49-6707/2021  

Резолютивная часть решения оглашена 6.09.2021 г. 

Полный текст решения изготовлен 13.09.2021 г.  

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Телегина А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1 дело  

по иску: общества с ограниченной ответственностью "Север"  

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>); 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью  

"Евростандарт" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

5837068099); 

третье лицо: администрация Кривошеевского сельсовета  

Нижнеломовского района Пензенской области о взыскании 12 283 742, 10 руб., при участии представителей 

истца: ФИО2, представителя по доверенности  ответчика: не явился, извещен;  

от третьего лица: не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

ООО " Север " обратилось в Арбитражный суд Пензенской области  с иском к ООО "Евростандарт" о взыскании 12 283 742, 10 руб., 12 034  889. 89 руб. – долг по договору субподряда № 1-БлЗастр от 16.06.2020г.,  248 852, 21 руб. – проценты за пользование чужими денежными  средствами по состоянию на 10.07.2021г.  

Как указал истец, что между истцом и ответчиком 16.06.2020г.  заключен договор субподряда № 1 БлЗастр на выполнение работ по  строительству объектов капитального строительства "Жилые помещения  (жилые дома), представляемые гражданам, проживающим и работающим  на сельских территориях, по договорам найма жилого помещения, в с.  Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области".  

Согласно договору оплата выполненных работ производится на  основании актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о  стоимости выполненных работ (КС-3), составленный за отчетный период,  в течении 30 банковских дней с момента их утверждения при получении  оплаты от заказчика.  

Истец свои обязательства по договору выполнил, что  подтверждается актами КС-2, КС-3 на сумму 91 657 881, 51 руб.  

Истец числит долг по договору за ответчиком в сумме 12 034 889,  89 руб.  

За просрочку оплаты долга ответчику начислены проценты за  пользование чужими денежными средствами в сумме 248 852, 21 руб. по  состоянию на 10.07.2021г.  

Поскольку досудебная претензия с требованием оплаты долга  ответчиком оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с  настоящим иском.  

Определением от 14.07.2021г. к участию в деле в качестве третьего  лица судом привлечена администрация Кривошеевского сельсовета  Нижнеломовского района Пензенской области.  

До судебного заседания от администрации Кривошеевского  сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области поступил  отзыв на иск, в котором третьим лицом подтвержден факт приемки и  оплаты ответчику работ по заключенному с ним муниципальному  контракту № 2020.114.15.06.2020г. в сумме 320 031 138, 83 руб.  

Третье лицо считает исковые требования истца обоснованными и  подлежащими удовлетворению.  

В судебном заседании 6.09.2021г. истец поддержал доводы  

искового заявления. Ответчик и третье лицо в заседание суда 6.09.2021г. не явились. Возражений на иск от ответчика не поступило. 

С учетом надлежащего извещения ответчика и третьего лица о  

времени и месте судебного разбирательства на основании ч.3 ст.156  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

рассмотрено судом в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца,  арбитражный суд приходит к выводу, что требования истца подлежат  удовлетворению.  

16.06.2020г. между истцом (субподрядчик) и ответчиком  (подрядчик) был заключен договор субподряда № 1-БлЗастр.  

По условиям договора субподрядчик обязался выполнить работы по  строительству 10 объектов капитального строительства "Жилые  помещения (жилые дома), предоставляемые гражданам, проживающим и  работающим на сельских территориях, по договору найма жилого  помещения, в с. Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской  

области", в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), с  заданием подрядчика, условиями настоящего договора, требованиями  действующих строительных нормативных документов, в сроки, по цене и  на условиях, согласованных сторонами в договоре, а подрядчик обязался  создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.  

Согласно п. 2.1 договора стоимость работ по договору  определяется приложением к договору.  

Согласно п. 1.2 договор заключен во исполнение обязательств  подрядчика по муниципальному контракту № 02020.114 от 15.06.2020г.,  заключенному с администрацией Кривошеевского сельсовета Пензенской  области (заказчик).  

Согласно п. 3.1 договора подрядчик оплачивает выполненные  субподрядчиком работы на основании актов о приемке выполненных  работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, составленных за отчетный период.  

В течение 30 банковских дней с момента их утверждения, при  условии проведения расчетов за соответствующие виды работ между  подрядчиком и заказчиком.  

Согласно п. 4.2 договора субподрядчик обязуется выполнить  работы по договору, а также сдать их результат подрядчику и устранить  выявленные недостатки или дефекты в срок до 1.11.2020г.  

Согласно дополнительному соглашению № 1 к договору  субподрядчик обязуется выполнить работы, а также сдать их результат  подрядчику и устранить выявленные недостатки или дефекты в срок до  1.06.2021г.  

Факт выполнения работ по договору общей стоимостью 91 657 881,  51 руб. подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме  

КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- 3 подписанными сторонами:  

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3   № 1 от 29.06.2020г. на сумму 6 900 993, 07 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.1 от 29.06.2020г. на  сумму 754 829, 11 руб.;  

 - акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.2 от 29.06.2020г. на  сумму 606 043, 21 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.3 от 29.06.2020г. на  сумму 754 829, 11 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.4 от 29.06.2020г. на  сумму 697 813, 24 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.5 от 29.06.2020г. на  сумму 697 813, 24 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.6 от 29.06.2020г. на  сумму 697 813, 24 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.7 от 29.06.2020г. на  сумму 754 829, 11 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.8 от 29.06.2020г. на  сумму 697 813, 24 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.9 от 29.06.2020г. на  сумму 754 829, 11 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 1.10 от 29.06.2020г. на  сумму 697 813, 24 руб.;  

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3   № 2 от 14.09.2020г. на сумму 30 955 782, 66 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 2.1 от 14.09.2020г. на  сумму 5 326 984, 73 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 2.3 от 14.09.2020г. на  

сумму 5 363 685, 04 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 2.4 от 14.09.2020г. на  

сумму 5 320 176, 48 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 2.5 от 14.09.2020г. на  

сумму 5 307 645, 44 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 2.6 от 14.09.2020г. на  

сумму 5 307 645, 44 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 3 от 5.10.2020г. на сумму 20 777 560, 82 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 3.1 от 5.10.2020г. на  

сумму 5 326 984, 73 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 3.2 от 5.10.2020г. на  

сумму 5 323 676, 95 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 3.3 от 5.10.2020г. на  

сумму 5 449 327, 64 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 3.4 от 5.10.2020г. на  

сумму 5 320 176, 48 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 4 от 16.11.2020г. на сумму 11 540 845, 09 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.1 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 283 778, 54 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.2 от 16.11.2020г. на  

сумму 961 279, 58 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.3 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 249 268, 44 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.5 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 190 576, 21 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.6 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 190 576, 21 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.7 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 285 968, 76 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.8 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 190 576, 21 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.9 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 163 632, 25 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 4.10 от 16.11.2020г. на  

сумму 1 190 576, 21 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 5 от 25.11.2020г. на сумму 3 680 758, 05 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.1 от 25.11.2020г. на  

сумму 186 802, 90 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.2 от 25.11.2020г. на  

сумму 104 378, 15 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.3 от 25.11.2020г. на  

сумму 184 619, 11 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.4 от 25.11.2020г. на  

сумму 12 402, 56 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.5 от 25.11.2020г. на  

сумму 17 213, 30 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.6 от 25.11.2020г. на  

сумму 148 707, 81 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.8 от 25.11.2020г. на  

сумму 148 708, 81 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.9 от 25.11.2020г. на  

сумму 176 905, 25 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.10 от 25.11.2020г. на  

сумму 141 316, 09 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.11 от 25.11.2020г. на  

сумму 243 182, 89 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.12 от 25.11.2020г. на  

сумму 1 461 435, 26 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 5.13 от 25.11.2020г. на  

сумму 775 793, 37 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 6 от 23.12.2020г. на сумму 3 417 177, 47 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.1 от 23.12.2020г. на  

сумму 321 766, 76 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.2 от 23.12.2020г. на  

сумму 222 989, 36 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.3 от 23.12.2020г. на  

сумму 316 031, 14 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.4 от 23.12.2020г. на  

сумму 397 498, 88 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.5 от 23.12.2020г. на  

сумму 480 784, 30 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.6 от 23.12.2020г. на  

сумму 349 295, 21 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.8 от 23.12.2020г. на  

сумму 335 094, 23 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.9 от 23.12.2020г. на  

сумму 347 856, 48 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 6.10 от 23.12.2020г. на  

сумму 333 058, 18 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 7 от 26.01.2021г. на сумму 4 146 664, 11 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.1 от 26.01.2021г. на  

сумму 324 541, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.2 от 26.01.2021г. на  

сумму 308 683, 37 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.3 от 26.01.2021г. на  

сумму 324 541, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.4 от 26.01.2021г. на  

сумму 533 612, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.5 от 26.01.2021г. на  

сумму 533 612, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.6 от 26.01.2021г. на  

сумму 533 612, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.7 от 26.01.2021г. на  

сумму 324 541, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.8 от 26.01.2021г. на  

сумму 533 612, 45 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 7.9 от 26.01.2021г. на  

сумму 324 541, 445 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 8 от 11.03.2021г. на сумму 7 166 866, 39 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.1 от 11.03.2021г. на  

сумму 736 954, 25 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.2 от 11.03.2021г. на  

сумму 643 193, 11 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.3 от 11.03.2021г. на  

сумму 736 954, 25 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.4 от 11.03.2021г. на  

сумму 757 905, 67 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.5 от 11.03.2021г. на  

сумму 752 317, 76 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.6 от 11.03.2021г. на  

сумму 757 025, 72 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.7 от 11.03.2021г. на  

сумму 732 304, 08 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.8 от 11.03.2021г. на  

сумму 762 947, 62 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.9 от 11.03.2021г. на  

сумму 751 013, 92 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 8.10 от 11.03.2021г. на  

сумму 757 905, 67 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 9 от 12.03.2021г. на сумму 3 071 233, 85 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.1 от 12.03.2021г. на  

сумму 470 758, 20 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.3 от 12.03.2021г. на  

сумму 470 758, 20 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.4 от 12.03.2021г. на  

сумму 250 492, 12 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.5 от 12.03.2021г. на  

сумму 193 694, 64 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.6 от 12.03.2021г. на  

сумму 370 175, 98 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.7 от 12.03.2021г. на  

сумму 300 365, 75 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.8 от 12.03.2021г. на  

сумму 302 376, 11 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.9 от 12.03.2021г. на  

сумму 438 322, 68 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 9.10 от 12.03.2021г. на  

сумму 188 986, 68 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  

 № 910 от 15.04.2021г. на сумму 578 211, 32 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.1 от 15.04.2021г. на  

сумму 37 933, 49 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.2 от 15.04.2021г. на  

сумму 104 191, 87 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.3 от 15.04.2021г. на  

сумму 37 933, 49 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.4 от 15.04.2021г. на  

сумму 113 389, 43 руб.; 

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.6 от 15.04.2021г. на  сумму 113 389, 43 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.7 от 15.04.2021г. на  сумму 37 933, 49 руб.;  

- акт выполненных работ по форме КС-2 № 10.8 от 15.04.2021г. на  сумму 37 933, 49 руб.;  

На момент рассмотрения дела истец числит за ответчиком долг в  сумме 12 034 889, 89 руб., который и просит взыскать с него.  

В силу ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом.  

В соответствии со ст.702 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу  и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его.  

Согласно ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить  подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Факт выполнения истцом работ по спорному договору  подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.  

Срок оплаты работ с учетом п.3.1. договора истек. 

Доказательств оплаты работ либо иных возражений по  предъявленным требованиям ответчиком не представлено.  

При таких обстоятельствах арбитражный суд признает право истца  на взыскание долга в заявленной сумме 12 034 889, 89 руб.  

В связи с просрочкой оплаты услуг истцом предъявлено требование  о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 248 852, 21 руб., начисленных по состоянию на 10.07.2021г.  

 В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской  Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств,  уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате  проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой  ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти  правила применяются, если иной размер процентов не установлен  законом или договором.  

Расчет процентов представлен в материалы дела. 

Возражений по сумме процентов либо механизму их начисления от  ответчика не поступило.  

Расчет судом проверен и признается соответствующим закону.  

Установив просрочку исполнения денежного обязательства,  арбитражный суд признает право истца на основании ст. 395  Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать уплаты  процентов в заявленном размере.  

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 395,  702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  признает заявленные истцом требования законными, обоснованными и  подлежащими удовлетворению в сумме 12 283 742, 10 руб., в т.ч. долг –  12 034 889, 89 руб., проценты – 248 852, 21 руб.  

В силу ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат  отнесению на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Север» удовлетворить, судебные расходы отнести на ответчика.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Евростандарт» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Север» сумму 12283742,10 руб., в т.ч. долг – 12034889,89 руб., проценты  – 248852,21 руб., а также расходы по государственной пошлине в сумме  84419 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной  жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня  изготовления решения в полном объеме.  

Судья А.П.Телегин