РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-74403/23-110-608

г. Москва

12 сентября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12 сентября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6" (125493, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "БЮРО 22" (127015, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ВЯТСКАЯ УЛ., Д. 49, СТР. 1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 9 785 526,26 руб.,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от  09.01.2023,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БЮРО 22" о взыскании 9 721 776,91 руб. неосновательного обогащения по договору №7-2020-Грайв-СП от 13.02.2020, 63 749,35 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов на сумму 9 721 776,91 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 01.04.2023 по дату фактического исполнения обязательства.   

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». Иск не признали, по мотивам, изложенным в отзыве.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Акционерным обществом «Мосфундаментстрой-6» (далее – Заказчик, АО «МФС-6») и Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро 22» (далее –  Проектировщик, ООО «Бюро 22») был заключен Договор № 7-2020-Грайв-СП от 13.02.2020 г. на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг авторского надзора за выполнением работ по строительству объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Текстильщики, кв-л Грайвороново, 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) (Юго-Восточный административный округ).

Согласно условиям Договора Проектировщик принял на себя обязательство выполнить комплекс работ по проектированию объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Текстильщики, кв-л Грайвороново, 90А, з/у 1 (Грайвороново, квартал 90А) Юго-Восточный административный округ (далее - Объект), включая получение исходных данных, технических условий, разработку Проектной документации (включая сметную документацию) и ее согласованию в объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы на указанную документацию и положительного заключения Мосгосэкспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости, по разработке в полном объеме, необходимом для строительства, Рабочей документации (включая сметную документацию),  оплату и получение всех необходимых согласований и разрешений, и оказать услуги по ведению авторского надзора на период строительства Объекта в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы (услуги).

Заказчиком была произведена оплата выполненных работ в сумме 17 615 352,91 руб., выплачены авансы в сумме 19 118 580,54 руб., а также прекращены обязательства зачетом на сумму 753 924,27 руб. 

Таким образом, Заказчиком в адрес Проектировщика во исполнение Договора  было перечислено 37 487 857,72 руб., что подтверждается следующими документами: платежные поручения №725 от 04.03.2020, №1568 от 22.04.2020, №80443 от 10.11.2020, №190122 от 30.12.2020, №270 от 25.01.2021, №1565 от 19.03.2021, №2057 от 02.04.2021, №186869 от 17.05.2021, №186871 от 17.05.2021, №187846 от 17.06.2021, №188377 от 06.07.2021, №1810 от 18.03.2022, №1811 от 18.03.2022, №1809 от 18.03.2022, №86897 от 22.04.2022, №86896 от 22.04.2022, №86898 от 22.04.2022, №194848 от 05.07.2022, уведомление о зачете от 01.07.2022 №Исх/22/2953.

Несмотря на вышеизложенное и установленные Договором сроки выполнения работ, Проектировщик выполнил работы с нарушением установленных сроков и только на сумму 27 766 080,81 руб., что подтверждается Актом №1 от 15.12.2020, Актом №4 от 10.03.2021, Актом №10 от 22.03.2021, Актом №12 от 29.04.2021, Актом №17 от 30.04.2021, Актом №23 от 15.06.2021, Актом №28 от 14.03.2022, Актом №36 от 14.03.2022, Актом №37 от 14.03.2022, Актом №39 от 12.04.2022, Актом №40 от 12.04.2022, Актом №41 от 12.04.2022, Актом №42 от 29.06.2022

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 17.3.1. Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае нарушения Проектировщиком сроков выполнения работ (оказания услуг) и отдельных видов работ (услуг), установленных в Графике производства работ.

Пунктом 1 ст 450.1 ГК РФ предусмотрено, что право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено законом или договором.

19.01.2023г. АО «МФС-6» в адрес ООО «Бюро 22» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора №7-2020-Грайв-СП от 13.02.2020 (Исх/23/159) в связи с нарушением ООО «Бюро 22» сроков выполнения работ по Договору с требованием о возврате неотработанного аванса в сумме 9 721 776,91 руб.

Уведомление получено ООО «Бюро 22» 26.01.2023г., соответственно Договор считается расторгнутым 26.01.2023г.

В соответствии с п. 17.6 Договора при расторжении Договора Проектировщик возвращает Заказчику в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные финансовые ресурсы и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения договорных обязательств, а также передает разработанную проектную документацию и иные документы и материалы, полученные в результате исполнения настоящего Договора.

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Однако, до настоящего момента возврат неотработанного аванса Проектировщиком не произведен.

В силу п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, размер неосновательного обогащения составляет 9 721 776,91 руб.

Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения в соответствии со ст. 395 ГК РФ подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами  с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составил:

9 721 776,91 * 7,5%/ 366 *32 дня просрочки (с 28.02.2023 по 31.03.2023) = 63 749,35 руб.

Кроме того, с ответчика подлежат взысканию проценты на сумму  9 721 776 руб. 91 коп., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды,  с  01.04.2023 по день фактической оплаты.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "БЮРО 22" (ОГРН: 

<

***>) в пользу  акционерного общества "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6" (ОГРН: 

<

***>) сумму неосновательного обогащения  в размере 9 721 776 руб. 91 коп., 63 749 руб. 35  коп. процентов,  проценты на сумму  9 721 776 руб. 91 коп., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды,  с  01.04.2023 по день фактической оплаты, 71 928 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1